NÁVRH
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 
z 

k návrhu na realizáciu stavby, u ktorej v priebehu realizácie skutočná obstarávacia   cena dosiahla 100 mil. Sk „Prešov – palivové hospodárstvo“   

Číslo materiálu:		
Predkladateľ:	minister obrany	
Vláda
A.       schvaľuje 
 
A.1. návrh  na  realizáciu dostavby akcie „Prešov – palivové hospodárstvo“;

B.      súhlasí  
 
B.1. s realizáciou stavby, u ktorej v priebehu realizácie skutočná obstarávacia cena stavebných prác a dodávok dosiahla 100 mil. Sk z dôvodu zmien v projektovej dokumentácii, naviac prác a zastavenia realizačných prác v rokoch 1999 – 2002 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov;

C.	  ukladá 
   ministrovi obrany
 
   C.1. zabezpečiť realizáciu stavby v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 
	
v rokoch 2004 - 2005

Vykoná :	minister obrany