Príloha č. 5: Harmonogram plnenia projektu KONS IS
Termín	Popis	Stav k 31.8.2011	
17. 6. 2011	•	Odladenie štruktúry a rozsahu migrácie saldokonta do KONS IS z reRDS	Štruktúra úvodnej migrácie pre testovanie bola dohodnutá, čaká sa na testovaciu vzorku dát zo strany Novitechu	
30. 6. 2011	•	Uzavretie vecného rozsahu aplikácie reRDS (vstup na obchodné rokovanie)
•	Uzavretie vecnej dohody o súčinnosti nového a súčasného dodávateľa daňového informačného systému pri migráciách 
•	Uzavretie organizačnej štruktúry a popisu rolí 	Stále neuzavreté medzi riešiteľmi 

Dohoda uzavretá

K dispozícii je pracovný návrh, ktorý je pre účely tohto projektu dostatočný	
15. 7. 2011	•	Ukončené a uzavreté funkčné špecifikácie obidvoch systémov 	Neuzavreté:
-	Zmluva s Novitechom na dodávku re RDS neuzavretá, dodanie funkčných špecifikácií nie je zatiaľ dohodnuté (predpoklad uzavretia 31.8.2011)
-	BankPro Soft dodal Funkčné špecifikácie, DR SR rozporuje, že nie sú v dostatočnom detaile – Funkčné špecifikácie budú spresňované počas testovania aplikácie	
31. 7. 2011	•	Vydanie vykonávacej vyhlášky k zákonu č. 563/2009 Z.z. (§ 55 ods. 4 ) „Povinnosť označovania platby dane daňovým subjektom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo.“	Nie je vydaná. 	
31. 8. 2011	•	Ukončená príprava testovania aplikácií, pracovných inštrukcií a organizačných opatrení
•	 Pripravený popis organizačných opatrení na prechodné obdobie 	-	Prípravné práce pre 1.etapu testovania boli zahájené, pripravujú sa základy testovacích scenárov
-	Harmonogram bude prehodnotený v 9/2011	
15.9.2011
	•	Dodaná aplikácia KONS IS vrátane rozhraní a pripravená na testovanie (dodávka 95% funkcií, ktoré musia byť v zmysle legislatívy funkčné k 1.1. 2012),
•	Dodaná aplikácia reRDS a pripravené na testovanie
•	Ukončený popis a pripomienkovanie pracovných inštrukcií	-	Aplikácia bude dodávaná po etapách podľa schváleného harmonogramu. K 15.9.2011 bude dodaná 1.etapa (viď popis v časti Stav projektu)

-	Zmluva o dodávke nie je zatiaľ podpísaná
-	Pracovné inštrukcie budú vzhľadom na zmenu harmonogramu dodávok a podkladov pripravované počas testovania aplikácie	
15. 9.2011	•	Ukončená implementácia DMS, časť Registratúra a integrácia s DMS, eTax, Scan	Nie je splatné	
1.10.2011	•	Skúšobná migrácia kompletných dát do KONS IS	Nie je splatné	
15. 10. 2011	•	Známe obsadenie rolí kvôli školeniam	Nie je splatné	
31.10.2011	•	Ukončená integrácia s  ostatnými IS	Nie je splatné	
7.1.2012	•	Ukončovanie rozpracovaných aktivít v produkčnom DIS-e.	Nie je splatné	
15.9.-31.12.2011	•	V období 15.9.-31.12/2011 bude prebiehať  intenzívne testovanie a doladenie obidvoch systémov princípom interaktívneho vývoja:
o	 otestovať spísať chyby a požiadavky na zmenu/dorábku funkcionality
o	 min 1x týždne meeting k prioritizácii chýb a požiadaviek a dohoda o termíne dodávky
	Nie je splatné	
10-11/2011	•	Testovanie a ladenie pracovných inštrukcií	Nie je splatné	
9/2011-1/2012	•	Implementácia  organizačných opatrení  	Nie je splatné	
01/2012	•	Ostrá transformácia dát reRDS
•	Migrácia dát do KONS IS	Nie je splatné	
01/2012	•	Spustenie produktívnej prevádzky KONS a reRDS	Nie je splatné