Title: 1
Author: mazancova
Last saved by: aa
Company: MZP

Príloha
1. SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

Žiadateľ
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.	
Ciele projektu
-	zabezpečenie odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v rámci 3 aglomerácií 
-	rozšírenie a rekonštrukcia ČOV Liptovská Teplá.
Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 40 116
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 5 730
Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV: 7 207

Financovanie projektu
| Eur
Celkové výdavky projektu bez DPH | 22 488 597,28
Oprávnené výdavky | 20 432 443,12
- ŠR SR | 2 576 012,14
- EÚ | 14 597 402,13
- Žiadateľ | 3 259 028,85
Neoprávnené výdavky (bez DPH) - žiadateľ | 2 056 154,16

Časový harmonogram realizácie 
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 04/2009 | 09/2009
Analýza nákladov a výnosov | 10/2009 | 11/2009

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

04/2005
11/2009

08/2005
11/2009

Príprava súťažných podkladov | 09/2009 | 02/2010
Výber zhotoviteľa | 03/2010 | 08/2010
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 09/2010 | 03/2013
Skúšobná prevádzka | 04/2013 | 03/2014
Ukončenie projektu | - | 03/2014

Časový harmonogram schvaľovania dokumentácie
Dokument | predloženie | schválenie
Projektový zámer veľkého projektu | 16.12.2008 | 18.3.2009
Štúdia uskutočniteľnosti | 30.6.2009 | 7.9.2009
Žiadosť o potvrdenie pomoci | 7.12.2009 | 22.3.2010
Žiadosť o NFP | 7.4.2010 | 30.4.2010*
Predloženie Európskej komisii | 4.5.2010 |
* ukončenie odborného hodnotenia ŽoNFP
2. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava

Žiadateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ciele projektu
-	zabezpečenie odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v rámci 4 aglomerácií 
-	intenzifikácia ČOV Dubnica nad Váhom, prebudovanie ČOV Ilava na čerpaciu stanicu  
-	rozšírenie vodovodnej siete.
Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 13 891
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 47 600
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 3 222
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 6 070
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 44 792

Financovanie projektu
| Eur
Celkové výdavky projektu bez DPH | 55 462 034,58
Oprávnené výdavky | 54 264 563,00
- ŠR SR | 6 511 974,18
- EÚ | 36 901 187,00
- Žiadateľ | 10 851 401,83
Neoprávnené výdavky (bez DPH) - žiadateľ | 1 197 471,58
Časový harmonogram realizácie
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 08/2008 | 09/2009
Analýza nákladov a výnosov | 04/2009 | 03/2010
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie | 06/2004 | 11/2009
Príprava súťažných podkladov | 11/2009 | 09/2010
Výber zhotoviteľa | 09/2010 | 02/2011
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 03/2011 | 12/2013
Skúšobná prevádzka | 01/2014 | 12/2014
Ukončenie projektu | | 01/2015

Časový harmonogram schvaľovania dokumentácie
Dokument | predloženie | schválenie
Projektový zámer veľkého projektu | 6.10.2008 | 18.3.2009
Štúdia uskutočniteľnosti | 2.6.2009 | 7.9.2009
Žiadosť o potvrdenie pomoci | 2.12.2009 | 27.4.2010
Žiadosť o NFP | 7.6.2010 | 28.7.2011*
Predloženie Európskej komisii | 3.9.2010 |
* ukončenie odborného hodnotenia ŽoNFP 

3. Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

Žiadateľ - Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Ciele projektu
-	zabezpečenie odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v rámci 6 aglomerácií 
-	intenzifikácia 4 ČOV a vybudovanie 1 novej ČOV  
-	rozšírenie vodovodnej siete.

Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 26 606
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 58 768
Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV v ks: 1/ 4
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 3 121
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 12 529
Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV: 4 927/ 94 455
Financovanie projektu
| Eur
Celkové výdavky projektu bez DPH | 70 360 979,54
Oprávnené výdavky | 69 558 918,54
- ŠR SR | 8 531 380,52
- EÚ | 48 344 489,59
- Žiadateľ | 12 683 048,44
Neoprávnené výdavky (bez DPH) - žiadateľ | 802 061,00
Časový harmonogram realizácie 
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 03/2009 | 09/2009
Analýza nákladov a výnosov | 03/2009 | 03/2010
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie | 09/2006 | 12/2009
Príprava súťažných podkladov | 12/2009 | 05/2010
Výber zhotoviteľa | 07/2010 | 11/2010
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 12/2010 | 12/2013
Skúšobná prevádzka | 01/2014 | 12/2014
Ukončenie projektu | | 01/2015
Časový harmonogram schvaľovania dokumentácie
Dokument | predloženie | schválenie
Projektový zámer veľkého projektu | 30.10.2008 | 18.3.2009
Štúdia uskutočniteľnosti | 2.6.2009 | 2.9.2009
Žiadosť o potvrdenie pomoci | 14.12.2009 | 21.4.2010
Žiadosť o NFP | 23.6.2010 | 8.9.2010*
Predloženie Európskej komisii | 21.9.2010 | -
* ukončenie odborného hodnotenia ŽoNFP 

4. Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2

Žiadateľ
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu
-	zabezpečenie odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v rámci 8 aglomerácií 
-	rozšírenie a rekonštrukcia 2 ČOV.

Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 136 297
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 2
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 18 801
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 48 765
Financovanie projektu
| Eur
Celkové výdavky projektu bez DPH | 73 902 510,98
Oprávnené výdavky | 72 274 032,98
- ŠR SR | 9 218 595,96
- EÚ | 52 238 710,42
- Žiadateľ | 10 816 726,60
Neoprávnené výdavky (bez DPH) - žiadateľ | 1 628 478,00

Časový harmonogram realizácie
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 03/2009 | 07/2010
Analýza nákladov a výnosov | 10/2009 | 07/2010
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie | 03/2004 | 01/2010
Príprava súťažných podkladov | 11/2009 | 10/2010
Výber zhotoviteľa | 10/2010 | 12/2010
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 12/2010 | 12/2012
Skúšobná prevádzka | 01/2013 | 12/2013
Ukončenie projektu | - | 01/2014

Časový harmonogram schvaľovania dokumentácie
Dokument | predloženie | schválenie
Projektový zámer veľkého projektu | 14.10.2008 | 18.3.2009
Štúdia uskutočniteľnosti | 4.6.2009 | 15.10.2009
Žiadosť o potvrdenie pomoci | 22.12.2009 | 11.8.2010
Žiadosť o NFP | 26.8.2010 | 25.3.2011*
Predloženie Európskej komisii | 20.4.2011 | -
* ukončenie odborného hodnotenia ŽoNFP

5. Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza 

Žiadateľ
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu
-	zabezpečenie odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v rámci 6 aglomerácií 
-	rozšírenie a rekonštrukcia 1 ČOV.

Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 120 919
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 16 063
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 74 349
Financovanie projektu
| Eur
Celkové výdavky projektu bez DPH | 80 049 209,04
Oprávnené výdavky | 79 510 237,00
- ŠR SR | 9 674 134,76
- EÚ | 54 820 096,99
- Žiadateľ | 15 016 005,25
Neoprávnené výdavky (bez DPH) - žiadateľ | 538 972,04

Časový harmonogram realizácie
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 09/2005 | 10/2009
Analýza nákladov a výnosov | 01/2010 | 02/2010
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie | 09/2005 | 12/2009
Príprava súťažných podkladov | 12/2009 | 02/2010
Výber zhotoviteľa | 01/2010 | 12/2010
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 01/2011 | 06/2014
Skúšobná prevádzka | 07/2014 | 06/2015
Ukončenie projektu | | 12/2015

Časový harmonogram schvaľovania dokumentácie
Dokument | predloženie | schválenie
Projektový zámer veľkého projektu | 3.11.2008 | 18.3.2009
Štúdia uskutočniteľnosti | 14.7.2009 | 27.10.2009
Žiadosť o potvrdenie pomoci | 15.3.2010 | 11.8.2010
Žiadosť o NFP | 13.9.2010 | 25.3.2011*
Predloženie Európskej komisii | 29.4.2011 |
* ukončenie odborného hodnotenia ŽoNFP 

6. Projekt ČOV - sever

Žiadateľ
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu
-	zabezpečenie odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v rámci 7 aglomerácií 
-	rozšírenie a rekonštrukcia 3 ČOV.

Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 96 559
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 3
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 11 387
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 112 159

Financovanie projektu
| Eur
Celkové výdavky projektu bez DPH | 86 146 770,53
Oprávnené výdavky | 84 738 886,29
- ŠR SR | 9 741 519,40
- EÚ | 55 201 943,26
- Žiadateľ | 19 795 423,63
Neoprávnené výdavky (bez DPH) - žiadateľ | 1 407 884,24

Časový harmonogram realizácie
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 05/2009 | 02/2010
Analýza nákladov a výnosov | 04/2010 | 10/2010
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie | 11/2009 | 02/2010
Príprava súťažných podkladov | 05/2010 | 11/2010
Výber zhotoviteľa | 11/2010 | 04/2011

Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV
Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia

04/2011
04/2011

11/2013
10/2013

Skúšobná prevádzka | 12/2013 | 09/2014
Ukončenie projektu | - | 03/2015
Časový harmonogram schvaľovania dokumentácie
Dokument | predloženie | schválenie
Projektový zámer veľkého projektu | 7.10.2008 | 18.3.2009
Štúdia uskutočniteľnosti | 16.10.2009 | 18.2.2010
Žiadosť o potvrdenie pomoci | 31.05.2010 | 08.12.2010
Žiadosť o NFP | 23.12.2010 | 25.03.2011*
Predloženie Európskej komisii | 10.5.2011 |
* ukončenie odborného hodnotenia ŽoNFP

7. Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu

Žiadateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu
-	Rekonštrukcia a modernizácia jestvujúcich čistiarní odpadových ČOV Petržalka a ÚČOV Vrakuňa

Indikátory projektu
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 2
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV:  618 245
Financovanie projektu
| Eur
Celkové výdavky projektu bez DPH | 42 372 186,16
Oprávnené výdavky | 38 317 876,20
- ŠR SR | 4 543 492,72
- EÚ | 25 746 458,77
- Žiadateľ | 8 027 924,71
Neoprávnené výdavky (bez DPH) - žiadateľ | 4 054 309,96

Časový harmonogram realizácie 
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 10/2005 | 04/2006
Analýza nákladov a výnosov | 02/2010 | 04/2010
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie | 05/2006 | 03/2010
Príprava súťažných podkladov | 06/2009 | 07/2009
Výber zhotoviteľa | 12/2009 | 12/2010
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 01/2011 | 06/2013
Skúšobná prevádzka | 07/2013 | 06/2014
Ukončenie projektu | | 07/2014

Časový harmonogram schvaľovania dokumentácie
Dokument | predloženie | schválenie
Projektový zámer veľkého projektu | 17.12.2008 | 15.4.2009
Štúdia uskutočniteľnosti | 2.6.2009 | 6.10.2009
Žiadosť o potvrdenie pomoci | 31.3.2010 | 16.7.2010
Žiadosť o NFP | 29.7.2010 | 22.10.2010*
Predloženie Európskej komisii | |
* ukončenie odborného hodnotenia ŽoNFP

8. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča

Žiadateľ
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Ciele projektu
-	zabezpečenie odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v rámci 2 aglomerácií 
-	intenzifikácia a rekonštrukcia ČOV Bytča 
-	rozšírenie vodovodnej siete.

Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 54 916
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 64 945
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody:  8 628
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 11 141
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 23 320
Financovanie projektu
| Eur
Celkové výdavky projektu bez DPH | 55 298 800,00
Oprávnené výdavky | 54 458 270,50
- ŠR SR | 5 842 564,31
- EÚ | 33 107 864,44
- Žiadateľ | 15 507 841,75
Neoprávnené výdavky (bez DPH) - žiadateľ | 840 529,50
Časový harmonogram realizácie
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 01/2010 | 05/2010
Analýza nákladov a výnosov | 06/2010 | 07/2010

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

02/2004
05/2010

05/2004
06/2010

Príprava súťažných podkladov | 12/2010 | 04/2011
Výber zhotoviteľa | 01/2011 | 06/2012
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 01/2013 | 02/2015
Skúšobná prevádzka | 03/2015 | 10/2015
Ukončenie projektu | - | 10/2015
Časový harmonogram schvaľovania dokumentácie
Dokument | predloženie | schválenie
Projektový zámer veľkého projektu | 30.10.2008 | 18.3.2009
Štúdia uskutočniteľnosti | 22.2.2010 | 21.5.2010
Žiadosť o potvrdenie pomoci | 16.8.2010 | 23.2.2011
Žiadosť o NFP | 4.3.2011 | 10.5.2011 informácia o nepredlož. EK

9. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva

Žiadateľ 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu
-	zabezpečenie odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v rámci 7 aglomerácií 
-	intenzifikácia a rekonštrukcia ČOV Moldava nad Bodvou a ČOV Šaca
-	rozšírenie vodovodnej siete.

Indikátory projektu
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m:  71 572
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m:  68 203
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 2
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody:   7 938   
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť:  10 333
Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV:   24 445
Financovanie projektu
| Eur
Celkové výdavky projektu bez DPH | 64 518 495,05
Oprávnené výdavky | 64 041 204,55
- ŠR SR | 6 465 183,57
- EÚ | 36 636 040,23
- Žiadateľ | 20 939 980,75
Neoprávnené výdavky (bez DPH) - žiadateľ | 477 290,50
Časový harmonogram realizácie
Činnosť | Zahájenie | Ukončenie
Štúdia uskutočniteľnosti | 11/2008 | 05/2009
Analýza nákladov a výnosov | 11/2008 | 06/2010
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 04/2007 | 03/2010
Príprava súťažných podkladov | 06/2010 | 10/2010
Výber zhotoviteľa | 07/2006 | 09/2011
Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 11/2011 | 06/2015
Skúšobná prevádzka | 01/2015 | 12/2015
Ukončenie projektu | | 12/2015
Časový harmonogram schvaľovania dokumentácie
Dokument | predloženie | schválenie
Projektový zámer veľkého projektu | 6.11.2008 | 15.4.2009
Štúdia uskutočniteľnosti | 3.7.2009 | 26.2.2010
Žiadosť o potvrdenie pomoci | 15.7.2010 | 4.7.2011
Žiadosť o NFP | - | -