Správa o stave plnenia úloh Akčného plánu Stratégie informatizácie spoločnosti za rok 2006

Slovenská republika sa oficiálne prihlásila k iniciatíve eEurope+ uznesením vlády SR č. 522 z 13. júna 2001, ktorým bol schválený základný dokument v oblasti informatizácie spoločnosti: „Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike“. Na základe vyššie uvedeného uznesenia vlády SR bol predložený „Návrh Stratégie informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčného plánu“, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 43 z 21. januára 2004.
Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyplývala úloha každoročne v termíne do 31. marca počínajúc rokom 2006 predkladať na rokovanie vlády správu o stave plnenia úloh Akčného plánu Stratégie informatizácie spoločnosti za predošlý rok a aktualizáciu úloh akčného plánu v ďalších rokoch. Zákonom č. 678/2006 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.575 /2001 Z. z. o organizácii činností vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, došlo k presunu práv a kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti. K 1. februáru 2007 na základe tohto zákona preberá úlohu - predložiť správu o stave plnenia úloh Akčného plánu Stratégie informatizácie spoločnosti za predošlý rok a aktualizáciu úloh akčného plánu v ďalších rokoch - Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Akčný plán Stratégie informatizácie spoločnosti (ďalej len AP) je konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich s procesom informatizácie spoločnosti. AP obsahuje záväzky týkajúce sa plnenia jednotlivých úloh ako aj zoznam inštitúcií zodpovedných za ich plnenie. Ministerstvo financií SR zabezpečuje monitorovanie plnenia jednotlivých čiastkových úloh ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
Predmetný materiál je harmonizovaný:
•	s uznesením vlády SR č. 797 z 12. októbra 2005 k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008,
•	s uznesením vlády SR č. 837 z 19. októbra 2005 – Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy
•	s uznesením vlády SR č. 574 z 13. júla 2005 – Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010.
Materiál „Správa o stave plnenia úloh Akčného plánu Stratégie informatizácie spoločnosti za rok 2006 a aktualizácia úloh akčného plánu v ďalších rokoch“ obsahuje súhrn konkrétnych krokov, ktoré vykonali príslušné ústredné orgány štátnej správy pre zabezpečenie plnenia úloh AP. Materiál zároveň obsahuje aj celkové hodnotenie plnenia týchto úloh. Úlohy, ktorým bol zmenený termín plnenia, resp. nové úlohy sú súčasťou návrhu AP na rok 2007.
AP na rok 2006 obsahoval celkovo 47 úloh. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako gestor úloh riešilo spoločne s inými inštitúciami 18 úloh vyplývajúcich z AP. Z celkového počtu úloh AP bolo splnených 13 úloh, úloh plnených v stanovenom termíne 15 (týka sa to úloh, ktorých termín splnenia je rok 2006 alebo neskorší). Úloh, ktoré sa plnia s časovým sklzom bolo 18 a úloh, ktoré neboli splnené v stanovenom termíne bolo 1.
Úlohy AP na rok 2006 delíme tiež na nosné a podporné. Z celkového počtu 5 nosných úloh, ktorých gestorom bolo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, sú splnené 4 úlohy a 1 úloha sa plní v stanovenom termíne. Podporných úloh, ktorých gestorom bolo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR bolo spolu 13. Z nich 1 bola vyhodnotená ako splnená, 9 sa plní v stanovenom termíne a 3 sa plnia s časovým sklzom termínu realizácie.
V nasledujúcej časti sú uvedené všetky úlohy z AP vyhodnotené podľa plnenia merateľných ukazovateľov.

Číslo úlohy:
A.2	Názov úlohy:
Zabezpečiť prevádzkovanie - obsah a aktualizácia - centrálneho portálu. Zabezpečiť prostredie pre realizáciu elektronických služieb poskytovaných štátnou správou občanom prostredníctvom internetu v rámci centrálneho portálu.	
Gestor úlohy: Vedúci úradu vlády SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úloha je splnená	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	pripraviť analýzu
začatie testovacej prevádzky vstupného bodu
ukončenie testovacej prevádzky vstupného bodu a jeho odovzdanie do používania	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	V prvej polovici roka 2006 prebehla testovacia prevádzka vstupného bodu a po jej ukončení bol ústredný portál odovzdaný do používania.
Od 1. 7. 2006 je v prevádzke Ústredný portál verejnej správy a občanom je voľne prístupný na internete na adrese: http://portal.gov.sk	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	36 000 000,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Rozpočtovým opatrením MF SR č.8 z 9. 3. 2006 boli presunuté finančné prostriedky vo výške 36 mil.,- Sk z prvku 07T0104 Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti z kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do rozpočtu Úradu vlády SR. Prostriedky boli použité na zabezpečenie pilotnej i ostrej prevádzky Ústredného portálu verejnej správy počas celého roka 2006.	

Číslo úlohy:
A.3	Názov úlohy:
Vytvorenie základných systémových predpokladov pre tvorbu štandardizovaného informačného obsahu a e-služieb vo verejnej správe, resp. e-Government. Vypracovať "cestovnú mapu" k e-Governmentu.	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úloha je splnená	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	schválenie návrhu zákona o informačných systémoch verejnej správy v Národnej rade SR
výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR k štandardom informačných systémov verejnej správy	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Úloha splnená v zadanom termíne.

Cestovná mapa bola schválená 19. 10. 2005 uznesením vlády SR č. 837/2005. 
Sekcia informatizácie spoločnosti pripravila návrh zákona o informačných systémoch verejnej správy, ktorý bol v roku 2006 schválený Národnou radou SR. Zákon č. 275/2006 Z.z. o  informačných systémoch verejnej správy nadobudol účinnosť 1. júna 2006, na ktorého základe bol vydaný výnos č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy  s účinnosťou od 1. augusta 2006.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	30 mil.,- Sk – na vypracovanie „cestovnej mapy“	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	30,6 mil.,- Sk – „cestovná mapa“ – prostriedky čerpané v roku 2005	

Číslo úlohy:
A.4	Názov úlohy:
Aktívna účasť na komunitárnych programoch EÚ v oblasti IS (IDAbc, eContentplus, MODINIS, eTEN, Safer Internetplus).	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme v stanovenom termíne	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	vytvorenie národných kontaktných bodov pre koordináciu relevantných programov Spoločenstva, aktívna účasť na zasadnutiach výborov a pracovných skupín	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Zamestnanci sekcie informatizácie spoločnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR sa pravidelne zúčastňovali na zasadaniach rady, výborov a pracovných skupín týkajúcich sa informatizácie spoločnosti pri Európskom spoločenstve podľa plánov jednotlivých komisií a výborov. Poskytujú zároveň aktívnu spoluprácu na úrovni národných kontaktných bodov.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	2 mil.,- Sk ročne	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	1,9 mil.,- Sk – rok 2005
1,7 mil.,- Sk – rok 2006	

Číslo úlohy:
A.5	Názov úlohy:
Stimulovať tvorbu digitálneho obsahu - informácií a služieb - zameraného na praktické použitie z pohľadu občana a súkromného sektoru.	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme v stanovenom termíne	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	2006 - zabezpečiť obyvateľstvu možnosť elektronického overovania stavu aktualizácie referenčných údajov a stav spracovania požiadaviek občanov, zabezpečiť sprevádzkovanie služby overovania dokladov a overenia osobných údajov formou www rozhrania, zabezpečenie pripojenia dvoch ústredných orgánov štátnej správy na synchronizáciu referenčného registra obyvateľov, zabezpečenie sprevádzkovania služby na kontrolu podkladov podaní pre verejnú správu	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Referenčný zdroj údajov bol vytvorený na MV SR. Služba overovania dokladov je v súčasnosti realizovaná v skúšobnej prevádzke.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	0,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	0,- Sk	

Číslo úlohy:
A.6	Názov úlohy:
Vytvoriť systém manažmentu obsahu internetových stránok rezortov, zjednotiť charakter poskytovaného obsahu, formu a dizajn internetových stránok rezortov (WAI guidelines).	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úloha je splnená	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	vydanie výnosu o štandardoch	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy bol vydaný dňa 14. júla 2006.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Finančné prostriedky nie sú vyčlenené.	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Finančné prostriedky neboli čerpané.	

Číslo úlohy:
A.7	Názov úlohy:
Legislatívne zabezpečiť komplexný proces informatizácie verejnej správy vypracovaním zákona o informatizácii verejnej správy v súčinnosti s novelizáciou zákonov č. 575/2001 Z. z., č. 369/1991 Z.z., č. 302/2001 Z.z. a zákona č. 261/1995 Z.z. 	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR	
Termín úlohy:	2007	
Plnenie úlohy:	úlohu neplníme	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Navrhujeme zrušenie úlohy.	
Merateľné ukazovatele pokroku:	vypracovanie zákona o informatizácií verejnej správy	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 0 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Termín plnenia úlohy bol so súhlasom podpredsedu vlády SR posunutý na apríl 2007.
Úlohu navrhujeme zrušiť vzhľadom k tomu, že uznesením 1056/2006 z 13. decembra 2006 bolo definované opatrenie v znení „Príprava právnej úpravy – zákon o elektronickej verejnej správe“ s termínom plnenia v roku 2008.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Finančné prostriedky nie sú vyčlenené.	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Finančné prostriedky neboli čerpané.	

Číslo úlohy:
B.1	Názov úlohy:
Zvyšovanie počítačovej gramotnosti špecifických skupín obyvateľstva (žien, špeciálne žien, ohrozených nezamestnanosťou, rómskych spoluobčanov, zdravotne postihnutých občanov, seniorov, občanov s menšími rozvojovými šancami - vidiecke obyvateľstvo.	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úloha je splnená	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	podporiť minimálne 200 projektov na zvyšovanie digitálnej gramotnosti špec. skupín obyvateľstva	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR podporilo okolo 900 projektov zameraných na zvyšovanie digitálnej gramotnosti obyvateľstva prostredníctvom jesennej výzvy v roku 2005 a jarnej výzvy v roku 2006. Cieľom je podpora vzdelávania špecifických skupín obyvateľstva, a to žien, špeciálne žien ohrozených nezamestnanosťou, rómskych spoluobčanov, zdravotne postihnutých občanov, seniorov, občanov s menšími rozvojovými šancami – vidiecke obyvateľstvo. Väčšina projektov bola realizovaná na školách v rámci tzv. Digitálneho štúrovstva, pričom boli efektívne využité personálne, technické a priestorové kapacity školy pre lokálnu komunitu.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	120 mil.,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	120 mil.,- Sk	

Číslo úlohy:
1.a.1	Názov úlohy:
Stimulovať zvýšenú flexibilitu pri regulácii e-obchodu so zameraním na spoločnú reguláciu a samoreguláciu, napr. prostredníctvom spolupráce s relevantnými obchodnými skupinami, ako sú Global Business Dialogue. (www.gbde.org)	
Gestor úlohy: Minister hospodárstva SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Po transpozícií celého radu smerníc Európskeho parlamentu a Rady, týkajúcich sa predmetnej problematiky do slovenského právneho poriadku, sa v roku 2006 analyzovala situácia v tejto problematike. Za SR bola spracovaná pre potreby Európskej komisie, štúdia so zameraním na e-obchodovanie a e-podpis, ktorá analyzovala podmienky a ešte pretrvávajúce bariéry v tejto oblasti. Ide o štúdiu právnych a administratívnych postupov ohľadom platnosti a vzájomného uznávania elektronických dokumentov (spracovateľ – zamestnanec Národného bezpečnostného úradu SR). Európska komisia posudzovala postupy SR a na základe jej požiadaviek a konkrétnych otázok bol spracovaný Ministerstvom hospodárstva SR – OVT dotazník, ktorého cieľom bolo sprehľadniť situáciu v tejto oblasti a porovnať pretrvávajúce bariéry v jednotlivých členských krajinách. Informácie o stave e- obchodovania v SR boli čiastočne zverejnené aj na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR. Bola vytvorená e-mailová schránka na Ministerstve hospodárstva SR pre operatívny kontakt s orgánmi Európskej únie. Bol tiež vytvorený priamy prístup na webovú stránku ministerstva, do časti e-obchod, kde boli zverejnené čiastočné informácie o stave tejto problematiky v SR. Informácie, ktoré sa budú priebežne aktualizovať, sú prístupné v slovenskom aj anglickom jazyku, a teda sú sprístupnené aj pre záujemcov o túto oblasť z Európskej únie. Adresy boli oznámené aj Európskej komisii. Ďalšie kroky v tejto oblasti závisia aj od podnetov z expertnej pracovnej skupiny pre e-obchod v Bruseli	
Merateľné ukazovatele pokroku:	spolupráca s relevantnými obchodnými skupinami	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 50 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Úloha sa plní priebežne.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Finančné prostriedky nie sú vyčlenené.	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Finančné prostriedky neboli čerpané.	

Číslo úlohy:
1.a.2	Názov úlohy:
Podporovať elektronizáciu malých a stredných podnikov ("Go Digital") koordináciu  vzájomnej výmeny vedomostí a informácií o praktických príkladoch, pripravenosti na e-obchod a meraní ukazovateľov (benchmarking). Zriadiť "referenčné centrá" s úlohou pomôcť malým a stredným podnikom začleniť e-obchod do obchodných stratégií. 	
Gestor úlohy: Minister hospodárstva SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Prvá časť úlohy sa plní z podnetu aktivít podnikateľskej sféry. Ďalšia časť úlohy sa bude napĺňať po zavedení e-podpisu vo verejnej správe. Na Ministerstvo hospodárstva SR a na mnohých ďalších inštitúciách bola inštalovaná aplikácia pre vytváranie a overovanie e-podpisu, ktorý by mal uľahčiť a zeefektívniť komunikáciu s orgánmi verejnej správy.	
Merateľné ukazovatele pokroku:	vytvorenie referenčných centier
vytvorenie služieb s e- obchodom	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 50 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Úloha sa plní čiastočne.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Finančné prostriedky nie sú vyčlenené.	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Finančné prostriedky neboli čerpané.	

Číslo úlohy:
1.a.3	Názov úlohy:
Zaviesť systém elektronických identifikačných preukazov totožnosti ako predpokladu využívania integrovaných služieb v režime on-line.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Úlohu bude možné splniť až po rozhodnutí v zásadných otázkach uvedených v časti „Celkové zhrnutie plnenia“, na základe čoho bude možné pripraviť a realizovať projekt zavedenia elektronických identifikačných preukazov.
Podkladom pre rozhodnutie je vypracovaná „Štúdia možností vydávania elektronického občianskeho preukazu pre použitie v elektronických systémoch verejnej správy“	
Merateľné ukazovatele pokroku:	technicky pripraviť možnosť vydávania občianskych preukazov do preukazov s elektronickým čipom pre zaručený elektronický podpis	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 30 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:	Zvýšenie merateľného ukazovateľa je priamo závislé od nevyhnutných predpokladov pre ďalšie plnenie úlohy.	
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	V spolupráci s Národným bezpečnostným úradom SR bola marci 2006 vypracovaná Štúdia možností vydávania elektronického občianskeho preukazu pre použitie v elektronických systémoch verejnej správy. Materiál bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie a po zapracovaní všetkých pripomienok predložený do vlády ako materiál informatívneho charakteru, ktorý vzala vláda na vedomie.
Cieľom štúdie je predovšetkým posúdenie možností vydávania nových občianskych preukazov so zabudovaným kontaktným elektronickým čipom, ktorý je primárne určený na aplikáciu zaručeného elektronického podpisu, ako základného predpokladu pre využívanie služieb e –governmentu a návrh možností riešenia úlohy.
Pre vypracovanie konkrétneho realizačného projektu a určenia potrebného finančného krytia je potrebné rozhodnúť niektoré základné otázky, najmä o:
–	spôsobe jednoznačnej identifikácie osoby pre vydanie zaručeného elektronického podpisu (rodné číslo, číslo sociálnej poistky alebo jednoznačný/ bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby- v tom prípade je nutné súbežne realizovať 1.b.6);
–	prerozdelení činností pri personalizácii medzi Ministerstvom vnútra SR a Akreditovanou certifikačnou autoritou (ďalej len“ACA“, prípadne Národným bezpečnostým úradom – má priamy dosah na prerozdelenie a výšku potrebných finančných zdrojov na technologické riešenia medzi zúčastnenými subjektmi v rámci projektu (kto bude vykonávať personalizáciu čipu, či bude nahratý zaručený elektronický podpis v priestoroch Ministerstva vnútra SR alebo ACA);
–	subjekte, kto bude zabezpečovať zaručený elektronický podpis pre občana – Národný bezpečnostný úrad, vybraná komerčná ACA, všetky komerčné akreditované certifikačné autority etablované na trhu, prípadne zahraničné;
–	o počte vydávaných dokladov – priamo určuje cenu technologických riešení pri rôznej kapacite a náklady na čistopisy (jednotkovú cenu, ako aj celkové náklady na čistopisy v rozpočte Ministerstva vnútra SR
–	spôsob finančného krytia projektu a ďalšieho vydávania čistopisov – či budú projekt a čistopisy hradené zo štátneho rozpočtu ako podpora informatizácie, alebo bude náklady hradiť občan pri vydaní dokladu a pridelení zaručeného elektronického podpisu.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Finančné prostriedky nie sú vyčlenené.	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Finančné prostriedky neboli čerpané.	

Číslo úlohy:
1.b.1	Názov úlohy:
Sprístupniť základné identifikačné údaje o subjektoch evidovaných v registri organizácií na portáli Štatistického úradu SR.	
Gestor úlohy: Predsedníčka Štatistického úradu SR	
Termín úlohy:	31. 12. 2006	
Plnenie úlohy:	úloha je splnená	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	verejne prístupný register organizácií	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Register organizácií bol v marci 2006 sprístupnený na portáli Štatistického úradu SR.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Finančné prostriedky nie sú vyčlenené.	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Finančné prostriedky neboli čerpané.	

Číslo úlohy:
1.b.2	Názov úlohy:
Zabezpečiť tvorbu, aktualizáciu a sprístupnenie verejných informácií a služieb on-line vrátane právnických, administratívnych, kultúrnych, environmentálnych a dopravných informácií s prepojením na centrálny portál. Poskytnúť súčinnosť a zabezpečiť spoluprácu pri udržiavaní aktuálneho stavu centrálneho portálu a zabezpečiť aktívne permanentné poskytovanie informácií pre potreby centrálneho portálu (metodický pokyn).	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	2004 - 2006	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme v stanovenom termíne	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	začatie testovacej prevádzky vstupného bodu
ukončenie testovacej prevádzky vstupného bodu a jeho odovzdanie do používania
zabezpečenie systému aktualizácie, vypracovanie metodického pokynu v tejto súvislosti	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 40 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	30. júna 2006 bola  ukončená testovacia prevádzka vstupného bodu a následne dňa 1. júla 2006 sa spustila ostrá prevádzka technologickej časti Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“). Táto prevádzka preverila nielen technické a programové vybavenie, ale aj ľudské zdroje, ktoré sú v tejto chvíli značne poddimenzované. Ďalší rozvoj portálu ÚPVS bude pokračovať na základe úlohy z Cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy, ktorá ukladá do 31. 12. 2008 elektronizovať najdôležitejšie služby verejnej správy. Čaká nás obdobie integrácie služieb rezortov a verejnej správy na ÚPVS. Integráciu týchto služieb realizuje správca portálu, ktorý je v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. V súčasnosti je možné online vybaviť nasledovné služby:
–	overenie výskytu subjektu v živnostenskom registri,
–	podať podanie na Slovenskú obchodnú inšpekciu,
–	zasielať informácie o voľných pracovných miestach s notifikáciou,
–	zaslanie odpisu z registra trestov, 
–	voľný prístup na katastrálny portál, 
–	overenie stavu dokladu (odcudzený alebo stratený),
–	overenie žiadosti o vystavenie dokladu.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	30 mil.,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	30 mil.,- Sk	

Číslo úlohy:
1.b.3	Názov úlohy:
Umožniť všeobecný elektronický prístup k základným verejným službám. ("Cestovná mapa" k e-Governmentu)	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme v stanovenom termíne	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	2006 - realizácia úloh cestovnej mapy
2006 - realizácia a koordinácia úloh AP III MINERVA,	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 60 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Úlohy z Cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy, sa plnia v stanovených termínoch:
Najdôležitejšími riešenými úlohami boli:
–	definovanie štandardov pre informačné systémy verejnej správy,
–	vytvorenie identifikátora občana pre ISVS,
–	vybudovanie vstupného bodu Ústredného portálu verejnej správy,
–	vybudovanie platobného portálu verejnej správy,
–	vytvorenie rozhrania kľúčových celoštátnych registrov,
–	vytvorenie systémov elektronickej výmeny dát medzi registrami.
Úlohy vyplývajúce z Akčného plánu Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 pre oblasť III. - Informačná spoločnosť sú splnené.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:		
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	600 tis.,- Sk – definovanie štandardov pre informačné systémy verejnej správy
250 tis.,- Sk – vytvorenie jednoznačného identifikátora obyvateľa z rodného čísla (rok 2005)
36 mil.,- Sk – vybudovanie vstupného bodu Ústredného portálu verejnej správy
900 tis.,- Sk – štúdia platobného portálu
30 mil.,- Sk – vybudovanie platobného portálu verejnej správy (platobný portál)
230 tis.,- Sk – štúdia pre vytvorenie systémov elektronickej výmeny dát medzi registrami (rok 2005)	

Číslo úlohy:
1.b.4	Názov úlohy:
Zabezpečiť zjednodušené elektronické administratívne postupy pre obchodovanie, napr. zrýchlené (on-line) postupy na založenie spoločností.	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Ministerstvo hospodárstva SR vyvíja len obmedzené aktivity v tejto oblasti, spolupráca s týmto subjektom je preto limitovaná.	
Merateľné ukazovatele pokroku:	skrátenie času potrebného pre založenie súkromnej spoločnosti 	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 15 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Úloha sa neplní v požadovanom termíne.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Finančné prostriedky nie sú vyčlenené.	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Finančné prostriedky neboli čerpané.	

Číslo úlohy:
1.b.5	Názov úlohy:
Vytvoriť "Systém základných registrov VS" ako systém navzájom prepojených a harmonizovaných registrov, ktorý bude povinne zdielateľný všetkými IS VS a bude celoplošne sprístupniteľný. V tejto úlohe budú v roku 2006 realizované nasledovné čiastkové úlohy:
a)	Vypracovať návrh základných východísk a princípov systému základných registrov VS ako systému navzájom prepojených a harmonizovaných registrov
b)	Vypracovať návrh realizačnej štúdie s cieľom konkretizovať údajové objekty systému a otestovať možnosti ich prepojenia do funkčného kooperujúceho celku	
Gestor úlohy: Predseda štatistického úradu SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Plnenie úlohy bolo zabezpečované v rámci Koncepcie rozvoja automatizovaného štatistického informačného systému na rok 2006.  Možnosti elektronickej výmeny údajov medzi registrami VS boli v praxi otestované a preverené v rozsahu obchodného, živnostenského a štatistického registra.
V širšom kontexte paralelne riešilo problematiku systému elektronickej výmeny dát medzi registrami aj Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktoré je gestorom vypracovania legislatívneho zámeru zákona o základných registroch verejnej správy.	
Merateľné ukazovatele pokroku:	predložiť návrh základných východísk
návrh realizačnej štúdie	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 50 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Štatistický úrad SR vypracoval v apríli 2005 štúdiu Návrh základných východísk a princípov systému registrov verejnej správy, do ktorej boli zapracované aj pripomienky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva spravodlivosti SR. Návrh realizačnej štúdie nie je ukončený, keďže do testovacích prác systému elektronickej výmeny údajov nemohli byť zahrnuté údajové objekty systému v plnom rozsahu.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Finančné prostriedky nie sú vyčlenené.	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Finančné prostriedky neboli čerpané.	

Číslo úlohy:
1.b.6	Názov úlohy:
Zabezpečiť vypracovanie definície Bezvýznamového identifikátora fyzických osôb (BIFO) pre registre verejnej správy.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Nedostatočné finančné krytie.	
Merateľné ukazovatele pokroku:	2006 - zavedenie identifikátora pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy a vytvorenie jednoznačného identifikátora z rodného čísla	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 35 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:	V rámci rozporového konania v máji 2006 bol doriešený aj objem financovania projektu. Finančné prostriedky v odsúhlasenej výške 60,5 mil. Sk neboli na projekt poskytnuté.	
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Ministerstvo vnútra SR vypracovalo koncepciu zavedenia jednoznačného identifikátora a predložilo ju 21. 12. 2005 na medzirezortné pripomienkové konanie.
S dodávateľom aplikácie informačného systému Registra obyvateľov bol predbežne dohodnutý spôsob realizácie po vyriešení finančného krytia. 
Zavedenie identifikátora podľa tejto štúdie si nevyžiada legislatívnu úpravu. Túto bude potrebné riešiť v súlade s poznatkami v praxi.
V prípade, že sa nebude realizovať úloha 1.a.3, dávame na zváženie úlohu  zrušiť, vzhľadom k tomu, že uznesením 1056/2006 z 13. decembra 2006 bolo definované opatrenie v znení „Jednotný identifikátor pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy“ s termínom plnenia v roku 2008.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	60,5 mil.,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	5,66 mil.,- Sk	

Číslo úlohy:
1.b.7	Názov úlohy:
Zabezpečiť tvorbu, aktualizáciu a sprístupnenie súčasti Referenčného registra ekonomických subjektov - živnostenský register Systému základných registrov verejnej správy.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úloha je splnená	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	vytvorenie systému zákl. registrov
sprístupnenie informácií z uvedených registrov pre využitie vo verejnej správe ako, aj pre komerčné subjekty	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Tvorba a aktualizácia živnostenského registra je zabezpečená informačným systémom CeZiR – Centrálny živnostenský register, ktorý sa prevádzkuje na odboroch živnostenského podnikania obvodných úradov od 31.10.2005. Výkon agendy živnostenských úradov je podporovaný aplikáciou, ktorá je vytvorená v technológii klient server s využitím webových služieb. Centrálny register na základe poverenia živnostenského odboru Ministerstva vnútra SR sekcie verejnej správy prevádzkuje IVeS Košice, príspevková organizácia MV SR.
Na sprístupnenie informácií pre využitie vo verejnej správe, prípadne pre komerčné subjekty je v prevádzke časť informačného systému tzv. Živnostenský register na internete, ktorý má verejnú a  neverejnú časť:
–	Verejná časť slúži k  nahliadnutiu do registra širokej verejnosti, obsahuje verejne  prístupné údaje,
–	Neverejná časť je určená organizáciám verejnej správy, ktoré majú prístup k  neverejnej časti živnostenského registra na základe živnostenského zákona, resp. na základe dohôd uzavretých s Ministerstva vnútra SR. Táto časť obsahuje aj osobné údaje a  údaje o vydaných živnostenských listoch a koncesných listinách.
Zasielanie údajov zo živnostenského registra inštitúciám podľa živnostenského zákona rieši tzv. „dátová pumpa“. Údaje, ktoré sú poskytované dátovou pumpou si volí samotná inštitúcia. Taktiež zadáva frekvenciu vytvárania exportných súborov. Je to web aplikácia, ktorá poskytuje údaje v xml formáte.
Pre prepojenie živnostenského registra s  ostatnými registrami verejnej správy je pripravená webová služba, ktorú na základe dohôd a pri splnení potrebných podmienok bude prístupná aj pre komerčné subjekty.
Navrhujeme zmeniť názov úlohy 1.b.7 na: „Zabezpečiť tvorbu, aktualizáciu a sprístupnenie - živnostenského registra systému základných registrov verejnej správy“.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	12,1 mil.,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	12,1 mil.,- Sk	

Číslo úlohy:
1.b.8	Názov úlohy:
Zriadiť portál pre e-procurement - online verejné obstarávanie (nákup a prevádzkovanie bude v súlade s podmienkami dostupnosti IKT pre občanov so zdravotným postihnutím).	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úloha je splnená	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	počet realizovaných elektronických verejných obstarávaní
percento z celkového objemu obstarávania centrálnej štátnej a verejnej správy
úspora nákladov na obstarávanie
miera skrátenia procesu verejného obstarávania	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:	Plnenie merateľných ukazovateľov sa k dnešnému dátumu nedá vyhodnotiľ, pretože portál EVO nie je zatiaľ v rutinnej prevádzke na ÚVO.	
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií obstaralo portál elektronického verejného obstarávania - EVO a odskúšalo ho na reálnom tendri v pilotnom projekte. Uznesenie vlády č. 230 zo dňa 15.3.2006 definovalo úloh previesť portál EVO na Úrad pre verejné obstarávanie v termíne po dvojnásobnom posune termínu do 31.10.2006. Táto úloha bola k dátumu 31.10.2006 splnená.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	50 972 579,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	50 972 579,- Sk	

Číslo úlohy:
1.b.9	Názov úlohy:
Zabezpečiť aktuálnosť JASPI.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR	
Termín úlohy:	2007	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Problematika elektronického podpisovania dokumentov nie je v štátnej správe centrálne riešená.	
Merateľné ukazovatele pokroku:	predložiť návrh riešenia systému JASPI vrátane legislatívneho zabezpečenia
zabezpečiť relevanciu vkladaných dokumentov na základe el. podpisu
	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 70 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Prevádzka informačného systému JASPI je zabezpečovaná nepretržite (24 hodín denne) v sieti internet pre verejnosť a pre orgány štátnej správy v sieti GOVNET. Elektronická zbierka zákonov je aktualizovaná do 24 hodín od publikovania predpisu v zbierke zákonov. Zoznam znalcov, znaleckých organizácií a ústavov, zoznam tlmočníkov a prekladateľov sú aktualizované súbežne s platnosťou údajov. Keďže problematika elektronického podpisovania dokumentov nie je v štátnej správe vyriešená, úloha je splnená na 70%.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Zodpovedný rezort nezaslal požadované informácie.	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Zodpovedný rezort nezaslal požadované informácie.	

Číslo úlohy:
1.b.10	Názov úlohy:
Vypracovať a predložiť návrh prepojenia systému JASPI so systémami EÚ.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR	
Termín úlohy:	2009	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme v stanovenom termíne	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	predložiť návrh základných východísk
predložiť legislatívny zámer
predložiť návrh realizačnej štúdie	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 30 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Vypracovať a predložiť návrh prepojenia systému JASPI so systémami Európskej únie" je plnená v termíne. V súčasnosti je v testovacej prevádzke portál právnych predpisov krajín EÚ N-Lex, ktorý je skúšobne prepojený so systémom JASPI. Úloha je splnená na 30%.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Zodpovedný rezort nezaslal požadované informácie.	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Zodpovedný rezort nezaslal požadované informácie.	

Číslo úlohy:
1.b.12	Názov úlohy:
Vybudovanie Základnej bázy pre geografické informačné systémy (ZBGIS) - ako nadrezortného systému priestorových informácií (úloha vyplýva zo zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii).	
Gestor úlohy: Predseda úradu geodézie, kartografie a katastra SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme v stanovenom termíne	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	vytvorenie základnej bázy informácií pre (ZBGIS)	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	V roku 2006 bol vykonaný fotogrametrický zber údajov a spracovanie digitálneho 3D polohopisu o rozlohe  2 589 km2. Zber údajov pre digitálny model reliéfu bol ukončený v rozsahu 1 833 km2. Spracovanie atribútov objektov ZB GIS bolo vykonané o rozlohe 1 398 km2. Rozsah spracovaného územia závisí od prístrojového vybavenia (v súčasnosti 7 pracovných staníc). Akcelerácia úlohy zo strany ÚGKK SR závisí od finančných prostriedkov na hardvér a softvér. Úlohu zabezpečujeme spolu s Ministerstvo obrany SR podľa jednotného katalógu objektov. (Ministerstvo obrany SR buduje Vojenský informačný systém o území) s tým, že sú rozdelené lokality spracovania a údaje priestorovej databázy si navzájom odovzdávame. Ministerstvo obrany SR v roku 2006 odovzdalo pre ZB GIS údaje v rozsahu 3 865 km2.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	14,7 mil.,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	10,6 mil.,- Sk – mzdy zamestnancov
4,1 mil.,- Sk – bežné výdavky	

Číslo úlohy:
1.b.13	Názov úlohy:
Realizovať Program elektronizácie knižníc (zabezpečiť vo verejných a vedeckých knižniciach budovanie verejných internetových pracovísk pre všetky skupiny občanov s prístupom k verejným informačným zdrojom a službám).	
Gestor úlohy: Minister kultúry SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Z dôvodu zrušenia verejnej súťaže nebol realizovaný nákup výpočtovej techniky v rámci projektu Internetizácia knižníc SR.	
Merateľné ukazovatele pokroku:	počet verejných knižníc s profesionálnym zamestnancom s aspoň jedným verejne prístupným počítačom pripojeným na širokopásmový internet	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 50 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:	Možné riziko pri plnení uvedenej úlohy predstavuje časový sklz pri realizácii verejného obstarávania výpočtovej techniky (servery a tenkí klienti pre jednotlivé knižnice zapojené do projektu) pre národný projekt informatizácie  knižníc. Po dohode medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvom kultúry SR bola celková realizácia projektu predĺžená do konca roku 2008.	
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	V rámci štatistického zisťovania na rok 2006 bolo zistené, že 231 verejných knižníc (regionálne knižnice a obecné knižnice s profesionálnym zamestnancom) poskytuje verejné internetové služby  prostredníctvom 804 počítačov, ktoré sú pripojené na internet (VPBI – verejný prístupový bod k internetu). V máji 2006 bol schválený národný projekt Ministerstva kultúry SR, pripravený v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou Informatizácie knižníc v rámci opatrenia 3.2 Informatizácia spoločnosti, ktorého cieľom je zabezpečiť vybudovanie 760 verejne prístupných miest na internet, pričom do projektu bude zapojených 110 verejných knižníc.  V auguste 2006 bola vyhlásená verejná súťaž, do ktorej sa prihlásili 3 firmy. V decembri 2006 Úrad pre verejné obstarávanie verejnú súťaž zrušil. Vyhlásenie novej verejnej súťaže je plánované na 1. štvrťrok 2007.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Na realizáciu danej úlohy sú určené finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov v celkovej výške 1 mil. EUR	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Finančné prostriedky neboli čerpané.	

Číslo úlohy:
1.b.14	Názov úlohy:
Realizovať plne on-line službu podania žiadosti o príspevky na deti.	
Gestor úlohy: Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Žiadosť je zaevidovaná, ale k plnému on-line chýba elektronický podpis	
Merateľné ukazovatele pokroku:	spustenie služby podania žiadosti o príspevky na deti k 31. 6. 2006 (Roadmap)	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 90 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:	Chýba elektronický podpis	
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Umožňuje on-line registráciu, ale spracovanie začína až po písomnom doručení a overení žiadosti. Realizácia – v roku 2005.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Potrebné zdroje na rok 2007:
Legislatíva			0,1 mil.,- Sk
Zmena procesov		3 mil.,- Sk
Vzdelávanie			0,92 mil.,- Sk
Hardvérové vybavenie		5,75 mil.,- Sk
Softvérové vybavenie		5,65 mil.,- Sk
Spolu				15,42 mil.,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	r. 2005 – 1,2 mil.,- Sk
r. 2006 – finančné prostriedky neboli čerpané	

Číslo úlohy:
1.b.15	Názov úlohy:
Vytvoriť "Systém základných registrov VS" ako systém navzájom prepojených a harmonizovaných registrov, ktorý bude povinne zdielateľný všetkými IS VS a bude celoplošne sprístupniteľný.
a)	Vypracovať návrh legislatívneho zámeru zákona o základných registroch verejnej správy	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Plnenie úlohy bolo zlúčené s plnením úlohy „Vytvorenie zákona o registroch verejnej správy a s vytvorením zákona o e-governmente.“	
Merateľné ukazovatele pokroku:	legislatívny zámer	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 50 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Na pracovných stretnutiach Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Ministerstva vnútra SR bol určený plán práce a nosného obsahu materiálu, dohodnuté organizačné záležitosti, schválená štruktúra dokumentu, vyšpecifikované definície a navrhnuté štruktúry registrov a navrhnutý obsah pripravovaného zákona o referenčných registroch a číselníkoch verejnej správy, aj s definíciami nových pojmov. Vzhľadom na potrebu integrácie katastrálneho registra do plnenia úlohy bola v septembri 2006 pracovná skupina rozšírená o odborníkov z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Úloha je v štádiu rozpracovania a materiál bude slúžiť ako východiskový podklad pre návrh zákona o elektronickej verejnej správe.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Finančné prostriedky nie sú vyčlenené.	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Finančné prostriedky neboli čerpané.	

Číslo úlohy:
1.c.1	Názov úlohy:
Koncepcia a legislatíva zdravotníckej informatiky, vypracovanie národnej stratégie pre eHealth v SR, legislatívna podpora rozvoja informatiky a aktualizácia koncepcie rozvoja informatiky v rezorte MZ SR. 	
Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úloha je splnená	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	vypracovanie koncepcie a legislatívy zdravotníckej informatiky
vypracovanie národnej stratégie pre eHealth v SR	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	K uvedenému termínu boli vypracované materiály: 
–	„Koncepcia rozvoja informačnej sústavy zdravotníctva“,
–	„Koncepcia informatizácie zdravotníctva SR (Slovak e-Health National Strategy)“,
prerokované a schválené v gremiálnej porade ministra zdravotníctva SR uznesením č. 66/GP zo dňa 6.2.2006.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Finančné prostriedky nie sú vyčlenené.	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Finančné prostriedky neboli čerpané.	

Číslo úlohy:
1.c.2	Názov úlohy:
Integrácia informačnej  sústavy zdravotníctva, návrh a aktualizácia integračných nástrojov (centrálnych číselníkov, klasifikácií, protokolov a rozhraní) a štandardov pre zdravotnícku informatiku s prihliadnutím na medzinárodné štandardy a prostredie v SR.	
Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Pripravená vyhláška o štandardoch informačnej sústavy zdravotníctva neprešla legislatívnym procesom z dôvodu politických, inštitucionálnych a personálnych zmien v roku 2006.	
Merateľné ukazovatele pokroku:	návrh a aktualizácia integračných nástrojov (centrálnych číselníkov, klasifikácií, protokolov a rozhraní) a štandardov pre zdravotnícku informatiku	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 90 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:	Pripravená vyhláška o štandardoch informačnej sústavy zdravotníctva neprešla legislatívnym procesom z dôvodu politických, inštitucionálnych a personálnych zmien v roku 2006.	
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Vypracovaný návrh záväzných štandardov pre zdravotnícku informatiku a štatistiku.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	35 672 000,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	35 672 000,- Sk	

Číslo úlohy:
1.c.3	Názov úlohy:
Vybudovanie národného centra zdravotníckych informácií, návrh koncepcie Národného centra zdravotníckych informácií a referenčného centra a jej realizácia.	
Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úloha je splnená	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	vybudovanie Národného centra zdravotníckych informácií
návrh koncepcie Národného centra zdravotníckych informácií a referenčného centra	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	V nadväznosti na schválený návrh a koncepciu bolo Národné centrum zdravotníckych informácií zriadené k 1.2.2006.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	1 255 521 €	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	1 255 521 €	

Číslo úlohy:
1.c.4	Názov úlohy:
Prevádzka a rozvoj ťažiskových informačných systémov pre podporu tvorby politiky v rezorte MZ SR.	
Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úloha je splnená	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	počet služieb ťažiskových informačných systémov pre podporu tvorby politiky v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	K uvedenému termínu boli vykonané nasledujúce práce a činnosti:
Rozvoj a aktualizácia informačného systému Ministerstva zdravotníctva SR
–	príprava technického zabezpečenia vzájomnej komunikácie dátového centra úradu Ministerstva zdravotníctva SR a dátového centra Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky a zabezpečenie prepojenia Ministerstva zdravotníctva SR s pripravovaným novým pracoviskom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky na Lazaretskej ul. č. 26 optickým káblom,
–	doplnenie a inštalácia ďalších požadovaných modulov do komplexného administratívno-riadiaceho informačného systému KARIS,
–	posilnenie a modernizácia technického vybavenia informačného systému  Ministerstva zdravotníctva SR.
Rozvoj a aktualizácia ŠTAZIS
–	Projekt PHARE - "Strengthening of statistics health information system and its harmonisation with EU requirements" – časť budovanie informačného systému zdravotníckych indikátorov.
Informačný systém bol daný do prevádzky 7.7.2006.
Rozvoj a aktualizácia ISHEM
zavedenie modulu kontroly a ochrany zdravej výživy do rutinnej prevádzky
Projekt PHARE – informačný systém na sledovanie infekčných ochorení – bol daný do prevádzky v septembri 2006.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	1 824 000 €	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	1 272 081 €
Zvyšok finančných prostriedkov do celkovej sumy bol určený na laboratórnu a prístrojovú techniku ISHEM.	

Číslo úlohy:
1.c.5	Názov úlohy:
Informatizácia zdravotníckych zariadení, národné a regionálne zdravotnícke infraštruktúry a ich prepájanie s verejnými zdravotníckymi sieťami EÚ.	
Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úloha je splnená	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	materiál o stave informatizácie zdravotníckych zariadení, národnej a regionálnej zdravotníckej infraštruktúry a jej prepájanie s verejnými zdravotníckymi sieťami Európskej únie	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	V rámci plnenia úlohy boli podľa schváleného Akčného plánu rozvoja informačného systému zdravotníctva pre rok 2006  vypracované nasledujúce materiály:
1.	Štúdia o možnostiach a zdrojoch (feasibility study) pre stimulovanie rozširovania internetu a rozvoja počítačových sietí u Pracovnej zdravotnej služby a u ďalších subjektov v zdravotníctve.
2.	Štúdia o možnostiach a zdrojoch (feasibility study) pre zavedenie elektronickej preskripcie a receptov v SR.
3.	Štúdia o možnostiach a zdrojoch (feasibility study) pre zavedenie systému elektronických zdravotných záznamov v SR.
4.	Štúdia o možnostiach a zdrojoch (feasibility study) pre informatizáciu mimonemocničných zdravotných služieb v SR.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	700 tis.,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	620 tis.,- Sk	

Číslo úlohy:
1.d.1	Názov úlohy:
Podporovať budovanie národných digitálnych knižníc pre vedu, výskum, techniku a vzdelávanie, systémov elektronického publikovania a digitalizáciu národného dedičstva (otvorených národných digitálnych archívov, digitalizáciu fondov, zbierok pamäťových inštitúcií atď.).	
Gestor úlohy: Minister kultúry SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Slovenská národná knižnica v spolupráci s Radou pre informatizáciu rezortu kultúry (poradný orgán ministra kultúry) pripravila podmienky na rozsiahly dotazníkový zber údajov o stave digitalizácie v jednotlivých pamäťových inštitúciách rezortu. Vzhľadom na množstvo sledovaných položiek a počet subjektov zapojených do tohto zisťovania, materiál Stratégia digitalizácie národného kultúrneho dedičstva v SR, ktorý pripravuje Slovenská národná knižnica, bude predložený na rokovanie poradného orgánu ministra kultúry v prvej polovici roku 2007.	
Merateľné ukazovatele pokroku:	počet digitalizačných pracovísk v rezorte kultúry	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 50 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:	V rámci finančných prostriedkov, ktoré boli k dispozícii v roku 2006 bolo vybudované pilotné digitalizačné pracovisko v Slovenskej národnej knižnici.	
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	V rámci programového financovania boli v roku 2006 vyčlenené účelovo viazané finančné prostriedky na realizáciu projektu Stratégia digitalizácie národného kultúrneho a vedeckého dedičstva vo výške 700 tisíc Sk. V priebehu roku 2006 bol vykonaný prieskum pomocou podrobného dotazníka, ktorý pripravila Slovenská národná knižnica, cieľom ktorého bolo zmapovať všetky pracoviská v rezorte kultúry a vybrané pracoviská mimo rezortu, ktoré sa zaoberajú digitalizáciou. Výstupy budú spracované do konca marca 2007 a budú podkladom pre vypracovanie strategického materiálu Stratégia digitalizácie národného kultúrneho a vedeckého dedičstva v SR. V rámci finančných možností prebiehala digitalizácia v rámci rozvoja schválených prioritných projektov rezortu kultúry  a prostredníctvom internetu boli  sprístupnené  viaceré databázy, ktoré produkuje rezort kultúry: zbierky múzeí a galérií, slovenskej filmovej a divadelnej tvorby, literatúry, štatistické informácie za jednotlivé oblasti kultúry – on-line,  informácie o kultúrnych podujatiach v prezentačných organizáciách rezortu kultúry s monitoringom návštevnosti a pod.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	16 mil.,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	16 mil.,- Sk	

Číslo úlohy:
1.d.2	Názov úlohy:
Realizovať Register kultúry - portál, ktorý umožní sprístupnenie informácií a štruktúrovaných dát za všetky oblasti kultúry pre verejnosť prostredníctvom jediného prístupového miesta na internete.	
Gestor úlohy: Minister kultúry SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Úloha sa plnila len čiastočne, boli podporené projekty, ktoré patria medzi prioritné projekty rezortu. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa nerealizovala verejná súťaž na výber dodávateľa na realizáciu portálu kultúry. Z uvedeného dôvodu sa bude venovať mimoriadna pozornosť na realizáciu tohto projektu v roku 2007, pričom na tento projekt je vyčlenených približne 20 mil. Sk v rámci programového rozpočtovania.	
Merateľné ukazovatele pokroku:	spustenie Registra kultúry pre verejnosť	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 75 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:	V rámci danej úlohy boli zrealizované len úlohy súvisiace s rozvojom prioritných projektov, ktoré tvoria Register kultúry.	
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	V rámci programového financovania boli v roku 2006 vyčlenené účelovo viazané finančné prostriedky v celkovej výške 16 miliónov Sk na dofinancovanie prioritných projektov informatizácie kultúry, ktoré tvoria základ Registra kultúry a prostredníctvom portálu kultúry majú byť sprístupnené verejnosti. V priebehu roku 2006 prostredníctvom internetu cez pilotnú verziu portálu http://registerkultury.gov.sk boli sprístupnené niektoré databázy, ktoré produkuje rezort  kultúry: zbierky múzeí a galérií, slovenskej filmovej a divadelnej tvorby, literatúry, štatistické informácie za jednotlivé oblasti kultúry – on-line, informácie o kultúrnych podujatiach v prezentačných organizáciách rezortu kultúry s monitoringom návštevnosti a pod., realizovali sa nové  projekty, ktoré prispeli  k rozvoju nových e-služieb pre občanov (poskytovanie dotácií prostredníctvom grantového systému Ministerstva kultúry SR, podpora sprístupnenia kultúry pre deti a mládež – projekt Kultúrne poukazy. Podarilo sa vybudovať a personálne zabezpečiť pracovisko Registra kultúry pri Univerzitnej knižnici v Bratislave.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	16 mil.,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	16 mil.,- Sk	

Číslo úlohy:
1.d.3	Názov úlohy:
Realizácia projektov i úloh z Programu informatizácie rezortu Ministerstva pôdohospodárstva SR do roku 2005.	
Gestor úlohy: Minister pôdohospodárstva SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Sklz bol spôsobený objektívnymi príčinami a finančným problémom.	
Merateľné ukazovatele pokroku:	predloženie realizovaných úloh a projektov
–	sieť WAN-LAN ktorá prepája Ministerstvo pôdohospodárstva SR a jeho externé odbory s úradmi špecializovanej štátnej správy bola vybudovaná. V závislosti od množstva využívaných dátových služieb sa pripravuje/zvažuje posilnenie komunikačných liniek
–	internetová aplikácia veterinárneho geograficko-informačného systému bola vytvorená, predpokladá sa jej zahrnutie do komplexného systému veterinárnej ochrany územia
–	zrealizovaných bolo nasledovných 5 opatrení riadenia bezpečnosti informačného systému rezortu pôdohospodárstva zo štandardu STN ISO/IEC 17799
–	Smernica č. 3 o ochrane osobných údajov
–	Smernica č. 4 určujúca postup riadenia bezpečnostných incidentov
–	Smernica č. 5 určujúca riadenie prístupu tretích strán k IS rezortu
–	Smernica č. 6 o bezpečnom používaní externých služieb (outsourcing)
–	Smernica č. 7 o fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 95 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Z Programu informatizácie rezortu pôdohospodárstva sa realizovali v roku 2006 v intenciách pridelených finančných prostriedkov nasledovné projekty:
1.	Konsolidácia telekomunikačných služieb rezortu
2.	Budovanie Integrovaného geograficko-informačného systému rezortu
3.	Implementácia Projektu informačnej bezpečnosti v rezorte.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	1.	11 075 295,- Sk
2.	7 450 000,- Sk 
3.	neboli pridelené. Úlohy boli realizované v rámci bežnej prevádzky
Spolu za všetky podúlohy 18 552 665,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	4.	11 075 295,- Sk
5.	7 450 000,- Sk 
6.	neboli pridelené. Úlohy boli realizované v rámci bežnej prevádzky.
Spolu za všetky podúlohy 18 525 295,- Sk.	

Číslo úlohy:
1.d.4	Názov úlohy:
Konsolidácia telekomunikačných služieb rezortu pôdohospodárstva	
Gestor úlohy: Minister pôdohospodárstva SR	
Termín úlohy:	31. 12. 2006	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Organizačné zmeny v rezorte a na Ministerstva pôdohospodárstva SR.	
Merateľné ukazovatele pokroku:	Na existujúcej dátovej sieti špecializovanej štátnej správy rezortu: 
–	Implementovaná IP telefónia
–	Zjednotený systém poskytovateľov pevných hlasových služieb a poskytovateľov mobilných komunikačných služieb	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 80,5 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Implementovaná IP telefónia – Ministerstva pôdohospodárstva SR a na špecializovanej štátnej správe rezortu pôdohospodárstva, rovina pevných hlasových služieb 100 % na technológii VoIP, vybratý jeden poskytovateľ a je vybudovaná virtuálna privátne sieť VVN.
Rovina mobilných hlasových služieb, je vybratý jeden poskytovateľ, je vybudovaná mobilná virtuálna privátna sieť VPS, integrovaných 148 z 240 mobilných telefónov ministerstva a špecializovanej štátnej správy rezortu pôdohospodárstva.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	11 102 665,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	11 075 295,- Sk	

Číslo úlohy:
1.e.1	Názov úlohy:
Implementácia inteligentných dopravných služieb.	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme v stanovenom termíne	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	počet realizovaných domácich a  európskych projektov	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Riešenie medzinárodného projektu CONNECT v roku 2006 pokračovalo riešením vo všetkých schválených doménach. V doméne 1 – boli riešené základné charakteristiky pre infraštruktúru monitorovania ciest s prihliadnutím na exponované cestné úseky v SR, v doméne 2 boli formulované nároky pre zapojenie SR do Európskej siete dopravných centier a vecné a organizačné požiadavky na vybudovanie siete centier dopravných informácií v SR, v doméne 3 boli riešené komplexné otázky spoplatňovania dopravnej infraštruktúry a elektronického výberu mýta na cestnej sieti SR a v doméne 4 sa riešila problematika lokalizačných tabuliek pre využitie služieb RDS TMC, ktorá bola ukončená ich certifikáciou TMC Fórum, ktoré je súčasťou medzinárodnej organizácie ERTICO. V tejto doméne bola riešená aj základná architektúra medzinárodného sledovania prepravy nebezpečného tovaru s využitím satelitných komunikačných technológií.
V októbri 2006 schválila Európska komisia na základe odporúčania Výboru TEN-T III. fázu riešenia projektu v roku 2007, ktorá sa bude zaoberať predovšetkým otázkami medzinárodnej implementácie a výmeny riešených výsledkov projektu. V nadväznosti na doterajší priebeh riešenia projektu CONNECT sa Európska komisia a zástupcovia členských štátov podieľajúcich sa na jeho riešení zaoberali s návrhom na plynulom pokračovaní riešenia otázok inteligentných dopravných služieb v cestnej doprave v rokoch 2007-2013 v novom projekte EASYWAY.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	12 mil.,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	12,7 mil.,- Sk	

Číslo úlohy:
1.f.1	Názov úlohy:
Podporovať ďalší rozvoj siete EIONET na zber, monitorovanie a informovanie o environmentálnych údajoch kompatibilnej s rozvíjajúcimi sa sieťami v Európe.	
Gestor úlohy: Minister životného prostredia SR	
Termín úlohy:	31. 12. 2006	
Plnenie úlohy:	úloha je splnená	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	zabezpečenie prevádzky a rozvoja NFP EIONET	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Server a služby boli funkčné 352 dní, výpadok bol len z dôvodu zmeny domény, migrácie a nutného upgradu.
Server nfp-sk je funkčný od r. 1998 ako národný uzol siete EIONET. Fyzicky je umiestnený v Slovenskej agentúre životného prostredia. Na serveri sú zabezpečované služby WEB http://nfp-sk.eionet.europa.eu
CIRCA http://nfp-sk.eionet.europa.eu:8980/eionet-circle
V priebehu r. 2006 bola zmenená doména eionet eu.int na eionet.europa.eu a národný EIONET server bol kompletne upgradovaný pod iný operačný systém a služby migrované na nový virtual host. Pre SK užívateľov je zabezpečený helpdesk a školenia zo strany Slovenskej agentúre životného prostredia. Spolupráca so sieťou EIONET predstavovala: zmeny v roliach podľa deklarácie NRC a PCP, zálohovanie a patchovanie servera podľa potrieb, aktualizácia rolí na centrálnom EEA serveri podľa požiadaviek NFP, komunikácia s centrálnym NMC teamom počas zmeny domény.
Výstupy úlohy: 			stav k 31. 12. 2006
CIRCA
Počet záujmových skupín		25
Počet užívateľov			130
Objem údajov CIRCA servera		7,7 GB
Počet dopytov na Circa server	215 tis.
ZOPE
Počet dopytov na ZOPE server	47 tis.
Objem stiahnutých údajov		264 MB
Medzinárodná štatistika využívania EIONET serverov je na stránke
http://nmc.eionet.eu.int/CM_Service/statistics/view_allstat	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	250 tis.,- Sk (UPS, cestovné, sysadmin)	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Čerpané boli len minimálne mzdové náklady na administráciu systému, ktoré boli uhradené z rozpočtu Slovenskej agentúry životného prostredia	
Číslo úlohy:
2.a.1	Názov úlohy:
Zabezpečiť pripojenie všetkých škôl do internetu.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR	
Termín úlohy:	2008	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme v stanovenom termíne	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	percento pripojených škôl	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Takmer všetky školy boli pripojené do internetu v r. 2004 v spolupráci so súkromným sektorom (projekt Infovek a Počítače pre školy). V súčasnosti sa pripájajú nové školy do internetu a zlepšuje sa kvalita pripojenia.  Vysokorýchlostné pripojenie má 1901 škôl, t. j. 59 %, 74 škôl je pripojených cez optické siete SANET-u, t. j. 2,3 %. Pripojenie ISDN má 1148 škôl, t. j. 36 % a vlastné pripojenie 3 školy. Nepripojené sú  školy v počte 82, t. j. 2,5 %. Nie sú pripojené len tie školy, ktoré na to zatiaľ nemajú vhodné technické podmienky.
Podľa zdroja Európskej komisie – LearnInd 2006 Slovenská republika je na 21 mieste z krajín Európskej únie v širokopásmovom pripojení škôl na internet. Spoločnosť Slovak Telecom zabezpečuje pripojenie na internet pre školy podporované projektom informatizácie regionálneho školstva – projektom Infovek na základe zmluvy o pripojení uzatvorenej medzi Ústavom informácií a prognóz školstva a spoločnosťou Slovak Telecom v máji 2004. Táto zmluva upravuje rozsah poskytovaných služieb, ako aj ceny, ktoré ÚIPŠ platí za poskytnuté služby. V apríli 2005 bol uzatvorený dodatok, ktorý znížil ceny za pripojenia v prípade pripojenia technológiou aDSL.
V druhej polovici roku prebehlo ďalšie rozšírenie pripojenia formou technológie aDSL na školy dovtedy využívajúce technológiu ISDN alebo pevné linky. V marci 2006 na základe rokovaní v súlade zo zmluvou prebehlo zvýšenie rýchlosti pripojenia pri použití technológie aDSL z pôvodných 1024/256 kbps na 1536/256 kbps. Počas budovania siete SANET II nastáva situácia, že optický kábel často vedie v blízkosti školy už vybavenej výpočtovou technikou, ale pripojenej na internet prostredníctvom ST. V takom prípade, ak škola na vlastné náklady vybuduje prípojku na optický kábel z projektu Infovek, sú následne financované náklady SANET-u na pripojenie takejto školy (v súčasnosti ide o 74 základných a stredných škôl). Finančné prostriedky na zabezpečenie tohto pripojenia boli prevedené ako prevádzkový transfer na zvýšenie dotácie SANET-u na MŠ SR.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	115,5 mil.,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	119,369 mil.,- Sk	

Číslo úlohy:
2.a.2	Názov úlohy:
Vypracovanie stratégie informatizácie regionálneho školstva t.j. budovanie modernej školy.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR	
Termín úlohy:	2006	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Úloha bola začlenená do inej úlohy, ktorej termín splnenia je v r. 2007.	
Merateľné ukazovatele pokroku:	schválenie stratégie informatizácie regionálneho školstva vládou SR	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 50 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:	Úloha bola začlenená do inej úlohy, ktorej termín splnenia je v r. 2007.	
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Termín úlohy bol predĺžený do 30.6.2007. Materiál bol spracovaný. Pripravila sa jeho harmonizácia so Stratégiou konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010. 
Na základe návrhu podpredsedu vlády a ministra školstva, aby predmetná stratégia bola zapracovaná do koncepcie informatiky a informatizácie školstva, predseda vlády schválil predĺženie termínu úlohy do 30.6.2007.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	300 tis.,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	300 tis.,- Sk	

Číslo úlohy:
2.a.3	Názov úlohy:
a)	Tvorba e-vzdelávania - class server - (vzdelávacie portály pre všetky stupne škôl).
b)	Vytvorenie špeciálnej podpory pre deti so zdravotným postihnutím a pre sociálne slabšie skupiny a Rómov
c)	Otvorená škola - projekt pre podporu budovania informačnej spoločnosti (spolupráca škôl s rodičmi, samosprávou, verejnou a štátnou správou, podnikmi, NGO a pod.).	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR	
Termín úlohy:	2008	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme v stanovenom termíne	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	počet pedagógov využívajúcich počítače v pedagogickom procese v percentách
počet žiakov využívajúcich počítače v pedagogickom procese v percentách	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 75 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	70 % učiteľov použílo počítač vo vyučovaní za posledných 12 mesiacov aspoň raz (zdroj LearnInd 2006), 
83 % žiakov používa počítače pri vyučovaní (zdroj Výkaz IKT MŠ SR 2006)
a) Tvorba e-vzdelávania - class server - (vzdelávacie portály pre všetky stupne škôl).
V spolupráci s firmou Microsoft na báze technológie class-server bol spustený elearningový portál www.modernyucitel.net, na využitie pre učiteľov. Nachádza sa na ňom 1480 materiálov, počet učiteľov využívajúcich portál 2746, počet prístupov za posledný mesiac 7729, počet škôl pripojených na classerver 250. V projekte participuje 250 škôl. V rámci projektu prebehli školenia pre správcov portálu na školách a učiteľov, ktorý portál využívajú.
V rámci odborného vzdelávania bola nasadená a aplikovaná edukačná platforma EDULIFE, automatická tvorba el. obchodu na internete, dokumentačná databanka pre odborné vzdelávanie, online kurzy a bolo zriadené telematické centrum odborného vzdelávania.
Pokračovala tvorba Portálu predmetov www.infovek.sk. Na tomto portáli majú učitelia možnosť získať informácie o tom, ako využívať internet a počítače vo svojej práci. 
V rámci podpory z ESF vznikol portál www.modernyucitel.sk, ktorý bude slúžiť na školenia FIT k dosiahnutiu certifikátu funkčnej gramotnosti učiteľa.
V rámci finančnej podpory z Európskej komisie program Sokrates Minerva vznikla databáza WAD pre učiteľov wad.fmi.uni-sofia.bg/wad/sk/ , kde sa nachádza viac ako 2000 zadaní na využitie na hodinách.
b) Vytvorenie špeciálnej podpory pre deti so zdravotným postihnutím a pre sociálne slabšie skupiny a Rómov
Služby pre rodičov detí s postihnutím sa poskytujú prostredníctvom webstránky, zabezpečuje sa poradenstvo aj v IKT v rámci Rómskeho centra (ROCEPO). 
V rámci spolupráce s firmou Microsoft a podpísaného Memoranda o porozumení sa školy môžu zapájať do programov, ktoré podporujú využívanie informačných technológií v oblasti vzdelávania a efektívne napomáhajú informatizácii slovenských základných a stredných škôl:
–	Fresh start pre darované počítače
–	Partneri vo vzdelávaní School agreement na vzdelávanie a rozvoj informačnej gramotnosti v regiónoch so zlou socioekonomickou situáciou V rámci tohto projektu bolo vybraných 557 škôl, ktoré mohli byť podporené.
–	Program grantov.
c) Otvorená škola 
V rámci projektu Otvorená škola – projekt Infovek zriaďujú vybrané školy prístupové miesta pre lokálnu komunitu. V r. 2006 bolo podporených 162 škôl. 
V rámci centra pre cvičné firmy na SŠ je prepojenie na podniky a štátnu správu pomocou webu.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	a)	Tvorba e-vzdelávania – class server, portály: 113,716 mil.,- Sk
b)	ROCEPO 0,5 mil.,- Sk
c)	Otvorená škola: 15,9 mil.,- Sk
SPOLU: 130,116 mil.,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	a)	Tvorba e-vzdelávania – class server, portály: 113, 259 mil.,- Sk
b)	ROCEPO 0,5 mil.,- Sk
c)	Otvorená škola: 15,9 mil.,- Sk
SPOLU: 129,659 mil.,- Sk
Zdroje z Európskeho sociálneho fondu, Európskej komisie a súkromných zdrojov nevyčísľujeme	

Číslo úlohy:
2.a.4	Názov úlohy:
a)	Implementácia IKT do vzdelávacích osnov na všetkých stupňoch škôl
b)	Upraviť učebné osnovy tak, aby umožnili používať nové učebné metódy založené na informačných a komunikačných technológiách.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Sklz je spôsobený normalizovateľnou kurikurálnou reformou regionálneho školstva.	
Merateľné ukazovatele pokroku:	počet pedagógov využívajúcich počítače v pedagogickom procese v percentách
počet žiakov využívajúcich počítače v pedagogickom procese v percentách	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 50 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	70 % učiteľov použílo počítač vo vyučovaní za posledných 12 mesiacov aspoň raz (zdroj LearnInd 2006), 
83 % žiakov používa počítače pri vyučovaní (zdroj Výkaz IKT MŠ SR 2006)

Ad a) V r. 2006 sa pripravovala koncepcia informatizácie ZŠ. V 19 školách sa realizoval nový učebný plán pre triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a s podporou informačných a komunikačných technológií. Do rozvojového projektu bolo zapojených viac ako 7500 žiakov. 
MŠ realizuje rozvojový projekt pre financovanie projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva na rok 2006.
Ad b) Učebné metódy v iných predmetoch, ako je informatika, môžu učitelia iniciatívne tvorivo upravovať, súčasná legislatíva im to umožňuje. Úloha čaká na obsahovú reformu. Väčšie využívanie bude možné až po schválení nového školského zákona a po vyškolení učiteľov na základnú a funkčnú gramotnosť v IKT. 
V rámci ESF sa realizujú mnohé ďalšie projekty v oblasti e-vzdelávania. 
Na lepšie využívanie IKT vo vyučovaní je potrebné vyškoliť učiteľov. 
Projekt vyškolenia učiteľov Každý učiteľ absolvovalo 53657 učiteľov, v rámci ESF bola výzva na projekt pre funkčnú gramotnosť pre cca 40 000 učiteľov, ktorý sa bude realizovať v r. 2007 - 2008.
Na lepšie využívanie IKT vo vyučovaní je potrebné zabezpečiť aj adekvátne edukačné programy a učebné pomôcky:
V rámci programu Lego Robolab NXT – Lego Senzory DCP bolo pre školy zakúpených 18 sád stavebnice s programovateľnou kockou Lego Robolab NXT a tieto boli umiestnené na najúspešnejších školách z predchádzajúceho programu LegoDacta Robolab.
V rámci programu bolo tiež 30 škôl v minulosti podporených v rámci programu LegoDacta Robolab vybavených senzormi DCP Microsense LogIT senzory k LEGO RoboLab pre prehĺbenie práce s edukačnou stavebnicou LegoDacta Robolab vo vyučovaní prírodovedných predmetov.
Program: Kreatívne vizuálne objavovanie - RNA + RSS
Pre školy bolo zakúpených 2519 multilicencií softvér Revelation Natural Arts (RNA) a Revelation Sights and Sound (RSS) na podporu kreatívnych aktivít žiakov na školách pre základné školy a 8-ročné gymnáziá. V rámci realizácie programu získali učitelia a žiaci najmodernejší softvér na objavovanie, rozvíjanie a vyjadrovanie vizuálnych nápadov a myšlienok pomocou kreslenia s animovania s využitím počítača. 
RNA umožňuje plne sa prispôsobiť svojím používateľským prostredím žiakom podľa veku a skúseností v práci s počítačom. RSS je nástroj na tvorbu multimedií ako videoklipy, podcasty, zvukové záznamy . Obe softvérové aplikácie sú doplnené bohatým metodickým materiálom pre učiteľov s návrhom množstva aktivít.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	a)	10 mil.,- Sk
b)	20 mil.,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	a)	10 mil.,- Sk
b)	20 mil.,- Sk	

Číslo úlohy:
2.a.5	Názov úlohy:
Zabezpečiť každému žiakovi možnosť nadobudnúť základnú digitálnu gramotnosť do ukončenia povinnej školskej dochádzky. Podporovať pilotné projekty, výmenu najlepších praktík a koordinovať výskumné úsilie prostredníctvom vzdelávacích a IKT programov EÚ.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme v stanovenom termíne	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	percento žiakov, ktorí preukázateľným spôsobom nadobudli základnú digitálnu gramotnosť do ukončenia povinnej školskej dochádzky
počet podporených pilotných projektov
správa o výmene najlepších praktík a koordinácií výskumné úsilie prostredníctvom vzdelávacích a IKT programov EÚ	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 50 % 
100% žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku absolvuje predmet informatika
149 projektov podporených v rámci projektu e-twinning	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Všetci žiaci, ktorí riadne študujú, majú možnosť nadobudnúť základnú digitálnu gramotnosť do ukončenia povinnej školskej dochádzky.
Na informovanie a zdieľanie osvedčených postupov slúži portál www.minedu.sk a ďalšie portály, ktoré sú v rámci sekcie Informatizácie v ňom uvedené. Na elektronickú spoluprácu škôl slúži portál www.e-twinning.sk pre školy. 
Sekcia regionálneho školstva má zastúpenie v IKT clustri EK. Koordinuje prieskum SITES 2006 o informačných technológiách vo vzdelávaní (v mesiacoch apríl/máj 2006 prebehlo hlavné testovanie). Výsledky medzinárodného prieskumu budú k dispozícii v r. 2008.
SRŠ organizovala s cieľom výmeny osvedčených postupov dve zahraničné návštevy v oblasti Politiky a praxe v IKT. Jednej sa zúčastnili britskí pedagógovia z Anglicka a druhej pedagogickí odborníci z krajín EÚ. Správy z týchto návštev sú uverejnené na webovej stránke MŠ SR.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Základná dig. gramotnosť sa zabezpečuje prostredníctvom normatívu na žiaka
Ostatné činnosti 1, 4 mil.,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Základná dig. gramotnosť sa zabezpečuje prostredníctvom normatívu na žiaka
Ostatné činnosti 1, 4 mil.,- Sk	

Číslo úlohy:
2.b.1	Názov úlohy:
Vypracovať a realizovať program zvyšovania digitálnej gramotnosti zamestnancov v štátnej a verejnej službe. Realizovať Koncepciu informačného systému v štátnej službe. Uplatniť medzinárodne uznávané programy typu ECDL.	
Gestor úlohy: Príslušní ministri	
Termín úlohy:	priebežne	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme v stanovenom termíne	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	min. 8 000 štátnych zamestnancov bude mať certifikát ECDL – Štart
2008 - všetci štátni zamestnanci vykonávajúci štátnu službu na štátnozamestnaneckom mieste, na ktorom sú na výkon štátnej služby požadované vedomosti a zručnosti potrebné pre efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií budú mať certifikát ECDL - Štart	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Realizácia Národného projektu „Vzdelávanie zamestnancov vo verejnej správe zamerané na získavanie digitálnej gramotnosti a príprava na certifikáciu ECDL prostredníctvom elektronického vzdelávania“ umožňuje všetkým služobným úradom, zatiaľ Bratislavského kraja, vhodným spôsobom dopĺňať vzdelávanie svojich pracovníkov v oblasti digitálnej gramotnosti. Jednotlivé služobné úrady Bratislavského samosprávneho kraja v rámci uzavretej výzvy vzdelávali pracovníkov a zabezpečovali ich preskúšanie v akreditovaných skúšobných centrách. Financovanie projektov je zabezpečené v plnej výške z Európskeho sociálneho fondu. Realizácia Koncepcie Informačného systému v štátnej službe bola úlohou Úradu pre štátnu službu, ktorý bol zrušený v roku 2006 a jeho právomoci prebralo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, preto vyhodnotenie tejto úlohy očakávame od vyššie uvedeného ministerstva. Preverovanie programom ECDL však skomplikovala skutočnosť, že poslaneckým návrhom bol upravený zákon o štátnej službe tak, aby štátni zamestnanci nemuseli prejsť certifikáciou ECDL. Prieskum digitálnej gramotnosti štátnych úradníkov, ktorý bol prezentovaný v januári 2007, ukazuje na katastrofálne vedomosti zamestnancov štátnej správy.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	170 mil.,- Sk z Európskeho sociálneho fondu	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	170 mil.,- Sk z Európskeho sociálneho fondu	

Číslo úlohy:
2.c.1	Názov úlohy:
Spolupracovať na európskej úrovni na efektívnej koordinácii opatrení zameraných na dostupnosť informácií pre všetkých prostredníctvom hodnotenia ukazovateľov výkonu a výmeny najlepších praktík.	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme v stanovenom termíne	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	aktualizácia databázy najlepších praktík Európskej únie pre oblasť informatizácie spoločnosti	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Databáza najlepších praktík EÚ z oblasti IS je dostupná na www.telecom.gov.sk, ktorá je pravidelne aktualizovaná.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Finančné prostriedky nie sú vyčlenené.	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Finančné prostriedky neboli čerpané.	

Číslo úlohy:
3.b.1	Názov úlohy:
Zamerať sa na posilnenie konkurencie v miestnych prístupových sieťach. Identifikovať prekážky a vyriešiť sporné otázky, ktoré bránia posilňovaniu konkurencie v miestnych prístupových sieťach a následne priebežne zverejňovať správy o ich odstránení na internete.	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme v stanovenom termíne	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	vypracovanie štúdie možnosti efektívneho využitia elektronickej komunikačnej infraštruktúry vlastnenej subjektami, v ktorých má štát majoritný vlastnícky podiel chrbticových sietí	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 199/2006 z 1. marca 2006 zabezpečilo vypracovanie štúdie „Efektívne využívanie elektronickej komunikačnej infraštruktúry vlastnenej subjektami, v ktorých má štát väčšinový podiel“. Táto štúdia bola vypracovaná firmou TelTemp, s. r. o. Záverom vypracovanej štúdie bolo vytvoriť štátom riadenú telekomunikačnú organizáciu, založenú na komerčnej báze, čoho následkom sa umožní zvýšenie reálnej konkurencie v poskytovaní služieb elektronické komunikácie a tým aj zníženie cien pre štátnu správu, územnú samosprávu, verejné inštitúcie na celom území Slovenskej republiky.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	845 tis.,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	250 tis.,- Sk – rok 2005
595 tis.,- Sk – rok 2006	

Číslo úlohy:
3.b.2	Názov úlohy:
Pomocou nástrojov verejného financovania uprednostniť podporu rozvoja informačnej infraštruktúry a projektov tam, kde je to potrebné a bez narušenia konkurencie, hlavne v menej rozvinutých regiónoch.	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme v stanovenom termíne	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	počet podaných projektov v rámci OPZI, bod 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor a tiež projekty zaradené do zásobníku projektov pre programovacie obdobie 2007 - 2013	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 100 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	V rámci Operačného programu Znalostná infraštruktúra, 3.2. Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor bolo podaných a vyhodnotených 150 projektov, ktoré momentálne prekračujú možnosti určenej finančnej alokácie. Projekty zaslané do zásobníku projektov pre programovacie obdobie 2007 – 2013 prekročili sumu 5 mld. EUR.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Finančné prostriedky nie sú vyčlenené.	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Finančné prostriedky neboli čerpané.	

Číslo úlohy:
3.b.3	Názov úlohy:
Zamerať sa na zavedenie digitálnych televíznych služieb vrátane internetu a na zvýšenie vzájomnej spolupráce v rámci dobrovoľnej, priemyslom inicializovanej štandardizácie.	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme v stanovenom termíne	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Z dôvodu plynulého prechodu z pilotného vysielania na pravidelné digitálne vysielanie, štát vytvoril vhodné podmienky na predĺženie pilotného vysielania do konca roka 2007.	
Merateľné ukazovatele pokroku:	30.6.2006 - ukončenie pilotného vysielania. Príprava Politiky využívania frekvenčného spektra na širokopásmový prístup (uznesenie vlády SR č.5 z 11.1.2006)
2006 - Príprava Stratégie prechodu z analógového TV vysielania na digitálne pozemské TV vysielanie	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 90 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:	Ukončenie pilotného vysielania a spustenie pravidelného digitálneho vysielania v systéme DVB-T závisí od toho, kedy bude schválený a nadobudne účinnosť návrh zákona o digitálnom vysielaní, ktorý pripravilo Ministerstvo kultúry SR. Návrh zákona o digitálnom vysielaní bol schválený vládou SR dňa 22. novembra 2006. V súčasnosti je predložený na rokovanie do Národnej rady SR. Predpokladané spustenie pravidelného digitálneho vysielania v systéme DVB-T a ukončenie pilotného vysielania je k 1. januáru 2008.	
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	MDPT SR vytvorilo adekvátne podmienky na realizáciu pilotných projektov digitálneho televízneho vysielania v systéme DVB-T. V roku 2004 boli spustené pilotné vysielania v lokalite Košice / Prešov a v lokalite Banská Bystrica / Zvolen. V roku 2005 bolo spustené digitálne pilotné vysielanie v lokalite Bratislava. 
Uznesením vlády SR č. 646 z 26. júla 2006 bola schválená „Stratégia prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie v SR“, ktorá popisuje hlavné ciele a zásady prechodu, formuluje úlohu štátu a príslušných orgánov štátnej správy pri vytváraní podmienok prechodu, obsahuje posúdenie existujúcej situácie v TV vysielaní na Slovensku a stanovuje technický a časový plán.
V auguste 2006 bola zriadená pri Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR medzirezortná pracovná skupina pre digitálne vysielanie v SR, ktorá sa podieľa na vytváraní zásad štátnej politiky SR v oblasti digitálneho vysielania a na vytváraní koncepcie jeho rozvoja.
V roku 2006 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v rámci projektov výskumu a vývoja realizovalo 4 projekty s obsahovým zameraním na výskum:
•	legislatívnych a sociálno-ekonomických aspektov prechodu z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie,
•	pokrytia územia SR signálmi DVB-T na účely začatia pravidelného pozemského digitálneho TV vysielania a ukončenia analógového TV vysielania,
•	šírenia signálov DVB-T v podmienkach SR so zameraním na vytvorenie metodiky hodnotenia pokrytia územia vysielaním DVB-T,
•	prípravy a zabezpečenie vysielania vybraných služieb e-Government prostredníctvom DVB-T z hľadiska potrieb štátu.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	15 mil.,- Sk	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	15 mil.,- Sk	

Číslo úlohy:
3.c.1	Názov úlohy:
Zdokonaliť celkovú bezpečnosť on-line transakcií: podporou certifikátov bezpečnosti, inicializovaných priemyslom prostredníctvom koordinácie úsilia a vzájomného uznania, zahrňujúc odbornú certifikáciu informačnej bezpečnosti, stimulovaním verejno / súkromnej spolupráce na zabezpečení spoľahlivosti informačných infraštruktúr (vrátane rozvoja systémov včasného varovania).	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme v stanovenom termíne	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:		
Merateľné ukazovatele pokroku:	vytvorenie GOVCERT, sumarizácie projektov využívajúcich el. podpis a certifikáty bezpečnosti, vydanie štandardov bezpečnosti prevádzky IS	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 40 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Projekt na vytvorenie GOVCERT je v prípravnej fáze. Organizačná, technická stránka úlohy je pripravená. V súčasnosti je potrebné doplniť zdroje finančného zabezpečenia, právny rámec a upresniť časový harmonogram plnenia.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Finančné prostriedky nie sú vyčlenené.	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Finančné prostriedky neboli čerpané.	

Číslo úlohy:
3.c.2	Názov úlohy:
Zabezpečiť školenia / vzdelávanie legislatívnych pracovníkov, súdneho personálu a priemyselných špecialistov v oblasti posilnenia práva, hi-tech kriminality a otázok bezpečnosti (ako je boj proti počítačovej kriminalite, zneužívaniu počítačov a pod.).	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Plnenie úlohy:	úlohu plníme so sklzom	
Zdôvodnenie neplnenia alebo čiastočného plnenia úlohy:	Na realizáciu úlohy neboli vyčlenené finančné prostriedky.	
Merateľné ukazovatele pokroku:	realizácia školení	
Plnenie merateľných ukazovateľov pokroku:	v roku 2006 je merateľný ukazovateľ splnený na 50 % 	
Zdôvodnenie nedosiahnutia merateľného pokroku:		
Celkové zhrnutie plnenia úlohy k 31.12.2006:	Príprava projektu v spolupráci s akademickým sektorom je vo vzájomnom rokovaní a boli predložené návrhy školení. V roku 2007 sa plánuje realizácia školení. Táto fáza si bude vyžadovať finančné prostriedky. Prebiehajú konzultácie s Právnickou fakultou Univerzity Komenského.	
Finančné prostriedky určené na realizáciu úlohy:	Finančné prostriedky nie sú vyčlenené.	
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčerpané na realizáciu úlohy k 31. 12. 2006:	Finančné prostriedky neboli čerpané.	

Aktualizácia úloh akčného plánu v ďalších rokoch

AP pre rok 2007 celkovo pozostáva zo 48 úloh ( 5 nosných úloh a 43 podporných úloh), ktoré boli súčasťou AP pre rok 2006, z toho 1 úloha nebola splnená a z 12 novovytvorených úloh.

0. Urýchliť budovanie základných pilierov informačnej spoločnosti
A	 Štandardizovaná tvorba a integrácia užitočného obsahu – informácií a služieb – pre  fyzické a právnické osoby	

Číslo úlohy:
A.1	Názov úlohy:
Posilnenie a redudancia infrštruktúry vládnej nadrezortnej siete GOVNET v súvislosti so skvalitnením zabezpečenia prenosu neutajovaných skutočností pre orgány štátnej správy a prenosu klasifikovaných skutočností do úrovne – vyhradené s ohľadom na bezpečnostné požiadavky informačnej siete EÚ TESTA	
Gestor úlohy: Vedúci úradu vlády SR	
Termín úlohy:	31. marec 2008	
Merateľné ukazovatele pokroku:	–	Realizácia bezpečnostného projektu vládnej nadrezortnej siete GOVNET
–	Výstavba nového dátového centra siete GOVNET Úradu vlády SR, ktoré bude spĺňať sprísnené požiadavky fyzickej, objektovej a aplikačnej bezpečnosti
–	Zabezpečenie nového objektu technologickým a bezpečnostným zariadením pre následné umiestnenie redundancie siete GOVNET a premostenie pôvodného dátového centra
–	Odovzdanie nového dátového centra Úradu vlády SR do prevádzky	

Číslo úlohy:
A.2	Názov úlohy:
Dobudovanie základných funkcionalít a modulov Ústredného portálu verejnej správy pre integráciu elektronických služieb poskytovaných orgánmi verejnej správy na rozhraní portálu	
Gestor úlohy: Vedúci úradu vlády SR	
Termín úlohy:	31. december 2007	
Merateľné ukazovatele pokroku:	–	Doplnenie komponentov centrálnej elektronickej podateľne a ich prevádzka
–	Spustenie transakčnej formy komunikácie elektronických služieb správnych orgánov, ktoré elektronické služby poskytujú
–	Integrácia šiestich elektronických služieb centrálnych správnych orgánov na Ústredný portál verejnej správy (špecifikácia podľa rozhodnutia riadiaceho výboru Ústredný portál verejnej správy)
–	Konsolidácia informačného obsahu Ústredného portálu verejnej správy a jeho transakčného jadra vo vzťahu k novým elektronickým službám
–	20% zvýšenie návštevnosti Ústredného portálu verejnej správy	

Číslo úlohy:
A.4	Názov úlohy:
Aktívna účasť na komunitárnych programoch EÚ v oblasti IS (IDAbc, eContentplus, MODINIS, eTEN, Safer Internetplus).	
Gestor úlohy: Minister financií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	vytvorenie národných kontaktných bodov pre koordináciu relevantných programov spoločenstva, aktívna účasť na zasadnutiach výborov a pracovných skupín	

Číslo úlohy:
A.5	Názov úlohy:
Stimulovať tvorbu digitálneho obsahu - informácií a služieb - zameraného na praktické použitie z pohľadu občana a súkromného sektoru.	
Gestor úlohy: Minister financií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	zabezpečiť obyvateľstvu možnosť elektronického overovania stavu aktualizácie referenčných údajov a stav spracovania požiadaviek občanov, zabezpečiť sprevádzkovanie služby overovania dokladov a overenia osobných údajov formou www rozhrania, zabezpečenie pripojenia dvoch ústredných orgánov štátnej správy na synchronizáciu referenčného registra obyvateľov, zabezpečenie sprevádzkovania služby na kontrolu podkladov podaní pre verejnú správu	

B	 Budovanie ľudských kapacít pre IS v štátnej a verejnej správe, ako aj všeobecne	

Číslo úlohy:
B.1	Názov úlohy:
Zvyšovanie počítačovej gramotnosti špecifických skupín obyvateľstva (žien, špeciálne žien, ohrozených nezamestnanosťou, rómskych spoluobčanov, zdravotne postihnutých občanov, seniorov, občanov s menšími rozvojovými šancami - vidiecke obyvateľstvo.	
Gestor úlohy: Minister financií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	podporiť minimálne 50 projektov na zvyšovanie digitálnej gramotnosti špec. skupín obyvateľstva	

1. Stimulovať využívanie internetu tvorbou a poskytovaním relevantného obsahu
1. a	 Urýchliť e-obchod	

Číslo úlohy:
1.a.1	Názov úlohy:
Stimulovať zvýšenú flexibilitu pri regulácii e-obchodu so zameraním na spoločnú reguláciu a samoreguláciu, napr. prostredníctvom spolupráce s relevantnými obchodnými skupinami, ako sú Global Business Dialogue. (www.gbde.org)	
Gestor úlohy: Minister hospodárstva SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	spolupráca s relevantnými obchodnými skupinami	

Číslo úlohy:
1.a.2	Názov úlohy:
Podporovať elektronizáciu malých a stredných podnikov ("Go Digital") koordináciu  vzájomnej výmeny vedomostí a informácií o praktických príkladoch, pripravenosti na e-obchod a meraní ukazovateľov (benchmarking). Zriadiť "referenčné centrá" s úlohou pomôcť malým a stredným podnikom začleniť e-obchod do obchodných stratégií. 	
Gestor úlohy: Minister hospodárstva SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	vytvorenie referenčných centier
vytvorenie služieb s e- obchodom	

Číslo úlohy:
1.a.3	Názov úlohy:
Zaviesť systém elektronických identifikačných preukazov totožnosti ako predpokladu využívania integrovaných služieb v režime on-line.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR	
Termín úlohy:	2007	
Merateľné ukazovatele pokroku:	technicky pripraviť možnosť vydávania občianskych preukazov do preukazov s elektronickým čipom pre zaručený elektronický podpis	

1. b	 Verejná správa on-line – elektronický prístup k verejným službám	

Číslo úlohy:
1.b.1	Názov úlohy:
Budovanie siete Jednotných kontaktných miest (JKM) – znižovanie administratívnych postupov pri začatí podnikania.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR	
Termín úlohy:	2009	
Merateľné ukazovatele pokroku:	poskytovanie služieb JKM pre fyzické osoby (FO) SR a pre právnické osoby (PO) SR podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia
poskytovanie služieb JKM FO/PO EÚ podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia
poskytovanie služieb JKM pre osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského oprávnenia	

Číslo úlohy:
1.b.2	Názov úlohy:
Zabezpečiť tvorbu, aktualizáciu a sprístupnenie verejných informácií a služieb on-line vrátane právnických, administratívnych, kultúrnych, environmentálnych a dopravných informácií s prepojením na centrálny portál. Poskytnúť súčinnosť a zabezpečiť spoluprácu pri udržiavaní aktuálneho stavu centrálneho portálu a zabezpečiť aktívne permanentné poskytovanie informácií pre potreby centrálneho portálu (metodický pokyn).	
Gestor úlohy: Minister financií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	Počet služieb vytvorených on-line	

Číslo úlohy:
1.b.3	Názov úlohy:
Umožniť všeobecný elektronický prístup k základným verejným službám. ("Cestovná mapa" k e-Governmentu)	
Gestor úlohy: Minister financií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	realizácia úloh cestovnej mapy	

Číslo úlohy:
1.b.4	Názov úlohy:
Zabezpečiť zjednodušené elektronické administratívne postupy pre obchodovanie, napr. zrýchlené (on-line) postupy na založenie spoločností.	
Gestor úlohy: Minister financií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	skrátenie času potrebného pre založenie súkromnej spoločnosti 	

Číslo úlohy:
1.b.5	Názov úlohy:
Vytvoriť "Systém základných registrov VS" ako systém navzájom prepojených a harmonizovaných registrov, ktorý bude povinne zdielateľný všetkými IS VS a bude celoplošne sprístupniteľný.
a)	Vypracovať návrh základných východísk a princípov systému základných registrov VS ako systému navzájom prepojených a harmonizovaných registrov
b)	Vypracovať návrh realizačnej štúdie s cieľom konkretizovať údajové objekty systému a otestovať možnosti ich prepojenia do funkčného kooperujúceho celku	
Gestor úlohy: Predseda štatistického úradu SR	
Termín úlohy:	2007	
Merateľné ukazovatele pokroku:	predložiť návrh základných východísk
návrh realizačnej štúdie	

Číslo úlohy:
1.b.6	Názov úlohy:
Zabezpečiť vypracovanie definície Bezvýznamového identifikátora fyzických osôb (BIFO) pre registre verejnej správy.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR	
Termín úlohy:	2007	
Merateľné ukazovatele pokroku:	zavedenie identifikátora pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy a vytvorenie jednoznačného identifikátora z rodného čísla	

Číslo úlohy:
1.b.9	Názov úlohy:
Zabezpečiť aktuálnosť JASPI.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR	
Termín úlohy:	2007	
Merateľné ukazovatele pokroku:	predložiť návrh riešenia systému JASPI vrátane legislatívneho zabezpečenia
zabezpečiť relevanciu vkladaných dokumentov na základe el. podpisu

Číslo úlohy:
1.b.10	Názov úlohy:
Vypracovať a predložiť návrh prepojenia systému JASPI so systémami EÚ.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR	
Termín úlohy:	2009	
Merateľné ukazovatele pokroku:	predložiť návrh základných východísk
predložiť legislatívny zámer
predložiť návrh realizačnej štúdie	

Číslo úlohy:
1.b.12	Názov úlohy:
Vybudovanie Základnej bázy pre geografické informačné systémy (ZBGIS) - ako nadrezortného systému priestorových informácií (úloha vyplýva zo zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii).	
Gestor úlohy: Predseda úradu geodézie, kartografie a katastra SR	
Termín úlohy:	2011	
Merateľné ukazovatele pokroku:	v roku 2007 databázové spracovanie ZB GIS vrátane atribútov a metaúdajov v rozsahu 1500 km2	

Číslo úlohy:
1.b.13	Názov úlohy:
Realizovať Program elektronizácie knižníc (zabezpečiť vo verejných a vedeckých knižniciach budovanie verejných internetových pracovísk pre všetky skupiny občanov s prístupom k verejným informačným zdrojom a službám).	
Gestor úlohy: Minister kultúry SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	počet verejných knižníc s profesionálnym zamestnancom s aspoň jedným verejne prístupným počítačom pripojeným na širokopásmový internet	

Číslo úlohy:
1.b.14	Názov úlohy:
Realizovať plne on-line službu podania žiadosti o príspevky na deti.	
Gestor úlohy: Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR	
Termín úlohy:	2007	
Merateľné ukazovatele pokroku:	spustenie služby podania žiadosti o príspevky na deti k (4. úroveň služby)	

Číslo úlohy:
1.b.15	Názov úlohy:
Vytvoriť "Systém základných registrov VS" ako systém navzájom prepojených a harmonizovaných registrov, ktorý bude povinne zdielateľný všetkými IS VS a bude celoplošne sprístupniteľný.
a)	Vypracovať návrh legislatívneho zámeru zákona o základných registroch verejnej správy	
Gestor úlohy: Minister financií SR	
Termín úlohy:	2007	
Merateľné ukazovatele pokroku:	legislatívny zámer	

1. c	 Zdravotníctvo on-line	

Číslo úlohy:
1.c.1	Názov úlohy:
Integrácia informačnej sústavy zdravotníctva, návrh a aktualizácia integračných nástrojov (centrálnych číselníkov, klasifikácií, protokolov a rozhraní) štandardov pre zdravotnícku informatiku s prihliadnutím na medzinárodné štandardy a prostredie v SR	
Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR	
Termín úlohy:	2009	
Merateľné ukazovatele pokroku:	Návrh a aktualizácia integračných nástrojov (centrálnych číselníkov, klasifikácií, protokolov a rozhraní) a štandardov pre zdravotnícku informatiku, pilotný projekt, dátové úložisko.	

Číslo úlohy:
1.c.3	Názov úlohy:
Informatizácia zdravotníckych zariadení, národné a regionálne zdravotnícke infraštruktúry a ich prepájanie s verejnými zdravotníckymi sieťami EÚ.	
Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR	
Termín úlohy:	2009	
Merateľné ukazovatele pokroku:	Počet typov informatizovaných zdravotníckych zariadení – poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS), napr. všeobecná ambulantná starostlivosť, špecializovaná ambulantná starostlivosť, ústavná starostlivosť, lekárska starostlivosť a pod.	

Číslo úlohy:
1.c.4	Názov úlohy:
Rozvoj informačných systémov pre podporu politiky verejného zdravotníctva	
Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR	
Termín úlohy:	2009	
Merateľné ukazovatele pokroku:	Počet druhov aplikácií nasadených do prevádzky	

Číslo úlohy:
1.c.5	Názov úlohy:
Informatizácia Úradu MZ SR	
Gestor úlohy: Minister zdravotníctva SR	
Termín úlohy:	2009	
Merateľné ukazovatele pokroku:	Počet druhov aplikácií nasadených do prevádzky	

1. d	Národný digitálny obsah pre globálne siete	

Číslo úlohy:
1.d.1	Názov úlohy:
Podporovať budovanie národných digitálnych knižníc pre vedu, výskum, techniku a vzdelávanie, systémov elektronického publikovania a digitalizáciu národného dedičstva (otvorených národných digitálnych archívov, digitalizáciu fondov, zbierok pamäťových inštitúcií atď.).	
Gestor úlohy: Minister kultúry SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	počet digitalizačných pracovísk v rezorte kultúry	

Číslo úlohy:
1.d.2	Názov úlohy:
Portál kultúry	
Gestor úlohy: Minister kultúry SR	
Termín úlohy:	2008	
Merateľné ukazovatele pokroku:	sprístupnenie informácií a štruktúrovaných dát vrátane registrov za všetky oblasti kultúry pre verejnosť prostredníctvom jediného prístupového miesta na internete	

Číslo úlohy:
1.d.3	Názov úlohy:
Realizácia projektov i úloh z Programu informatizácie rezortu MP SR do roku 2005.	
Gestor úlohy: Minister pôdohospodárstva SR	
Termín úlohy:	2007	
Merateľné ukazovatele pokroku:	predloženie realizovaných úloh a projektov
–	sieť WAN-LAN, ktorá prepája Ministerstvo pôdohospodárstva SR a jeho externé odbory s úradmi špecializovanej štátnej správy, bola vybudovaná. V závislosti od množstva využívaných dátových služieb sa pripravuje/zvažuje posilnenie komunikačných liniek
–	internetová aplikácia veterinárneho GIS bola vytvorená, predpokladá sa jej zahrnutie do komplexného systému veterinárnej ochrany územia
–	zrealizovaných bolo nasledovných 5 opatrení riadenia bezpečnosti IS rezortu pôdohospodárstva zo štandardu STN ISO/IEC 17799
–	Smernica č. 3 o ochrane osobných údajov
–	Smernica č. 4 určujúca postup riadenia bezpečnostných incidentov
–	Smernica č. 5 určujúca riadenie prístupu tretích strán k IS rezortu
–	Smernica č. 6 o bezpečnom používaní externých služieb (outsourcing)
–	Smernica č. 7 o fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia	

Číslo úlohy:
1.d.4	Názov úlohy:
Konsolidácia telekomunikačných služieb rezortu pôdohospodárstva	
Gestor úlohy: Minister pôdohospodárstva SR	
Termín úlohy:	2007	
Merateľné ukazovatele pokroku:	Na existujúcej dátovej sieti špecializovanej štátnej správy rezortu: 
–	Implementovaná IP telefónia
–	Zjednotený systém poskytovateľov pevných hlasových služieb a poskytovateľov mobilných komunikačných služieb	

Číslo úlohy:
1.d.5	Názov úlohy:
Vybudovanie internetového portálu, ktorý poskytne ľahší a cezhraničný prístup k archívnemu dedičstvu uloženému v štátnych archívoch SR a verejných archívoch členských krajín EÚ.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR	
Termín úlohy:	2010	
Merateľné ukazovatele pokroku:	vybudovanie centrálneho miesta prístupu k základným informáciám o archívnom dedičstve v štátnych archívoch SR, jeho obsahu, sprístupnení a prístupe k nemu
prepojenie na internetový archívny portál archívov členských štátov EÚ
funkčná prevádzka portálu
počet štátnych archívov pripojených na portál
počet dostupných služieb pre verejnosť	

Číslo úlohy:
1.d.6	Názov úlohy:
Vytvorenie technických podmienok pre vyhotovovanie študijných kópií a on-line prístup k archívnym dokumentom uloženým v štátnych archívoch SR.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR	
Termín úlohy:	2010	
Merateľné ukazovatele pokroku:	počet špecializovaných pracovísk a zamestnancov pre digitalizovanie archívnych dokumentov
počet zverejnených archívnych pomôcok a informácií o archívnych dokumentoch
počet zverejnených digitalizovaných archívnych dokumentov
počet predložených / zverejnených digitálnych kópií archívnych dokumentov žiadateľovi v porovnaní s počtom predkladaných originálov	

Číslo úlohy:
1.d.7	Názov úlohy:
Vybudovanie elektronického archívneho informačného systému (EAIS).	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR	
Termín úlohy:	2010	
Merateľné ukazovatele pokroku:	počet štátnych archívov s vlastným portálom EAIS
počet štátnych archívov pripojených na centrálny portál
počet štátnych archívov s verejne prístupným PC s prístupom na portál
počet dostupných služieb prostredníctvom EAIS pre verejnosť	

1. e	 Inteligentné dopravné systémy	

Číslo úlohy:
1.e.1	Názov úlohy:
Implementácia inteligentných dopravných služieb.	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	počet realizovaných domácich a  európskych projektov	

1. f	 Životné prostredie on-line	

Číslo úlohy:
1.f.1	Názov úlohy:
Podporovať ďalší rozvoj siete EIONET na zber, monitorovanie a informovanie o environmentálnych údajoch kompatibilnej s rozvíjajúcimi sa sieťami v Európe.	
Gestor úlohy: Minister životného prostredia SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	permanentné zabezpečenie uzla a sieťových služieb	

1. g	 Vzdelávanie on-line	

Číslo úlohy:
1.g.1	Názov úlohy:
Vypracovanie stratégie informatizácie regionálneho školstva, t. j. budovanie modernej školy.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR	
Termín úlohy:	2007	
Merateľné ukazovatele pokroku:	schválenie stratégie informatizácie regionálneho školstva vládou SR	

Číslo úlohy:
1.g.2	Názov úlohy:
a)	Stimulovať tvorbu digitálneho obsahu (informácií a služieb) a edukačného softvéru zameraného na praktické použitie vo výchovno-vzdelávacom procese.
b)	Tvorba e-vzdelávania - class server - (vzdelávacie portály pre všetky stupne škôl).
c)	Vytvorenie špeciálnej podpory pre deti so zdravotným postihnutím a pre sociálne slabšie skupiny a Rómov.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	Počet nových titulov, počet šírených titulov
Počet prístupov na príslušné portály a systémy
Počet pedagógov využívajúcich počítače v pedagogickom procese v percentách
Počet žiakov využívajúcich počítače v pedagogickom procese v percentách	

Číslo úlohy:
1.g.3	Názov úlohy:
a)	Implementácia IKT do vzdelávacích osnov na všetkých stupňoch škôl
b)	Upraviť učebné osnovy tak, aby umožnili používať nové učebné metódy založené na informačných a komunikačných technológiách.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	počet schválených učebných osnov so zapracovaním využívania IKT v jednotlivých predmetoch (okrem informatiky)	

2. Investície do ľudí a ich kvalifikácie
2. a	 Európska mládež v digitálnom veku	

Číslo úlohy:
2.a.1	Názov úlohy:
Zabezpečiť IKT kompetencie na 1. a 2. úrovni v informačných technológiách vo výchovno-vzdelávacom procese pre učiteľov a ich prepojenie na kariérový postup.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	počet vyškolených učiteľov
počet pedagógov používajúcich IKT vo výchovno-vzdelávacom procese	

Číslo úlohy:
2.a.3	Názov úlohy:
a)	Vytvorenie modelových inovačných škôl a sietí spolupracujúcich škôl na podporu využívania IKT vo výchovno-vzdelávacom procese.
b)	Otvorená škola – projekt pre podporu budovania informačnej spoločnosti (spolupráca škôl s rodičmi, samosprávou, verejnou správou a štátnou správou, podnikmi, NGO a pod.).	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	Počet modelových inovačných škôl
Počet projektov na spoluprácu	

Číslo úlohy:
2.a.5	Názov úlohy:
Zabezpečiť každému žiakovi možnosť nadobudnúť základnú digitálnu gramotnosť do ukončenia povinnej školskej dochádzky. Podporovať pilotné projekty, výmenu najlepších praktík a koordinovať výskumné úsilie prostredníctvom vzdelávacích a IKT programov EÚ.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	zavedenie povinného predmetu informatika, resp. Práca s PC do učebných osnov základných škôl
počet podporených pilotných projektov
správa o výmene najlepších praktík a koordinácií výskumné úsilie prostredníctvom vzdelávacích a IKT programov EÚ	

Číslo úlohy:
2.a.6	Názov úlohy:
a)	Otvorená škola - projekt pre podporu budovania informačnej spoločnosti (spolupráca škôl s rodičmi, samosprávou, verejnou a štátnou správou, podnikmi, NGO a pod.).	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR	
Termín úlohy:	2008	
Merateľné ukazovatele pokroku:	počet pedagógov využívajúcich počítače v pedagogickom procese v percentách
počet žiakov využívajúcich počítače v pedagogickom procese v percentách	

2. b	 Akvizícia zručností potrebných pre poskytovanie digitálnych informácií a služieb u zamestnancov štátnej a verejnej správy	

Číslo úlohy:
2.b.1	Názov úlohy:
Vypracovať a realizovať program zvyšovania digitálnej gramotnosti zamestnancov v štátnej a verejnej službe. Realizovať Koncepciu informačného systému v štátnej službe. Uplatniť medzinárodne uznávané programy typu ECDL.	
Gestor úlohy: Minister financií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	percento štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu na štátnozamestnaneckom mieste, ktorý získali certifikát ECDL - Štart	

2. c	 Umožniť všetkým účasť na tvorbe a prínosoch znalostnej ekonomiky 	

Číslo úlohy:
2.c.1	Názov úlohy:
Spolupracovať na európskej úrovni na efektívnej koordinácii opatrení zameraných na dostupnosť informácií pre všetkých prostredníctvom hodnotenia ukazovateľov výkonu a výmeny najlepších praktík.	
Gestor úlohy: Minister financií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	aktualizácia databázy najlepších praktík EÚ pre oblasť IS	

3. Lacnejší, rýchlejší a bezpečnejší internet
3. a	Podpora nasadenia moderných technológií pre prístup a konektivitu umožňujúcich cenovo dostupné širokopásmové pripojenie k Internetu pre všetkých občanov	

Číslo úlohy:
3.a.1	Názov úlohy:
Zabezpečiť pripojenie 80% škôl do vysokorýchlostného internetu.	
Gestor úlohy: Podpredseda vlády a minister školstva SR	
Termín úlohy:	2008	
Merateľné ukazovatele pokroku:	percento pripojených škôl	

3. b	Posilnenie konkurencie v poskytovaní prístupu k miestnym prístupovým sieťam	

Číslo úlohy:
3.b.1	Názov úlohy:
Zamerať sa na posilnenie konkurencie v miestnych prístupových sieťach. Identifikovať prekážky a vyriešiť sporné otázky, ktoré bránia posilňovaniu konkurencie v miestnych prístupových sieťach a následne priebežne zverejňovať správy o ich odstránení na internete.	
Gestor úlohy: Minister financií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	vypracovanie štúdie možnosti efektívneho využitia elektronickej komunikačnej infraštruktúry vlastnenej subjektami, v ktorých má štát majoritný vlastnícky podiel chrbticových sietí	

Číslo úlohy:
3.b.2	Názov úlohy:
Pomocou nástrojov verejného financovania uprednostniť podporu rozvoja informačnej infraštruktúry a projektov tam, kde je to potrebné a bez narušenia konkurencie, hlavne v menej rozvinutých regiónoch.	
Gestor úlohy: Minister financií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	počet podaných projektov v rámci operačného programu Znalostná infraštruktúra, bod 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor a tiež projekty zaradené do zásobníku projektov pre programové obdobie 2007 - 2013	

Číslo úlohy:
3.b.3	Názov úlohy:
Zamerať sa na zavedenie digitálnych televíznych služieb vrátane internetu a na zvýšenie vzájomnej spolupráce v rámci dobrovoľnej, priemyslom inicializovanej štandardizácie.	
Gestor úlohy: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	schválenie zákona o digitálnom vysielaní
príprava všeobecne záväzného právneho predpisu
počet realizovaných projektov výskumu a vývoja	

3. c	 Integrácia informačnej bezpečnosti do IT transakcií na všetkých úrovniach	

Číslo úlohy:
3.c.1	Názov úlohy:
Zdokonaliť celkovú bezpečnosť on-line transakcií: podporou certifikátov bezpečnosti, inicializovaných priemyslom prostredníctvom koordinácie úsilia a vzájomného uznania, zahrnujúc odbornú certifikáciu informačnej bezpečnosti, stimulovaním verejno / súkromnej spolupráce na zabezpečení spoľahlivosti informačných infraštruktúr (vrátane rozvoja systémov včasného varovania).	
Gestor úlohy: Minister financií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	vytvorenie GOVCERT, sumarizácie projektov využívajúcich el. podpis a certifikáty bezpečnosti, vydanie štandardov bezpečnosti prevádzky IS	

Číslo úlohy:
3.c.2	Názov úlohy:
Zabezpečiť školenia / vzdelávanie legislatívnych pracovníkov, súdneho personálu a priemyselných špecialistov v oblasti posilnenia práva, hi-tech kriminality a otázok bezpečnosti (ako je boj proti počítačovej kriminalite, zneužívaniu počítačov a pod.).	
Gestor úlohy: Minister financií SR	
Termín úlohy:	priebežne	
Merateľné ukazovatele pokroku:	realizácia školení