Zásobník projektov Dopravnej infraštruktúry														
																	
Projekt	Štúdia uskutočniteľnosti	EIA	DUR - pozemkové povolenie	DSP - Dokumentácia stavebného povolenia	Stavebné povolenie prisľúbené alebo očakávané	Progress of Land Acquisition	Kontrakty na práce	DRS - Dokumentácia pre realizáciu výstavby	Najskorší dátum začatia výstavby	doba výstavby   (v mesiacoch)	odhadovaná cena výstavby (v miliónoch EUR)	
							DSN - tendrová dokumentácia	Zverejnenie tendrového zámeru	Výzva na tender	Predloženie tendra	Vyhodnotenie tendra	Udelenie kontraktu					
OPATRENIE 1.1 - ŽELEZNIČNÉ PROJEKTY	
elektrifikácia trate Zvolen-Banska Bystrica.  20km jednokoľajná trať	áno	áno	bude aktualizované	12/03	--	01/04	 	 	 	 	 	 	05/04	24	40,000	
podchod a nástupištia na stanici v Presove. 32m podchodu a 2 nástupištia (4 rohy nástupíšť)	áno	áno	áno	12/03	 	--	 	 	 	 	 	 	 	2004	24	13,000	
podchod a nástupištia na stanici Poprad Tatry. 32m peších podchodov a 3 nástupištia, (5 rohov nástupíšť)	áno	áno	bude aktualizované	 	--	 	 	 	 	 	 	 	2005	 	20,000	
zoraďisko vlakov Zilina – Teplicka	áno	áno	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2006	 	45,000	
Zvolen - Fiľakovo - elektrifikácia trate.  65km jednokoľajnej trate (s niekoľko dvojkoľajnými úsekmi)	áno	áno	2004	2004	 	--	2005	 	 	 	 	 	 	2006	 	20,000	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
													celkom 	za opatrenie	Total for Measure 1.1 =	138,000	
																 	
OPATRENIE 1.2  - CESTNÉ PROJEKTY	
I/50 (R2) obchvat  Ozd'any.  6.09km 2-prúdovej cesty kategórie R11.5/100, ktorá bude tvoriť jeden z prúdov budúcej cesty kategórie R22.5/100	áno	áno	áno	07/03	06/04	začiatok 07/03	10/03	 	 	 	 	 	 	09/04	36	21,072	
I/65 (R1) diaľnica Zarnovica-Sasovske Podhradie.  18.08km 4-prúdovej cesty kategórie R22.5/100(80), bude vybudované v dvoch etapách 9.35km + 8.73km	áno	áno	02/03	06/03 to 11/03	07/04	začiatok 07/03	1. etapa 07/04	 	 	 	 	 	 	11/04	48	70,714	
	 	 	 		 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	79,571	
I/67 obchvat Poprad-Matejovce .  ??km 4-prúdovej cesty kategórie R22.5/80	áno	áno	áno	09/03	 	začiatok 2004	 	 	 	 	 	 	 	2005	 	26,191	
Rezervné cestné projekty	
I/50 (R2) obchvat Figa 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2004	 	 	
Zvolen-Pusty Hrad	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2005	 	 	
I/65 (R1) obchvat  Ziar n.Hronom 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2007	 	 	
																	
													celkom	opatrenie	Total for Measure 1.2 =	197,548	
																	
OPATRENIE 1.3  LETISKOVÉ PROJEKTY	
Poprad-Tatry.  Dodanie a nainštalovanie bezpečnostného systému v prevádzkových oblastiach a v budove letiska.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0,196	
Piest'any. Dodanie a nainštalovanie bezpečnostného systému v prevádzkových oblastiach a v budove letiska.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0,196	
Sliac.  Dodanie a nainštalovanie bezpečnostných systémov v prevádzkových oblastiach a v budove letiska.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0,196	
																	
													celkom	opatrenie	Total for Measure 1.3 =	0,588