Projekt tvorby a rozvoja Národného Schengenského informačného systému

1. Úvod

Schengenský informačný systém umožňuje využívať každej členskej krajine centrálnu databázu pozostávajúcu z policajných a justičných informácií týkajúcich sa bezpečnosti každého štátu Schengenského spoločenstva o všetkých veciach a osobách hľadaných útvarmi polície a colnými orgánmi v rozsahu stanovenom Schengenským dohovorom. 
       Prvou prioritou v súvislosti s budovaním infraštruktúry Národného Schengenského informačného systému (ďalej len „N.SIS“) je zosúladenie údajov, analýza potrebných úprav formátov údajov a definícia rozhrania pre komunikáciu medzi policajnými informačnými systémami a N.SIS. Prvá analýza národných policajných databáz už bola vypracovaná v rámci twinningového projektu SR98/IB/JH/01. Hlavné zásady pre budovanie N.SIS sú dané Schengenským dohovorom a boli definované v rámci twinningového procesu.
        Základy na vybudovanie Schengenského informačného systému v Slovenskej republike už z väčšej časti existujú vo forme informačných systémov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Pripravované systémy, najmä rámec Automatizovaného informačného systému polície (ďalej len „AISP“), sa javia ako dobrý a flexibilný technický základ.
 Funkčný N.SIS je jedným z najdôležitejších predpokladov na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach. Tento systém je jedným z hlavných kompenzačných opatrení na zabezpečenie verejnej bezpečnosti v Schengenskom priestore, vrátane bezpečnosti na aplikovanie ustanovení týkajúcich sa pohybu osôb v rámci Európskej únie (ďalej len „EÚ“) /Schengenského priestoru/. N.SIS nie je využívaný len na hraničných priechodoch, ale napomáha odhaľovaniu trestnej činnosti aj na území jednotlivých členských štátov. Po prvej analýze možného využívania N.SIS zainteresovanými ministerstvami, je predpoklad, že N.SIS bude v zmysle Schengenského dohovoru využívaný všetkými zložkami zabezpečujúcimi verejný poriadok a bezpečnosť.
Druhá generácia Centrálneho Schengenského informačného systému (ďalej len „C.SIS“) nebude v prevádzke skôr ako koncom roku 2005. Stále prebiehajú diskusie o budúcej technickej špecifikácii a nových prevádzkových požiadavkách. Druhá generácia C.SIS neovplyvní budovanie N.SIS v kandidátskych krajinách, ktoré budujú N.SIS v zmysle technickej špecifikácie súčasného C.SIS. Všetky formáty údajov budú zachované. Druhá generácia C.SIS bude plne kompatibilná so súčasným stavom, rozšírená o možnosti spracovávania obrazu a daktyloskopických odtlačkov. Pri spustení C.SIS druhej generácie nebude potrebné prebudovať celý systém, ale bude postačovať jeho dobudovanie a upgrade systému.
Pre kandidátske krajiny je užitočné v predstihu vytvoriť národné databázy na účely čl.95 – 100 Schengenského dohovoru, a tak môžu byť ľahko prepojené na integrovaný informačný systém (N.SIS) a po vstupe prepojené na C.SIS. Tiež je podstatné vopred naplánovať zriadenie úradu SIRENE, najmä z dôvodu prípravy pracovníkov pre spracovávanie dokumentov. 

Spoločné pozície EÚ definujú dva základné faktory vysokej úrovne kontrol na vonkajších hraniciach: 
1)	všetky osoby prekračujúce vonkajšie hranice sú kontrolované systematickým spôsobom, 
2)	ochrana vonkajšej hranice je zabezpečená účinnou hraničnou kontrolou. Neexistuje žiadny pevný zoznam definujúci praktické opatrenia týkajúce sa „vysokej úrovne kontroly na vonkajších hraniciach“, ktorý má byť dosiahnutý v čase vstupu do EÚ, každá osoba však musí byť po vstupe do EÚ skontrolovaná v Schengenskom informačnom systéme.
Je potrebné zdôrazniť, že súčasné schengenské štáty budú zodpovedné za kontrolu schengenských vonkajších hraníc až dovtedy, kým nebudú zrušené kontroly na vnútorných hraniciach voči novým členským štátom. Po vstupe občania nových členských štátov už nebudú považovaní za občanov tretích krajín, ktorí budú musieť splniť všetky podmienky vstupu. Pre občanov členských štátov EÚ predloženie cestovného dokladu je postačujúce.
Momentom zrušenia kontrol na vnútorných hraniciach s príslušnými novými členskými štátmi a momentom plného uplatňovania Schengenského acquis sa nové členské štáty stanú plne zodpovedné za ochranu vonkajšej schengenskej hranice bez výnimky, v súlade so Schengenským acquis, vrátane hraníc s tými členskými štátmi, s ktorými ešte kontroly na vnútorných hraniciach nebudú zrušené.

Pre tok doplňujúcich informácií na zabezpečenie ochrany vonkajšej hranice, ako aj informácií potrebných na vydávanie víz, povolení na pobyt a spracovávanie dokumentácie pre ostatné členské krajiny, je potrebné vytvoriť úrad SIRENE  ako jediný kontaktný bod pre styk s pracoviskami ostatných členských krajín. 

SIRENE (Suplementary Information Request at the National Entry) je tzv. “manažérsky tím” pre N.SIS. Je to subjekt na národnej úrovni, ktorý zabezpečuje výmenu všetkých doplňujúcich informácií, ktoré nemôžu byť zabezpečené Schengenským informačným systémom. Je jediným kontaktným bodom pre zabezpečenie toku informácií k úradom SIRENE členských krajín.

Odporúčanie:
Rátať s vytvorením pracoviska SIRENE už v prvej fáze vytvorenia N SIS, keďže v systéme je v súčasnej dobe vložených cca 12 000 hlásení a spisov v zmysle článku 95 Schengenského dohovoru, ktoré bude potrebné preštudovať z dôvodu možnej akceptácie v zmysle národného práva, k tomu je nutné zabezpečiť dostatočne odborne pripravený personál. 

Manuál SIRENE, ktorý presne špecifikuje všetky činnosti SIRENE, má dôverný charakter, a preto ho nie je možné v súčasnej dobe pre kandidátske krajiny získať pre potreby prípravy a zriadenia pracoviska SIRENE, úlohy a činnosti sú naplánované z výsledkov rokovaní s expertmi EÚ a na základe odporúčaní twinningových partnerov.

Vytvorenie N.SIS nie je len záležitosťou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako gestora úlohy, ale je nutná budúca spolupráca všetkých ministerstiev, ktoré plnia úlohy v oblasti verejnej bezpečnosti  a verejného poriadku na území Slovenskej republiky. 
V rámci kapitoly 24 spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútra na zabezpečenie splnenia úloh Schengenského acquis, boli v máji 2001  vytvorené aplikačné skupiny, kde úlohou je aj vytvorenie N.SIS. a pracoviska SIRENE. Úlohy v jednotlivých skupinách sú plnené v úzkej spolupráci všetkých zainteresovaných ministerstiev Slovenskej republiky.
Aplikačná skupina č.2 „N.SIS a úrad SIRENE“ úzko spolupracuje s budúcimi užívateľmi N.SIS v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, rovnako aj v rámci iných ministerstiev, kde úlohy sú plnené v úzkej spolupráci hlavne s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej republiky – Colným riaditeľstvom, Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky - Generálnym riaditeľstvom Železničnej polície. Vzhľadom na budúce vyťaženie informácií z N.SIS je potrebné budovať pracoviská na jednotlivých ministerstvách už v prvej  etape budovania N.SIS. Ministerstvo financií Slovenskej republiky – Colné riaditeľstvo bude mať kompletnú kópiu N.SIS prepojenú až po výkonové útvary na hraniciach, čím sa zdôvodňujú ich vyššie finančné náklady.
V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z článkov 95 a 98 Schengenského dohovoru, aplikačná skupina „N.SIS a úrad SIRENE“ v spolupráci s aplikačnou skupinou „Justičná spolupráca v trestných veciach“ v rámci projektu vykoná analýzu potreby napojenia Ministerstva spravodlivosti SR, súdov SR a Generálnej prokuratúry SR  na N.SIS. V tejto súvislosti bude tiež potrebné oboznámiť sa s praktickým postupom v týchto otázkach v členských štátoch EÚ.

2. Úlohy a zabezpečenie projektu:

I. etapa – od r. 2002 až do r. 2004 ( vstup do EÚ )

Na realizáciu prvej etapy boli v rámci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k vytvorenému pracovisku N.SIS k 1. 1. 2002 presystemizované a obsadené  dve  policajné  miesta  na spracovanie strategických materiálov budovania N.SIS, a následne aj vytvorenie základu budúceho technického pracoviska presystemizovaním ďalších dvoch policajných tabuľkových  miest. Pre N.SIS bol v roku 2002 spracovaný projekt PHARE. V projekte sú špecifikované požiadavky na splnenie úloh pre vstup do Schengenského priestoru, vrátane twinningových aktivít pre N.SIS a SIRENE. V projekte je navrhnuté aj technické vybavenie N.SIS a SIRENE. Realizácia projektu by sa mala začať v roku 2004.

Finančné náklady rezortu MV SR

Vybudovanie priestorov pracovísk N.SIS a SIRENE v zmysle odporúčaní:

1. Oblasť ochrany a zabezpečenia priestorov NSIS a SIRENE 
v zmysle odporúčaní

	8 ks    	Elektronické zariadenie pre riadenie vstupu  do priestoru N SIS a miestnosti
           pre servery “IDENTIS ID-1”						 300 000,- Sk
2 ks     Kamerový systém pre ochranu vstupu do priestoru N SIS a SIRENE 
	           4 kamery (á 15 000 Sk)                                                                       60 000,- Sk
		Monitor + softvér                                                                                50 000,- Sk
		Video (pomalobežné pre zálohu)                                                        40 000,- Sk
9 ks     Priestorové snímače miestností, SIRENE    		 (á 1000)              9 000,- Sk
	Ústredňa                                                                                              10 000,- Sk
								                         469 000,-Sk
T: 2003						   Z: Prezident PZ, R ÚIT MV SR

Protipožiarna ochrana 

	termodetektory, dymové detektory a s napojením  na centrálu ochrany objektov  		      150 000,- Sk
      	8 ks     	Protipožiarne dvere do miestností pre servery N.SIS a SIRENE, a pracovisko N.SIS (SIRENE) (á 15 000 Sk)	                                                     120 000,- Sk
	4 ks     Hasiace prístroje snehové 5 kg (á 3000 Sk)                                    12 000,- Sk
		                                                                                                                   282 000,- Sk

	T: 2004	                                                                        Z: Prezident PZ, R ÚIT MV SR

2. Oblasť stavebných úprav a dovybavenia pracovísk

Priestory N.SIS a SIRENE 

		      Zabezpečenie klimatizovaného prostredia s filtráciou vzduchu a kontrolou vlhkosti	      miestností pre N.SIS a SIRENE, (pre servery NSIS a SIRENE	 definované 
	      v projekte PHARE 2002)                                                                  400 000,-Sk
	
           	      Nehorľavá podlaha (Ker. dlažba) pre celý N.SIS a úrad SIRENE   300 000,- Sk
	      Fólie na okná proti priehľadnosti  	                                                      57 600,- Sk
	      Žalúzie na okná                                                                                   61 000,- Sk
	      Mreže na okná 1.p. 25 ks                                    (á 5000 Sk)            125 000,- Sk
		                          543 600,-Sk

	T: 2003 	                                                  Z: Prezident PZ, R VS MV SR, R ÚIT MV SR

3. Oblasť informatiky

Technické zabezpečenie

           V oblasti technického zabezpečenia je potrebné spracovať technický projekt pre systém N.SIS a SIRENE, ako aj bezpečnostný projekt pre tieto systémy. 

1 ks   SWITCH 3.500 v prevedení RACK 		              	  	300 000,- Sk
2 ks   UPS s komunikačným portom
   – zálohovací zdroj 30 KVA( N.SIS, SIRENE, )á 80 000 Sk	 	160 000,-Sk 
1 ks   faxmodem								  10 000,- Sk
						                                                470 000,-Sk

	T: 2003	                           Z: Prezident PZ, R ÚOUS MV SR, R ÚIT MV SR

Firewall pre šifrovú ochranu siete MV NET                                                   2 000 000,-Sk

T: 2004                                             Z: Prezident PZ, R ÚOUS MV SR, R ÚIT MV SR
Vybudovať vlastný záložný zdroj  elektrického napätia pre pracoviská N.SIS a SIRENE (agregát pre zabezpečenie nepretržitého chodu systému   pri dlhodobom výpadku el. prúdu. ( definované v projekte PHARE 2002)
	núdzové osvetlenie zo záložného zdroja                                             cca  1 500 000,-Sk
		               	
	T: 2004	                                                                           Z: Prezident PZ, R ÚIT MV SR

Vybudovať server pre kópiu N.SIS – ako zdroja údajov SIS pre políciu, 
1 ks server (RACK)		
Technika bez finančných nákladov zo štátneho rozpočtu, definovaná projektom PHARE 2002.
 
           T:  2004	                                                Z: Prezident PZ, GR VS MV SR, R ÚIT MV SR

Pre N.SIS

1 ks  Server pre N.SIS (prevedenie rack)				         1 500 000,- Sk
      1 ks  Scaner 						             	              20 000,- Sk
      3 ks  PC zostavy  á  80 000 Sk	                                                           240 000,- Sk
1 ks   Laserová tlačiareň k PC						  20 000,- Sk
1 ks   Hrebeňový viazač dokumentov, Rezačka  	                                           50 000,- Sk
	         Náklady na údržbu a prevádzku		                         	  50 000,- Sk
	                                                                                                                   1 880 000,- Sk	

T: 2003	                                                      Z: Prezident PZ, GR VS MV SR, R ÚIT MV SR

      Pre SIRENE

1 ks  Komunikačný server    			 	 á 700 000 Sk             700 000,- Sk
1 ks  Zálohovací server						            700 000,- Sk
5 ks  Pracovné stanice                                                 á   80 000 Sk	            400 000,- Sk
2 ks  Notebook s CD mechanikou + tlačiareň 	 á 150 000 Sk	            300 000,- Sk
3 ks  Laserová tlačiareň k PC				 á   20 000 Sk		  60 000,- Sk
	2 ks  Scaner (USB) pre el. spracovanie dokumentov   á 25 000 Sk		  50 000,- Sk
    20 ks  Zariadenie na čítanie čipových kariet  		     á 3 500 Sk                70 000,- Sk
1 ks  Tlačiareň laserová kolor A 3			                       		200 000.- Sk
	         Náklady na údržbu a prevádzku			                          50 000,- Sk
										         2 530 000,- Sk

	T: jún 2004	  	              Z: Prezident PZ, R ÚIT MV SR

Softvérové vybavenie

    20 ks.  Windows XP		      (á   6 900 Sk)                     		 138 000,-Sk
    20 ks    MS OFFICE XP (SVK), (á 13 540 Sk)        	                       	             270 800,-Sk
  Corel DRAW    (SK, alebo CZ)                                      		   12 970,-Sk
                       Adobe Acrobat   5.0 CZ                                       			   11 990,-Sk
                       Elektronický multijazykový prekladací slovník
                       ( GB,D,F)               (3800 + 3800 + 3800) x 7                                     79 800,-Sk
                       ( SP, I )            	         ( 950 + 950 )   x 2                                                 3 800,-Sk
						                                                            517 360,-Sk

	T: 2003	                                                Z: Prezident PZ, GR VS MV SR, R ÚIT MV SR

Vývoj softvéru pre N.SIS a SIRENE:

Vytvorenie softvéru pre N.SIS a SIRENE, predpokladané náklady sú vrátane softvérového vybavenia  - UNIX  server,  ORACLE, 2 x Windows XP server a pre mail server;

                                                                                                                      cca 30 000 000,-Sk
	    
             T: 2004       	                                                                 Z:  Prezident PZ, R ÚIT MV SR

4. Oblasť pracovných síl a mzdových prostriedkov

Doplniť pracovisko N.SIS presystemizovať  3 tabuľkové policajné miesta pre spracovávanie dokumentácie, noriem, technické budovanie systému N.SIS a SIRENE; (PT 8) z vlastných zdrojov MV SR
Zriaďovacie náklady na 1  policajta	     100 000,- Sk            celkom:    300 000,- Sk
	
	T: január 2003                                            	Z:  Prezident PZ, GR SPSČ MV SR

Zriadiť pracovisko SIRENE prisystemizovať 5 tabuľkových policajných miest ; (1 - PT 9, 4 - PT 8)
Zriaďovacie náklady na 1. policajta	     100 000,- Sk            celkom:    500 000,-Sk
	Mzdové náklady a odvody                    400 000,- Sk                          2 000 000,-Sk/rok	

T: september 2004                                                    Z: Prezident PZ, GR SPSČ MV SR

		Finančné náklady rezortu MV SR
Rok	Náklady	
2003	4 179 960,-Sk	
2004	38 812 000,-Sk	

Finančné náklady rezortu MF – CR  SR

	Ochrana budov a N.SIS v CR SR	                                                             5 000 000,- Sk	
      Server s operačným systémom pre prenos dát a spoj. linky s ochranou  3 090 000,- Sk
	Presystemizovanie 8 tabuľkových miest na CR SR  na spracovanie
      údajov v SIS a implementáciou dohody do Schengenského
      acquis                                                                                                       1 920 000,- Sk

		Finančné náklady rezortu MF- CR  SR
Rok	Náklady	
2003	10 010 000,-Sk	

II. etapa – od r. 2004 (do pripojenia na C.SIS)

1. Oblasť informatiky

Zabezpečiť vývoj softvéru pre N.SIS a SIRENE - II etapa, upgrade a dobudovanie systému	
                                                                                                                 50 000 000,- Sk	

	T:  2004 - 2005	                                                               Z: Prezident PZ, R ÚIT MV SR

Zabezpečiť komunikačné rozhranie medzi sieťou MVNET a sieťami mimorezortných užívateľov Schengenského informačného systému.  Na zabezpečenie bezpečného prepojenia rezortnej siete MVNET je potrebné vytvoriť komunikačné rozhranie, ktoré bude obsahovať prepojenie v jednom bode a bude sa skladať zo špeciálneho firewall s príslušným počtom interface a web servera pre pripojenie externých sietí. Prístupový web server bude umiestnený za firewall v MVNET;
	                                                  cca 5 000 000,-Sk	

	T: 2005	                                                                           Z: Prezident PZ, R ÚIT MV SR 

V oblasti SW zabezpečenia vytvoriť aplikačné programové vybavenie, ktoré zabezpečí  vzájomnú  komunikáciu prístupového servera a informačných systémov prevádzkovaných v rámci rezortu a  obojstrannú bezpečnú výmenu údajov v rozsahu, aká bude potrebná pre činnosť C.SIS;
	                                                 cca 10 000 000,-Sk
	
	T: 2004 - 2005                                                                Z: Prezident PZ, R ÚIT MV SR

Doplniť pracoviská N.SIS a SIRENE potrebnou technikou a softvérom pre spracovávanie dokumentov a komunikáciu so zahraničnými partnermi;
	Technika bez finančných nákladov zo štátneho rozpočtu, definovaná projektom PHARE 2002.

	T: 2005 	                                                                          Z: Prezident PZ, R ÚIT MV SR

Vybudovať školiace pracovisko pre N.SIS a SIRENE pre prípravu policajtov na spracovávanie údajov a informácií, zabezpečenie napojenia PC do siete v rámci SIS, na pracovisku ÚMPS; (PHARE)
	Technika bez finančných nákladov zo štátneho rozpočtu, definovaná projektom PHARE 2002.
	
T:  2005	                                               Z: Prezident PZ, GR VS MV SR, R ÚIT MV SR

2. oblasť školenia pracovníkov

Jazyková príprava pracovníkov N.SIS a SIRENE;
	                                                  cca 160 000,-Sk

	T: 2004 - 2005	                                                            Z: Prezident PZ

Odborné školenia pre pracovníkov SIRENE, (v zmysle manuálu SIRENE, obsluha softvéru, formuláre, spôsob komunikácie );
                                                                     		cca 50 000,-Sk

            T: 2004-2005	                                                                  Z: Prezident PZ, R ÚIT MV SR

		Finančné náklady rezortu MV SR
Rok	Náklady	
2004	60 210 000,- Sk	
2005	5 000 000,-Sk	

Finančné náklady rezortu MF - CR  SR

Vývoj aplikačného rozhrania na prezeranie a prehľadávanie v danej databáze
									      10 000 000,-Sk
Školenia pre colníkov 						           500 000,-Sk
	Prisystemizovať 8 tabuľkových miest na CR SR pre colníkov na spracovanie 
údajov v SIS a implementáciou dohody do Schengenského acquis         1 920 000,- Sk

Finančné náklady rezortu MF - CR  SR
Rok	Náklady	
2004	12 420 000,-Sk	

III. etapa – od r. 2005 (po pripojení na C.SIS)

1. Oblasť informatiky

Upgrade systému, zahájenie skúšobnej prevádzky systému N.SIS a SIRENE v úzkej spolupráci s odborom informatiky P PZ a  zainteresovanými ministerstvami;
		cca 3 000 000,-Sk

	T:  2005	 - 2006                                    Z: Prezident PZ, GR VS MV SR, R ÚIT MV SR

Dovybaviť pracoviská N.SIS a SIRENE potrebnou technikou pre spracovávanie dokumentov a komunikáciu so zahraničnými partnermi, podľa kritérií C.SIS II.
Technika bez finančných nákladov zo štátneho rozpočtu, definovaná projektom PHARE 2002.
	
	T:  2006 – pripojenie na C.SIS II        Z: Prezident PZ, GR VS MV SR, R ÚIT MV SR
		                                                                         
Vytvorenie programových aplikácií N.SIS a SIRENE;                            cca 2 000 000,-Sk
			
	T: 2005 - 2006 	                                                               Z: Prezident PZ, R ÚIT MV SR

Prenajať linku pre spojenie N.SIS – C.SIS (Strassbourg) v zmysle technickej normy pre SIS; (zatiaľ pre kandidátske krajiny linka neprístupná)
          cca 300 000,-Sk/rok

T: ku dňu vstupu do Schengenu	  Z: Prezident PZ, GR VS MV SR, R ÚIT MV SR

Vybudovať  on – line prepojenie záložného pracoviska N.SIS na N.SIS a C.SIS;
   cca 1 000 000,-Sk

       	T: ku dňu vstupu do Schengenu          Z: Prezident PZ, GR VS MV SR, R ÚIT MV SR

2. Oblasť ochrany a zabezpečenia priestorov NSIS a SIRENE 

Dobudovať zabezpečenie priestorov, pracovísk N.SIS a SIRENE podľa odporúčaní hodnotiacej misie SISTECH;

	T: 2005 – 2006	                                    Z: Prezident PZ, GR VS MV SR, R ÚIT MV SR

3. Oblasť stavebných úprav a dovybavenia pracovísk

Vybudovať záložné pracovisko N.SIS                                                      cca 4 000 000,-Sk

       	T: ku dňu vstupu do Schengenu          Z: Prezident PZ, GR VS MV SR, R ÚIT MV SR

4. Oblasť pracovných síl a mzdových prostriedkov
Personálne dobudovať pracovisko SIRENE, prisystemizovať 10 tabuľkových miest;  (1 – PT 9, 9 - PT 8)

Zriaďovacie náklady na 1 policajta	    100 000,- Sk             celkom:  1 000 000,- Sk
	Mzdové náklady a odvody                  400 000,- Sk                            4 000 000,-Sk/rok	

	T: jún 2005	                                                              Z: Prezident PZ, GR SPSČ MV SR

Doplniť pracovníkov pre prevádzku N.SIS a SIRENE, prisystemizovať dve tabuľkové policajné miesta pre N.SIS (PT 9,8), sedem tabuľkových miest  pre SIRENE (PT 8), na zabezpečenie nepretržitej prevádzky;		                                                           										   
Zriaďovacie náklady na 1 policajta	     100 000,- Sk             celkom:    900 000,-Sk
	Mzdové náklady a odvody                   400 000,- Sk                           3 600 000,-Sk/rok	

T:  2006 – ku dňu napojenia na C.SIS          		Z: Prezident PZ, GR SPSČ MV SR

Doplniť stavy N.SIS a SIRENE podľa odporúčaní hodnotiacej komisie EÚ;

	T: 2006                                                                      Z: Prezident PZ, GR SPSČ MV SR

5. oblasť školenia pracovníkov

Odborné a jazykové školenia pracovníkov N.SIS a SIRENE;
		cca 150 000,-Sk	

	T: 2005 – 2006	                                                          Z: Prezident PZ

		Finančné náklady rezortu MV SR
Rok	Náklady	
2005 - 2006	19 950 000,-Sk	

Finančné náklady rezortu MF - CR  SR
 
Školenia pre colníkov 						           500 000,-Sk
	Prisystemizovanie 8 tabuľkových miest na CR SR pre colníkov na spracovanie 
údajov v SIS a implementáciou dohody do Schengenského acquis         1 920 000,- Sk

		Finančné náklady rezortu MF- CR  SR
Rok	Náklady	
2005 - 2006	2 420 000,-Sk	

Rekapitulácia celkových nákladov v jednotlivých rokoch budovania N.SIS. a SIRENE podľa rezortov MV SR a  MF SR.
	
Finančné náklady rezortov MV SR a MF- CR SR

Rok	Náklady MV SR	Náklady MF- CR SR	
2003	4 179 960,-Sk	10 010 000,-Sk	
2004	101 122 000,-Sk	12 420 000,-Sk	
2005-2006	24 950 000,-Sk	 2 420 000,-Sk	
Celkom	131 451 960,- Sk	24 850 000,-Sk	

Prostriedky z programu PHARE bez finančných nákladov zo štátneho rozpočtu.

N.SIS zariadenia	Jednotková cena	Cena 	
Router – network connection, firewall (x2)	1.150 EURO	2.300 EURO	
Router – connection C.SIS, Ministry of Interior Net (x2)	920 EURO	1.840 EURO	
HAB (x2)	480 EURO	960 EURO	
UPS (x2)	480 EURO	960 EURO	
Modem (x2)	2.750 EURO	5.500 EURO	
Rack (x2)	570 EURO	1.140 EURO	
Rack Server (x2)	22.650 EURO	45.300 EURO	
Aggregate (x2)	1.800 EURO	3.600 EURO	
PCs (x10)	1.150 EURO	11.500 EURO	
Document printer (x2)	3.700 EURO	7.400 EURO	
Air-conditioning (x1)	4.500 EURO	4.500 EURO	
		85.000 EURO	
Vzdelávacie centrum pre národný Schengenský informačný systém			
PC sets (10pcs)	2.000 EURO	20.000 EURO	
Colour Printer  (1pcs)	700 EURO	700 EURO	
Digital video camera  (1pcs)	2.700 EURO	2.700 EURO	
Printers (6pcs)	500 EURO	3.000 EURO	
Copier (1pcs)	14.000 EURO	14.000 EURO	
Video-projector  (1pcs)	5.000 EURO	5.000 EURO	
Scanner (2pcs)	600 EURO	1.200 EURO	
Video + TV	1.000 EURO	1.000 EURO	
Software	8.400 EURO	8.400 EURO	
		56.000 EURO	

SIRENE zariadenia	Jednotková cena	Cena	
Work station/PC (x20)	2.000 EURO	40.000 EURO	
Mechanism for chip cards 	1.300 EURO	1.300 EURO	
Router – connection N.SIS, Ministry of Interior Net 	1.000 EURO	1.000 EURO	
Server	16.000 EURO	16.000 EURO	
Printer (x10)	500 EURO	5.000 EURO	
Colour Printer  (1pcs)	700 EURO	700 EURO	
Digital camera	1.000 EURO	1.000 EURO	
		65.000 EURO	

Vynaložené prostriedky z programu PHARE  206 000.- Euro = 8 600 000.- Sk

	Rezort Ministerstva vnútra SR nie je schopný v rámci príslušných rozpočtových kapitol zabezpečiť budovanie Schengenského informačného systému a úradu SIRENE, a preto je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na jednotlivé roky v plánovaných etapách zvýšením rozpočtu vo východiskách zostavenia návrhu štátneho rozpočtu od roku 2004 v rozpočtovej kapitole rezortu MV SR.