Príloha č. 1

Investičná príprava stavieb zaradených na financovanie prostredníctvom PPP projektov

D1 Dubná Skala – Turany (PPP) -16,45 km
Spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie. V rámci ZoD Dopravoprojekt, a.s., zabezpečuje inžiniersku činnosť, zabezpečenie stavebného povolenia. Žiadosť o stavebné povolenie podaná 10.7.2008. 

D1 Turany – Hubová (PPP) – 13,58 km
Vydané právoplatné územné rozhodnutie. Vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie. Žiadosť o stavebné povolenie podaná 10.7.2008. Vykonáva sa podrobný IGP, dodanie záverečnej správy je v septembri 2008.

D1 Hubová – Ivachnová (PPP) – 15,25 km
Vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie, zabezpečujú sa podklady potrebné k stavebnému konaniu. Súčasne prebieha vypracovanie dokumentácie pre ponuku. Žiadosť o stavebné povolenie podaná 10.7.2008.

D1 Jánovce – Jablonov (PPP) – 18,54 km
Vydané právoplatné územné rozhodnutie. Vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie. Žiadosť o stavebné povolenie podaná 10.7.2008.

D1 Fričovce – Svinia (PPP) – 11,22 km
Vydané právoplatné územné rozhodnutie. Vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie. Žiadosť o stavebné povolenie podaná 10.7.2008.

D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (PPP) -  11,32 km
Vydané právoplatné územné rozhodnutie. Po dopracovaní DSP z titulu požiadaviek HaZZ bola dňa 2.9.2008 podaná žiadosť o stavebné povolenie.
 
D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina (PPP) – 4,25 km 
Vydané právoplatné územné rozhodnutie. Žiadosť o stavebné povolenie podaná dňa 2.9.2008.

D1 Lietavská Lúčka – Višňové  (PPP) – 5,4 km
Vydané právoplatné územné rozhodnutie. Žiadosť o stavebné povolenie podaná dňa 2.9.2008.

D1 Višňové – Dubná skala (PPP) – 8,11 km 
Vydané právoplatné územné rozhodnutie. Žiadosť o stavebné povolenie podaná dňa 2.9.2008.

R1 Nitra, západ – Selenec (PPP) – 12,6 km 
Vydané právoplatné územné rozhodnutie. Dokumentácia na stavebné povolenie dodaná v júli 2008. V súčasnosti sa kompletizujú podklady k žiadostiam o vyňatie pozemkov z PPF a LPF, následne bude podaná žiadosť o stavebné povolenie. Stavebné povolenie podľa zmluvného termínu bude vydané do 31. 10. 2008.

R1 Selenec – Beladice (PPP) – 18,97 km
Vydané právoplatné územné rozhodnutie. Dokumentácia na stavebné povolenie dodaná v júli 2008. V súčasnosti sa kompletizujú podklady k žiadostiam o vyňatie pozemkov z PPF a LPF, následne bude podaná žiadosť o stavebné povolenie. Stavebné povolenie podľa zmluvného termínu bude vydané do 31. 10. 2008.

R1 Beladice – Tekovské Nemce (PPP) - 14,31 km
Vydané právoplatné územné rozhodnutie. Dokumentácia na stavebné povolenie dodaná v júli 2008. V súčasnosti sa kompletizujú podklady k žiadostiam o vyňatie pozemkov z PPF a LPF, následne bude podaná žiadosť o stavebné povolenie. Stavebné povolenie podľa zmluvného termínu bude vydané do 31. 10. 2008.

R1 Banská Bystrica – severný obchvat – 5,65 km 
Dokumentácia pre stavebné povolenie dodaná v decembri 2006 a dokumentácia na ponuku v júli 2007. Prebieha stavebné konanie.