Obstarávanie DHM a DNM v rokoch 2004 a 2005                                                                                                           Príloha č. 1a	
								(v tis. Sk)	
 	Ročný rozpis	Zúčtované	Uhradené	% zúčt.	Ročný rozpis	Zúčtované	Uhradené	% zúčt.	
 	2004	práce a dod. 	práce a dod. 	z roč.	2005	práce a dod. 	práce a dod. 	z roč.	
 	 	za rok 2004	za rok 2004	rozpisu	 	za rok 2005	za rok 2005	rozpisu	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
DHM – spolu	7 040 186	3 615 555	3 133 880	51,36	7 023 484	6 168 752	5 163 779	87,83	
v tom	 	 	 	 	 	 	 	 	
1) Prostriedky z rozpočtu EÚ	2 198 282	830 163	757 610	37,76	1 684 948	1 808 902	1 550 179	107,36	
z toho: kohézny fond	42 000	 0	0	0,00	 0	 0	0	0,00	
            Európsky fond reg. rozvoja	356 540	 0	0	0,00	143 790	201 048	143 790	139,82	
            ISPA	1 799 742	830 163	757 610	46,13	1 541 158	1 607 854	1 406 389	104,33	
2) Prostriedky zo ŠR - spolufinanc. VPS	2 347 082	590 411	541 772	25,16	1 453 432	1 884 613	1 431 877	129,67	
z toho: kohézny fond 	14 000	 0	0	0,00	0	 0	0	0,00	
           Európsky fond reg. rozvoja	173 991	 0	0	0,00	47 930	67 016	47 930	139,82	
           ISPA	2 159 091	590 411	541 772	27,35	1 405 502	1 817 597	1 383 947	129,32	
3) Investičná dotácia zo ŠR	976 709	982 953	972 883	100,64	0	0	0	0,00	
4) Úver CITIBANK	0	0	0	 	1 500 000	655 597	606 446	43,71	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5) Bombardier - ost. cudzie zdroje	134 605	15 618	40 421	0,00	78 000	0	0	0,00	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
6) Vlastné zdroje spolu	1 383 508	1 196 178	821 194	86,46	2 307 104	1 818 399	1 575 277	78,82	
z toho:               - hospodársky spôsob	191 025	126 595	126 595	66,27	300 000	229 527	229 527	76,51	
                           - dodávateľský spôsob	1 192 483	1 069 583	694 599	89,69	2 007 104	1 588 872	1 345 750	79,16	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
7) Sponzorské dary	 0	232	0	0,00	 0	1 241	0	0,00	
DNM - s p o l u 	19 088	13 826	12 212	72,43	53 640	42 880	27 161	79,94	
v tom -vlastné zdroje 	19 088	13 826	12 212	72,43	53 640	42 880	27 161	79,94	
            	 	 	 	 	 	 	 	 	
Celkom DHM a DNM  ŽSR 	7 059 274	3 629 381	3 146 092	51,41	7 077 124	6 211 632	5 190 940	87,77	

Špecifikácia priebehu obstarávania DHM A DNM v roku 2005:

Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu na rok 2005 boli ŽSR oznámené listom MDPT SR č. 60 - 250/2005 zo 17. 1. 2005, na základe schváleného vládneho zákona č. 740/2004 o štátnom rozpočte na rok 2005. Na podporu modernizácie železničných dopravných ciest v roku 2005 sú využívané v plnej miere výhradne prostriedky zo Štrukturálnych fondov (ŠF), Kohézneho fondu (KF) a z predvstupových fondov, čo vrátane ich spolufinancovania zo ŠR predstavuje objem  5 547,6 tis. Sk. Prostriedky zo štátneho rozpočtu - na investičné akcie  v roku 2005 neboli pridelené. 
	Listom č. 2060-2700/2005 z 29. 12. 2005  MDPT SR  ŽSR oznámilo „Rozpočtové opatrenie MF SR č. 42, ktorým boli upravené - znížené záväzné ukazovatele roku 2005 v objeme  2 379 136 471,08 Sk. Išlo o zníženie prostriedkov z rozpočtu EÚ v objeme 1 887 917 471,08 Sk a prostriedkov na spolufinancovanie v objeme 491 219 000,- Sk. Tým sa objem cudzích zdrojov ŽSR znížil na objem 4 716 379 371,92 Sk. Zníženie objemu 1 887 917 471,08 Sk bolo u KF o 1 184 390 000,- Sk, u ŠF o 703 527 471,08 Sk a spolufinancovanie bolo znížené v objeme 491 210 000,- Sk u KF o 208 780 000,- Sk a ŠF o 282 439 000,- Sk. Zvýšenie bolo na stavbe zo ŠF Zvolen – B. Bystrica z prostriedkov spolufinancovania v objeme 47 929 843 Sk úhrada z prostriedkov rozpočtu Platobnej jednotky bolo potvrdené listom MDPT SR č. 41-2700/2005 z 12. 1. 2006.

Zoznam investičných akcií financovaných z cudzích zdrojov /KF, ŠF a ISPA/ 
v roku 2005
										                   v tis. Sk

											Plnenie na
					      zač. roku 2005          koniec roku 2005	stavbách        
      v objeme                                             5 469 586            3 138 380

Projekt KF					 1 393 170	            0	          	           0
z toho:   prostriedky ES		     	   1 184 390	             0			0             
              spolufinancovanie zo ŠR	                   208 780 		 0			0
v tom:
1/  Trnava - N. Mesto n./V., modernizácia trate
      – úsek Piešťany - N. Mesto n./V
Projekt ERDF			             1 129 756                191 720 
z toho: prostriedky ES                                            847 317                   143 790                   143 790
            spolufinancovanie zo ŠR                             282 439                    47 930		      47 930
	
 v tom:
1/ Zvolen –Banská Bystrica, vr. PEÚ
    a zabezpečovacie zariadenia             
    z toho: prostriedky ES            		     494 851		143 790                  143 790
                spolufinancovanie zo ŠR                           164 950                      47 930                    47 930

2/ Železničná stanica Prešov –peronizácia     
    z toho: prostriedky ES                                         352 466                           0
               spolufinancovanie zo ŠR                          117 489                           0 
Projekty  ISPA                                             2 946 660                   2 946 660  
z toho:  prostriedky ES		              1 541 158                     1 541 158           1 406 389
               spolufinancovanie zo ŠR		 1 405 502  	             1 405 502           1 383 947
v tom: 
1/ Modernizácia trate Rača - Trnava
    -úsek Rača – Šenkvice                                         258 536                        258 536 
    z toho: prostriedky z rozpočtu EÚ (ISPA)           194 146                          194 146             114 382 
               spolufinancovanie kapitola VPS                64 390                           64 390               95 971

2/ Modernizácia trate Šenkvice - Cífer
   a železničných staníc Rača - Trnava		  1 369 756                     1 369 756 

   z toho: prostriedky z rozpočtu EÚ (ISPA)              684 878	                684 878              533 422
               spolufinancovanie kapitola VPS                684 878                        684 878              533 422
3/ Modernizácia trate Trnava - N. Mesto n. V.
    úsek Trnava – Piešťany                                     1 309 268                      1 309 268      
   z toho: prostriedky z rozpočtu EÚ (ISPA)             654 634                        654 634              747 136 
               spolufinancovanie kapitola VPS                654 634                        654 634              750 767

4/ Technická pomoc pre dopravné projekty
     prostriedky z rozpočtu EÚ (ISPA)                           2 700                            2 700                  5 119
                                                              VPS                                                                                 1 706
5/ Odborná pomoc pre prípravu dopravných projektov
 - železničné projekty    		 	         6 400                            6 400 
      z toho: prostriedky z rozpočtu EÚ (ISPA)              4 800                            4 800                 6 330
                     spolufinancovanie kapitola VPS              1 600                            1 600                 2 081

Poznámka: Prijaté prostriedky z ISPA a z VPS k ISPA sú z EUR prepočítané kurzom 1EUR = 38 SKK Skutočné čerpanie z ISPA a VPS k ISPA je prepočítané kurzom ku dňu úhrady jednotlivých faktúr.

DHM z programu ISPA bol za rok 2005 uhradený vo výške 1 406 389 tis. Sk, čo je oproti plánu 1 541 158 tis. Sk plnenie na 91,26 % a príspevok ISPA kofinancovaný zo štátneho rozpočtu bol uhradený vo výške 1 383 947 tis. Sk, čo oproti plánu   1 405 502 tis. Sk predstavuje plnenie na 98,47 %.

DHM z prostriedkov európskeho fondu regionálneho rozvoja bol za obdobie1.-12. 2005 uhradený vo výške 143 790 tis. Sk, čo je oproti plánu 143 790 tis. Sk plnenie na 100,0 % a príspevok európskeho fondu regionálneho rozvoja kofinancovaný zo štátneho rozpočtu bol uhradený vo výške 47 930 tis. Sk, čo oproti plánu 47 930 tis. Sk predstavuje plnenie na 100,0 %. 
Pri čerpaní prostriedkov z ISPA, Kohézneho fondu, Štrukturálnych fondov ŽSR vykonáva:
•	monitorovanie projektov ISPA, KF a ŠF,
•	zhromažďuje spoľahlivé finančné a štatistické informácie o vykonaní pomoci pre potreby monitorovania a hodnotenia,
•	zabezpečuje pravidelné zálohovanie všetkých údajov,
•	zabezpečuje analýzu  výnosov a nákladov, 
•	informuje verejnosť o projektoch spolufinancovaných z prostriedkoch ISPA, KF,ŠF,
•	vykonáva publicitu projektov,
•	vypracovanie Manuálu vnútorných postupov ISPA, KF a ŠF, ktorého účelom, je zosumarizovanie všetkých pracovných postupov, vnútorných nariadení, formulárov, dohôd a všetkých potrebných dokumentov potrebných pri čerpaní prostriedkov z EÚ, ktorými sa riadi Implemtačná agentúra s ostatnými príslušnými stranami. Manuál vnútorných postupov ďalej zabezpečuje, aby implementácia bola vykonávaná podľa dohodnutých princípov a stanovených metód v rámci príslušnej európskej a národnej legislatívy.

Dňa 21. 5. 2005 schválila Správna rada ŽSR uznesením č. 43/2005 zoznam stavieb do rozpisu DHM a DNM na rok 2005 určených na financovanie z úveru vo výške 1,5 mld. Sk. Zmluva o úvere medzi ŽSR a bankovými spoločnosťami bola uzatvorená dňa 8. 6. 2005. Schválením tohto úveru sa zvýšil objem cudzích zdrojov pre rok 2005 na 7 047 586 tis. Sk.

Plnenie na stavbách financovaných z úveru od konzorcia bánk  SR 43/2005 vo výške 1 bolo vo výške 606 446 tis. Sk, čo je oproti plánu plnenie 40,4 %. Plnenie na jednotlivých stavbách je uvedené v tabuľkovej časti.

 	STAVBY HRADENÉ Z ÚVERU  	Ročný rozpis	Uhradené	% uhradených	
Čísla	(v tis. Sk)	úveru I	práce a dod. 	prác a dod.	
Stavieb	 	na r. 2005	za rok 2005	k roč. rozp.	

 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
AA41471	Bratislava - Rača - Trnava, mod. trate na v=160 km	 634 000	286 779	45,23	
AA41757	Trnava - Nové M. n/Váhom, mod. trate na v=160 km	 392 000	118 494	30,23	
AA41688	N. Mesto n.Váh.- Púchov, moderniz. tr. v=160 km	 150 000	106 132	70,75	
AA01105	Žilina - Krásno n./Kysucou, modern. trate	 125 000	42 756	34,20	
AA04001	Púchov - Žilina, modernizácia trate	 45 000	1 143	2,54	
AA04002	Zvolen - Fiľakovo, elektrifikácia trate	25 000	0	0,00	
AA04004	Žilina - Teplička, dostavba zriaď. stanice	47 000	20 511	43,64	
AA04003	Zvolen - B. Bystrica, elektrifikácia trate	68 000	20 238	29,76	
AA03126M	Prešov žst., výstavba nástupíšť	11 000	7 182	65,29	
AA03042	Poprad žst., výstavba nástupíšť	3 000	3 211	107,03	
 	 	 	 	 	
 	 SPOLU  ZA  ŽSR	1 500 000	 606 446	40,43	

	Prehľad investícii z vlastných zdrojov je uvedený v materiáli v časti 2.1.bod 2 a plán investícií podľa jednotlivých druhov financovania je v časti 3.1.2. materiálu.