K o m u n i k é

	Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa...................................prerokovala a schválila návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov  stavby „Rekonštrukcia objektu LUNA pre Slovenskú poľnohospodársku knižnicu“ Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zo 74,999 mil. Sk na 162,342 mil. Sk, z toho stavebné práce 142,8 mil. Sk a jej zaradenie medzi stavby financované v roku 2002 z individuálnych výdavkov.