Príloha č. 4

Predpokladané celkové náklady na útlmové a likvidačné práce 
na Bani Dolina a.s. Veľký Krtíš

     Predpoklad celkových nákladov, pre prehľadnosť uvedený v tabuľkovej forme, vychádza z materiálov a.s. Baňa Dolina Veľký Krtíš :

-    „Návrh koncepcie útlmu banskej činnosti na Bani Dolina, a.s. Veľký Krtíš“;
-	vnútropodnikovej štatistiky sledovania nákladov na zabezpečenie banských diel a likvidácie banských diel v roku 2000  (júl až december 2000);
-	a zo súčasných známych skutočností vedenia Bane Dolina, a.s.

a ďalej z platných právnych predpisov, najmä :

-	zákona č. 44/1988 o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č.       498/1991 Zb.  
-	zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon),
-	zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ,
-	vyhlášky SBÚ č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch v znení vyhlášky SBÚ č. 533/1991 Zb.,
-	vyhlášky SBÚ č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom v znení vyhlášky SBÚ č 16/1992 Zb., 
-	vyhlášky SGÚ č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob v znení vyhlášky SGÚ č. 4/1992 Zb.,
-	zákona č. 160/1989 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom,
-	 vyhlášky FMPSV č. 19/1991 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve, dlhodobo nespôsobilých k výkonu doterajšej práce,
-	zákona č. 65/1965 Zb. (zákonníka práce) v znení neskorších predpisov a
-	kolektívnej zmluvy a.s. Baňa Dolina.

Postupné kroky útlmu banskej činnosti a likvidácie hnedouhoľnej bane
v a.s. Baňa Dolina Veľký Krtíš v období rokov 2001 – 2004

Rok	2001	2002	2003	2004	
Ťažba v tis. ton	320	270	170	Max. 100	
Prípravné a vrtné práce	1 650 b.m.	1 200 b.m.	-	-	

Vysporiadanie zásob	-	Odpis zásob 3., 5.pole – I.časť, 8.pole - Západ	8. pole – zásoby viazané v ohradníkoch chodieb č. 08 101,08 201,
08 102, 08 202	5. pole – II. časť,
9. a 10. pole	

Zabezpečenie, likvidácia	8. pole – Východ + 15 vrtov z povrchu	3.pole + 25 vrtov z povrchu	8. pole – ch.č. 08 101,
08 201, 08 102, 08 202
+ 25 vrtov z povrchu	5., 9. pole + 25 vrtov z povrchu + vrtaná jama
VJ-1 (Strháre)	
Sanácia povrchu	Úpadnica Slatinka	Rozvod VN-I.etapa.,
ventilátorovne Strháre a Bukovec,
Trafostanice a vedenia, rekultivácie Strháre a Bukovec	Rozvod VN- II.etapa
Likvidácia nepotrebných vrtov v areáli Selce	Rozvod VN-III. etapa,
začiatok rekult. haldy,
začiatok likvidácie budov v areáli B.D., ktoré sa nedajú využiť na inú činnosť	
Ekologický monitoring	V zmysle schváleného POPD
	Vrtanie 2 pozorovacích vrtov	Vypracovanie štúdie vplyvu vytápania podzemia B.D. na vodný zdroj Žihlava a celý D.P. Modrý Kameň	Podľa záverov štúdie	
Admistratívne úkony	PLZ
8. pole – Východ	PLZ
3. pole,	PLZ
8. pole : 08 101, 08 201,
08 102, 08 202	PLZ
5., 10. Pole

PLZ :	 Plán likvidácie a zabezpečenia v zmysle vyhl. SBÚ č. 89/1988 Zb., vypracovaný organizáciou a schvaľovaný príslušným OBÚ
Odpis zásob : v zmysle vyhl. SGÚ č. 97/1988 Zb., vypracovaný organizáciou a schvaľovaný MŽP SR
Sanácia povrchu : podľa konkrétnej situácie v zmysle banských a stavebných predpisov
POPD : Plán otvárky, prípravy a dobývania v zmysle vyhl. 89/1988 Zb., vypracovaný organizáciou a schvaľovaný príslušným OBÚ

Predpokladané náklady na prípravu útlmu v a.s. Baňa Dolina

Rok 2001  :  51, 2 mil. Sk soc.ťažba  + 4,030 mil. Sk náklady na útlm

Soc. ťažba   :   - razenie prípravných prác cca 1650 b.m. x 15 000,- Sk = 24,75 mil. Sk
                         - zabezpečenie banských diel (vých. časť 8.poľa + 3. pole)   

útlm    :          - náklady na verejnú súťaž pre domáceho projektanta regionálnych dopadov +         spolupráca s fondmi PHARE a ISPA
                        - sociálne náklady ( odstupné,..)

rok 2002   :        71,0 mil. Sk  (predbežný projekt)

rok 2003   :           pre zostávajúcich cca 200 zamestnancov pokrytie soc. nárokov (cca 35,0 mil.Sk
-	práce v podzemí a na povrchu cca 10,0 mil. Sk
-	+ projekt  regionálnych dopadov
-	výnos z cca 250 kt ťažby

rok 2004  : pre zostávajúcich zamestnancov pokrytie soc. nárokov (cca 33,5 mil.Sk
                             -    práce v podzemí a na povrchu cca 20,0 mil. Sk
-	+ projekt  regionálnych dopadov
-	výnos z dobehu ťažby nainštalovaných stien v 1. Q.

rok 2005 :         ťažba  0
-	zamestnávanie cca 100 – 150 pracovníkov, mzdové náklady cca 19,9- 37,3 mil. Sk, t.j. celkom 33,2 – 62,2 mil. Sk

Po roku 2005 bude potrebné zamestnávať 25 – 50 zamestnancov , z toho cca 25 robotníkov na 10 – 15 rokov a 10-25 THP približne na 10 rokov (možno prostredníctvom nástupníckej organizácie alebo RB, š.p. Banská Bystrica)

											Tabuľka č.3	

	Súhrnný predpoklad celkových nákladov na útlm a likvidáciu Bane Dolina 		
			v dobývacom priestore "MODRÝ KAMEŇ"				

													
Ukazovateľ/rok 	MJ	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	SPOLU	
Ťažba (ročná)	kt	320	270	170	100	0	0	0	0	0	0	540	
Priemerný počet 	Počet	680	500	330	200	100	50	50	40	30	0	-	
zamestnancov	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hospodársky výsledok	mil.Sk	-51	-70	-70	-69	-58	-37	-24	-19	-15	0	-362	
z komerčnej činnosti	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ročné BM	bm	1650	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	
Náklady na 1 BM	Sk/bm	15000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Celkové náklady na BM	mil.Sk	24,8	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Náklady na likvidáciu	mil.Sk	21	24,2	34,2	35,5	32,9	17,2	17	14	10	0	185	
banských diel na povrchu	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sociálne náklady	mil.Sk	5,2	28,8	35,8	33,5	25,1	19,8	7	5	5	2,6	162,6	
Celkové náklady na útlm	mil.Sk	51	53	70	69	58	37	24	19	15	2,6	347,6	
Hospodársky výsledok	mil.Sk	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	2,6	-14,4	
vrátane dotácie na útlm	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Stĺpec "SPOLU" zahrňuje údaje od roku 2002 po rok 2010, t.j. po dobu útlmu a likvidácie Bane Dolina.		

Komentár k tabuľke č. 3

-	v roku 2001 bude ukončená „sociálna ťažba“, schválená uznesením vlády SR č. 880/1997 do roku 2002;
-	od roku 2002 by mal prebiehať vládou SR schválený útlm banskej činnosti v a.s. Baňa Dolina;
-	v rokoch 2002 a 2004 budú postupne ukončované ťažobné práce;
-	v rokoch 2005 a 2006 budú prebiehať zabezpečovacie a likvidačné práce v podzemí aj na povrchu,
-	v roku 2007 budú ukončené práce v podzemí, dobývací priestor „MODRÝ KAMEŇ“ bude zrušený, zostane len chránené ložiskové územie (CHLÚ);
-	v roku 2010 budú ukončené všetky práce na povrchu v CHLÚ;
-	po roku 2010 bude prebiehať  monitoring životného prostredia (banské vody), banské škody, ktoré sa môžu dodatočne prejaviť, budú riešené podľa Banského zákona č. 44/1988 Zb., § 36, § 37 a vyplácanie špecifických sociálnych dávok, napr. deputátneho uhlia dôchodcov, osobitného príspevku, bude ukončené, až posledná oprávnená osoba na nich stratí nárok. Náklady do r. 2010  sú v tabuľke začlenené, po r. 2010 vzniknuté náklady budú riešené v štátnom rozpočte pre príslušný rok.

Celkové predpokladané náklady potrebné na útlm a likvidáciu Bane Dolina sú vo výške cca 347,6 mil. Sk.

     Takto koncipovaný útlm v sebe zahŕňa  racionálne vydobytie už otvorených zásob ložiska hnedého uhlia v DP Modrý Kameň a citlivý prístup k zamestnanosti v regióne. Veľká časť likvidačných prác hlavne v podzemí prebehne súčasne s doťažením sprístupnených uhoľných zásob. Náklady sú rozložené do deviatich rokov a ukončenie dobývacieho procesu je založené na princípe zachovania „ zelenej lúky“. CHLÚ by malo zostať vyhlásené  minimálne do obdobia úplného doznenia banskej činnosti na povrchu.