NÁVRH
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 
z 

k „Aktualizácii nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“

Číslo materiálu: |
Predkladateľ: | minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Vláda
A. schvaľuje
A.1  aktualizáciu nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest

B. berie na vedomie

    B.1  návrh výdavkov  na financovanie aktualizovaného nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v období rokov 2004-2006,  bez zdrojov z fondov EÚ nasledovne:

            v roku 2004.....................   8,500 mld. Sk
                        2005.................... 10,928 mld. Sk 
                        2006...................  11,530 mld. Sk.

    B.2 harmonogram začatia a odovzdania stavieb do užívania, uvedených v prílohe tohto uznesenia.

C. ukladá

    ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií 
      
    C.1 predložiť na rokovanie vlády správu o plnení aktualizovaného nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest
            do 30.júna 2004

Vykoná
          minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

    Príloha k uzn.vlády č. ........
Harmonogram začatia a odovzdania stavieb do užívania
v období  2003-2006

V roku 2003

Začatie výstavby

Názov stavby

Dĺžka úseku (km)

Odovzdanie do užívania

Názov stavby

Dĺžka úseku (km)

D1 Bratislava Viedenská cesta - Prístavný most | 3,9 | D1 Behárovce – Branisko | 7,8
D1 Svinia – Prešov západ | 7,9 | D1 Fričovce , obchvat | 3,2
D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty | 3,0 | R1 Hronský Beňadik – Nová Baňa | 4,3
R1 Rudno – Žarnovica | 5,2 | R1 Nová Baňa – obchvat | 5,0
R3 Oravský Podzámok – obchvat | 6,4 | R1 Nová Baňa – Rudno | 3,2
Spolu | diaľnice | 14,8 | Spolu | diaľnice | 3,2
| rýchlostné cesty dvojprúdové v trase diaľnice | | | rýchlostné cesty dvojprúdové v trase diaľnice | 7,8
| rýchlostné cesty štvorpruhové | 5,2 | | rýchlostné cesty štvorpruhové | 12,5
| rýchlostné cesty dvojpruhové | 6,4 | | rýchlostné cesty dvojpruhové |
| privádzače | | | privádzače |

V roku 2004 

Začatie výstavby 

Názov stavby

Dĺžka úseku (km)

Odovzdanie do užívania

Názov stavby

Dĺžka úseku (km)

D1 Mengusovce – Jánovce | 26,3 | D3 Čadca – obchvat | 6,2
D1 Sverepec – Považská Bystrica | 0,5 | R1 Budča - Kováčová | 2,9
Privádzač  Poprad – Kežmarok | 6,1 | |
D1 Jablonov – Behárovce, úsek Studenec - Behárovce | 3,6 | |
R2 Ožďany – obchvat | 6,1 | |
Spolu | diaľnice | 32,0 | Spolu | diaľnice |
| rýchlostné cesty dvojprúdové v trase diaľnice | 11,9 | | rýchlostné cesty dvojprúdové v trase diaľnice | 6,2
| rýchlostné cesty štvorpruhové | | | rýchlostné cesty štvorpruhové | 2,9
| rýchlostné cesty dvojpruhové | 6,1 | | rýchlostné cesty dvojpruhové |
| privádzače | 6,1 | | privádzače |

V roku 2005

Začatie výstavby 

Názov stavby

Dĺžka úseku (km)

Odovzdanie do užívania

 Názov stavby

Dĺžka úseku (km)

D1 Považská Bystrica – Vrtižer | 9,3 | D1 Bratislava Viedenská cesta – Prístavný most | 3,9
D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie | 13,5 | R1 Rudno – Žarnovica | 5,2
D1 Hričovské Podhradie – Žilina - Strážov | 6,9 | Košice, Prešovská – Sečovská, II. etapa | 2,8
D1 Višňové - Dubná Skala | 8,1 | |
D3 Svrčinovec - Skalité | 11,4 | |
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, | 17,8 | |
R4 Svidník – preložka | 4,9 | |
Košice, Prešovská – Sečovská, III. et. | 2,3 | |
D2 Križovatka Stupava juh | | |
Spolu | diaľnice | 29,7 | Spolu | diaľnice | 3,9
| rýchlostné cesty dvojprúdové v trase diaľnice | 19,5 | | rýchlostné cesty dvojprúdové v trase diaľnice |
| rýchlostné cesty štvorpruhové | 17,8 | | rýchlostné cesty štvorpruhové | 5,2
| rýchlostné cesty dvojpruhové | 4,9 | | rýchlostné cesty dvojpruhové |
| privádzače | 2,3 | | privádzače | 2,8

V roku 2006

Začatie výstavby 

Názov stavby

Dĺžka úseku (km)

Odovzdanie do užívania

Názov stavby

Dĺžka úseku (km)

D1 Dubná Skala - Turany | 16,2 | D1 Svinia – Prešov západ | 7,9
Privádzač Žilina, Strážov | 2,6 | D2 Križovatka Stupava juh |
| | D1 Ladce – Sverepec | 9,9
| | D1 Sverepec – Považská Bystrica | 0,5
| | D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty | 3,0
| | R2 Tornaľa – obchvat | 11,2
| | D1 Jablonov – Behárovce, úsek Studenec - Behárovce | 3,6
Spolu | diaľnice | 16,2 | Spolu | diaľnice | 21,3
| rýchlostné cesty dvojprúdové v trase diaľnice | | | rýchlostné cesty dvojprúdové v trase diaľnice | 3,6
| rýchlostné cesty štvorpruhové | | | rýchlostné cesty štvorpruhové |
| rýchlostné cesty dvojpruhové | | | rýchlostné cesty dvojpruhové | 11,2
| privádzače | 2,6 | | privádzače |