Príloha č. 4

Predpokladané celkové náklady na útlmové a likvidačné práce 
na Bani Dolina a.s. Veľký Krtíš

     Predpoklad celkových nákladov, pre prehľadnosť uvedený v tabuľkovej forme, vychádza z materiálov a.s. Baňa Dolina Veľký Krtíš :

-    „Návrh koncepcie útlmu banskej činnosti na Bani Dolina, a.s. Veľký Krtíš“;
-	vnútropodnikovej štatistiky sledovania nákladov na zabezpečenie banských diel a likvidácie banských diel v roku 2000  (júl až december 2000);
-	a zo súčasných známych skutočností vedenia Bane Dolina, a.s.

a ďalej z platných právnych predpisov, najmä :

-	zákona č. 44/1988 o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č.       498/1991 Zb.  
-	zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon),
-	zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ,
-	vyhlášky SBÚ č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch v znení vyhlášky SBÚ č. 533/1991 Zb.,
-	vyhlášky SBÚ č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom v znení vyhlášky SBÚ č 16/1992 Zb., 
-	vyhlášky SGÚ č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob v znení vyhlášky SGÚ č. 4/1992 Zb.,
-	zákona č. 160/1989 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom,
-	 vyhlášky FMPSV č. 19/1991 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve, dlhodobo nespôsobilých k výkonu doterajšej práce,
-	zákona č. 65/1965 Zb. (zákonníka práce) v znení neskorších predpisov a
-	kolektívnej zmluvy a.s. Baňa Dolina.

Predpokladané náklady na prípravu útlmu v a.s. Baňa Dolina

Rok 2001  :  51, 2 mil. Sk soc.ťažba  + 4,030 mil. Sk náklady na útlm

Soc. ťažba   :   - razenie prípravných prác cca 1650 b.m. x 15 000,- Sk = 24,75 mil. Sk
                         - zabezpečenie banských diel (vých. časť 8.poľa + 3. pole)   

útlm    :          - náklady na verejnú súťaž pre domáceho projektanta regionálnych dopadov +         spolupráca s fondmi PHARE a ISPA
                        - sociálne náklady ( odstupné,..)

rok 2002   :        71,0 mil. Sk  (predbežný projekt)

rok 2003   :           pre zostávajúcich cca 200 zamestnancov pokrytie soc. nárokov (cca 35,0 mil.Sk
-	práce v podzemí a na povrchu cca 10,0 mil. Sk
-	+ projekt  regionálnych dopadov
-	výnos z cca 250 kt ťažby

rok 2004  : pre zostávajúcich zamestnancov pokrytie soc. nárokov (cca 33,5 mil.Sk
                             -    práce v podzemí a na povrchu cca 20,0 mil. Sk
-	+ projekt  regionálnych dopadov
-	výnos z dobehu ťažby nainštalovaných stien v 1. Q.

rok 2005 :         ťažba  0
-	zamestnávanie cca 100 – 150 pracovníkov, mzdové náklady cca 19,9- 37,3 mil. Sk, t.j. celkom 33,2 – 62,2 mil. Sk

Po roku 2005 bude potrebné zamestnávať 25 – 50 zamestnancov , z toho cca 25 robotníkov na 10 – 15 rokov a 10-25 THP približne na 10 rokov (možno prostredníctvom nástupníckej organizácie alebo RB, š.p. Banská Bystrica)

         

Súhrnný predpoklad celkových nákladov na útlm a likvidáciu Bane Dolina 
                           v dobývacom priestore "MODRÝ KAMEŇ"

Ukazovateľ/rok | MJ | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | SPOLU
Ťažba (ročná) | kt | 320 | 270 | 170 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
Priemerný počet | Počet | 680 | 500 | 330 | 200 | 100 | 50 | 50 | 40 | 30 | 0 | -
zamestnancov | | | | | | | | | | | |
Hospodársky výsledok | mil.Sk | -51 | -70 | -70 | -69 | -58 | -37 | -24 | -19 | -15 | 0 | -362
z komerčnej činnosti | | | | | | | | | | | |
Ročné BM | bm | 1650 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
Náklady na 1 BM | Sk/bm | 15000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Celkové náklady na BM | mil.Sk | 24,8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Náklady na likvidáciu | mil.Sk | 21 | 24,2 | 34,2 | 35,5 | 32,9 | 17,2 | 17 | 14 | 10 | 0 | 185
banských diel na povrchu | | | | | | | | | | | |
Sociálne náklady | mil.Sk | 5,2 | 28,8 | 35,8 | 33,5 | 25,1 | 19,8 | 7 | 5 | 5 | 2,6 | 162,6
Celkové náklady na útlm | mil.Sk | 51 | 53 | 70 | 69 | 58 | 37 | 24 | 19 | 15 | 2,6 | 347,6
Hospodársky výsledok | mil.Sk | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | -14,4
vrátane dotácie na útlm | | | | | | | | | | | |
Komentár k tabuľke č. 3

-	v roku 2001 bude ukončená „sociálna ťažba“, schválená uznesením vlády SR č. 880/1997 do roku 2002;
-	od roku 2002 by mal prebiehať vládou SR schválený útlm banskej činnosti v a.s. Baňa Dolina;
-	v rokoch 2002 a 2004 budú postupne ukončované ťažobné práce;
-	v rokoch 2005 a 2006 budú prebiehať zabezpečovacie a likvidačné práce v podzemí aj na povrchu,
-	v roku 2007 budú ukončené práce v podzemí, dobývací priestor „MODRÝ KAMEŇ“ bude zrušený, zostane len chránené ložiskové územie (CHLÚ);
-	v roku 2010 budú ukončené všetky práce na povrchu v CHLÚ;
-	po roku 2010 bude prebiehať  monitoring životného prostredia (banské vody), banské škody, ktoré sa môžu dodatočne prejaviť, budú riešené podľa Banského zákona č. 44/1988 Zb., § 36, § 37 a vyplácanie špecifických sociálnych dávok, napr. deputátneho uhlia dôchodcov, osobitného príspevku, bude ukončené, až posledná oprávnená osoba na nich stratí nárok. Náklady do r. 2010  sú v tabuľke začlenené, po r. 2010 vzniknuté náklady budú riešené v štátnom rozpočte pre príslušný rok.

Celkové predpokladané náklady potrebné na útlm a likvidáciu Bane Dolina sú vo výške cca 347,6 mil. Sk.

     Takto koncipovaný útlm v sebe zahŕňa  racionálne vydobytie už otvorených zásob ložiska hnedého uhlia v DP Modrý Kameň a citlivý prístup k zamestnanosti v regióne. Veľká časť likvidačných prác hlavne v podzemí prebehne súčasne s doťažením sprístupnených uhoľných zásob. Náklady sú rozložené do deviatich rokov a ukončenie dobývacieho procesu je založené na princípe zachovania „ zelenej lúky“. CHLÚ by malo zostať vyhlásené  minimálne do obdobia úplného doznenia banskej činnosti na povrchu.

Príloha č. 4

Predpokladané celkové náklady na útlmové a likvidačné práce 
na Bani Dolina a.s. Veľký Krtíš

     Predpoklad celkových nákladov, pre prehľadnosť uvedený v tabuľkovej forme, vychádza z materiálov a.s. Baňa Dolina Veľký Krtíš :

-    „Návrh koncepcie útlmu banskej činnosti na Bani Dolina, a.s. Veľký Krtíš“;
-	vnútropodnikovej štatistiky sledovania nákladov na zabezpečenie banských diel a likvidácie banských diel v roku 2000  (júl až december 2000);
-	a zo súčasných známych skutočností vedenia Bane Dolina, a.s.

a ďalej z platných právnych predpisov, najmä :

-	zákona č. 44/1988 o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č.       498/1991 Zb.  
-	zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon),
-	zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ,
-	vyhlášky SBÚ č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch v znení vyhlášky SBÚ č. 533/1991 Zb.,
-	vyhlášky SBÚ č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom v znení vyhlášky SBÚ č 16/1992 Zb., 
-	vyhlášky SGÚ č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob v znení vyhlášky SGÚ č. 4/1992 Zb.,
-	zákona č. 160/1989 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom,
-	 vyhlášky FMPSV č. 19/1991 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve, dlhodobo nespôsobilých k výkonu doterajšej práce,
-	zákona č. 65/1965 Zb. (zákonníka práce) v znení neskorších predpisov a
-	kolektívnej zmluvy a.s. Baňa Dolina.

Postupné kroky útlmu banskej činnosti a likvidácie hnedouhoľnej bane
v a.s. Baňa Dolina Veľký Krtíš v období rokov 2001 – 2004

Rok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
Ťažba v tis. ton | 320 | 270 | 170 | Max. 100
Prípravné a vrtné práce | 1 650 b.m. | 1 200 b.m. | - | -

Vysporiadanie zásob

-

Odpis zásob 3., 5.pole – I.časť, 8.pole - Západ

8. pole – zásoby viazané v ohradníkoch chodieb č. 08 101,08 201,
08 102, 08 202

5. pole – II. časť,
9. a 10. pole

Zabezpečenie, likvidácia

8. pole – Východ + 15 vrtov z povrchu

3.pole + 25 vrtov z povrchu

8. pole – ch.č. 08 101,
08 201, 08 102, 08 202
+ 25 vrtov z povrchu

5., 9. pole + 25 vrtov z povrchu + vrtaná jama
VJ-1 (Strháre)

Sanácia povrchu

Úpadnica Slatinka

Rozvod VN-I.etapa.,
ventilátorovne Strháre a Bukovec,
Trafostanice a vedenia, rekultivácie Strháre a Bukovec

Rozvod VN- II.etapa
Likvidácia nepotrebných vrtov v areáli Selce

Rozvod VN-III. etapa,
začiatok rekult. haldy,
začiatok likvidácie budov v areáli B.D., ktoré sa nedajú využiť na inú činnosť

Ekologický monitoring | V zmysle schváleného POPD | Vrtanie 2 pozorovacích vrtov | Vypracovanie štúdie vplyvu vytápania podzemia B.D. na vodný zdroj Žihlava a celý D.P. Modrý Kameň | Podľa záverov štúdie

Admistratívne úkony

PLZ
8. pole – Východ

PLZ
3. pole,

PLZ
8. pole : 08 101, 08 201,
08 102, 08 202

PLZ
5., 10. Pole

PLZ :	 Plán likvidácie a zabezpečenia v zmysle vyhl. SBÚ č. 89/1988 Zb., vypracovaný organizáciou a schvaľovaný príslušným OBÚ
Odpis zásob : v zmysle vyhl. SGÚ č. 97/1988 Zb., vypracovaný organizáciou a schvaľovaný MŽP SR
Sanácia povrchu : podľa konkrétnej situácie v zmysle banských a stavebných predpisov
POPD : Plán otvárky, prípravy a dobývania v zmysle vyhl. 89/1988 Zb., vypracovaný organizáciou a schvaľovaný príslušným OBÚ