Informácia
o časovom harmonograme prípravy, predloženia projektov Európskej komisii a implementácie projektov v rámci operačného programu Doprava 

Operačný program Doprava 2007-13 (OPD) tvorí Vládou SR schválený indikatívny zoznam projektov (zásobník), a tieto sú v priebehu programovacieho obdobia implementované priebežne.

Prijímatelia sú v rámci OPD vopred definovaní (Železnice SR, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) a v priebehu programovacieho obdobia vypracujú a predkladajú Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekty zaradené do zásobníka:
•	žiadosti na projekty do 50 mil. €  (tzv. malé projekty) sú predkladané Riadiacemu orgánu pre OPD (MDPT SR) na schválenie. Príslušný odborný útvar sa k predloženej ŽoNFP vyjadrí do lehoty určenej správnym poriadkom MDPT SR – do 30 dní od doručenia dokumentácie.
•	žiadosti projekty nad 50 mil. € (tzv. veľké projekty) sú predkladané na posúdenie RO OPD. Príslušný odborný útvar sa k žiadosti vyjadrí do lehoty 30 dní od doručenia. Pri splnení požadovaných náležitostí predloží RO žiadosť Európskej komisii, kde je predmetom posudzovania podľa vnútorných postupov EK a vydania rozhodnutia EK v súlade s článkom 41 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006. V prípade nesplnenia požadovaných náležitostí vráti žiadosť na dopracovanie.

Za účelom stanovenia harmonogramu implementácie boli Rozhodnutiami Ministra DPT SR 
č. 3/2009, 5/2009, 6/2009 a 9/2009 schválenými v Porade vedenia ministerstva, určené Prijímateľom záväzné termíny predkladania Žiadostí o NFP na Riadiaci orgán pre OPD, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tab. č. 1: Harmonogram predkladania žiadostí o NFP	
Prijímateľ / Prioritná os / Názov projektu	Termín predloženia ŽoNFP na RO OPD	
ŽSR	PO 1	Modernizácia žel.trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov	 	
		Úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá	11/2009	
		Úsek Trenčianska Teplá - Ilava – Beluša	04/2009	
		Modernizácia žst. Čierna nad Tisou	01/2011	
		Projektová dokumentácia, úsek Liptovský Mikuláš – Košice	05/2009	
	PO 3 	Inteligentný dopravný systém riadenia terminálov intermodálnej prepravy	11/2009	
		Verejný terminál intermodálnej prepravy ZS	06/2009	
		Verejný terminál intermodálnej prepravy Bratislava	06/2009	
	PO 4	Napojenie letiska MRŠ (ÚNS)	06/2010	
		Odbočka Vinohrady - Bratislava predmestie - Bratislava Nové mesto - ÚNS (vrátane napojenia letiska od BNM, interoperabilita)	06/2010	
		Prepojenie koridorov - Bratislava predmestie - Filiálka - Bratislava Petržalka	06/2010	
		IDS Košice	12/2011	
		Trať Bosákova - Janíkov Dvor	06/2010	
ZSSK	PO 6	Nákup 10 ks eletrických poschodových jednotiek	03/2009	
		Nákup 10 ks vozidiel prímestkých poschodových jednotiek PUSH/PULL, úprava 10 ks elektrických HDV radu 263,  nákup 2ks elektrických viacsystémových HDV	03/2009	
		Nákup 12 ks medziregionálnych motorových jednotiek	03/2009	
SSC	PO 5.2	I/75 Galanta, obchvat 2. a 3. stavba	09/2009	
		I/68 Prešov - Škultétyho – ZVL	09/2009	
		IDS najväčších aglomerácií SR	2010	
		Celoštátne centrum riadenia a bezp. cest. dopravy	2010	
NDS	PO 2	D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Strážov	03/2009	
		D3 Svrčinovec – Skalité	06/2009	
		D1 Jablonov  - Studenec	05/2009	
		D3 Oščadnica – Čadca	11/2010	
		D1 Prešov západ - Prešov juh – tunel	11/2010	
		D3 Čadca Bukov – Svrčinovec	12/2009	
	PO 5.1	R4 Košice – Milhosť	10/2009	
		R2 Lipovník - Jablonov nad Turňou	11/2011	
		R2 Ožďany – Zacharovce	11/2011	
		R2 Pstruša – Kriváň	06/2010	
		R2 Ruskovce – Pravotice	12/2009	

Tab. č. 2: Stav implementácie projektov OPD	
Veľké projekty	Stav implementácie	
D1 Sverepec – Vrtižer 	18.2.2009 schválený na EK	schválená hodnota projektu 263 473 152 EUR	
R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie	3.2.2009
zaslaná na EK	žiadosť je posudzovaná EK	
I/61 Trenčín - most	neoficiálne doručená na RO v decembri 2008	prebiehajú konzultácie s JASPERS, následne bude finálna verzia zadaná do ITMS a zaslaná na EK (predpokladaný termín - apríl 2009)	
Žilina - Krásno nad Kysucou, modernizácia trate	23.12.2008 
vrátená z EK	9.3.2009 neoficiálne poslaná na EK po zapracovaní pripomienok	
Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce, modernizácia trate	18.8.2008 zaregistrovaná v ITMS	žiadosť je konzultovaná a doplňovaná v spolupráci s JASPERS
plánované predloženie na EK v 1. polroku 2009	
 	
Malé projekty	Stav implementácie	
Trnava - severný obchvat, II. a III. etapa	4.3. 2009 predložené na RO	žiadosť je posudzovaná RO	
D1 Studenec - Behárovce	3.3. 2009 predložené na RO	žiadosť je posudzovaná RO	
Terminál intermodálnej prepravy Žilina - projektová príprava	13.2.2009 schválený RO	schválená hodnota projektu 460 800 EUR	
Technicko- ekonomická štúdia: koľajová trať na území mestskej časti Bratislava Petržalka	2.7.2008
schválený na RO	schválená hodnota projektu 126 137 EUR	
Technicko- ekonomická štúdia Implementácia integrovaného dopravného systému na území Bratislavy	2.7.2008
schválený na RO	schválená hodnota projektu 126 137 EUR	
Štúdia integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc	2.7.2008
schválený na RO	schválená hodnota projektu 163 310 EUR