NÁVRH

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 
z 

k návrhu na zmenu termínov plnenia úloh B.1. a B.2. uznesenia vlády SR   č. 189 z 27.2.2002 

Číslo materiálu: |

Predkladateľ:

minister pôdohospodárstva SR 
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Vláda 
A.	mení
v uznesení vlády SR číslo 189 z 27. februára 2002
A.1.	v bode B.1.
a)	termín úlohy z 30.6.2002 na 30.11.2002

A.2.	v bode B.2.
a)   termín úlohy z 31.3.2002 na 31.12.2002    
b)	znenie úlohy takto:
„ zabezpečiť bezodplatné odovzdanie dokončenej prípravnej dokumentácie pre preložku štátnej cesty II/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná Vodohospodárskou výstavbou, š.p. Bratislava a jej prevzatie Slovenskou správou ciest“

Vykonajú:	minister pôdohospodárstva 
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií