Predkladacia správa

       Ministerstvo kultúry SR predkladá na rokovanie vlády SR materiál týkajúci sa návrhu na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby “Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum - Obnova a revitalizácie historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave“ (ďalej len „MKKC“)
Stavba MKKC sa začala v roku 2001, keď celý projekt  schválila vláda SR uznesením     č. 344 z 19. apríla 2001. 
Počas výstavby sa však realizačný projekt stavby musel z dôvodov  nepredvídaných pamiatkových a statických nálezov v rekonštruovaných historických objektov prepracovať, čím sa zvýšili predpokladané rozpočtované náklady na jednotlivé stavby a stavbu ako celok. Nezávislý technicko-ekonomický expertízny posudok potvrdil opodstatnenosť zvyšovania ceny prác a objektivizoval rozsah vecného plnenia a finančných nákladov na uvedenie stavby do prevádzky. Uznesením vlády SR č. 195 z 3. marca 2004 bol schválený návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby na 496 980 000,- Sk vrátane DPH. 
Projekt „MKKC“ je členený na 3 čiastkové stavby: 1. Kláštor klarisiek na Klariskej ul. č. 3 - 5, 2. paláce Uhorskej kráľovskej komory na Michalskej ul.č.1  a Ventúrskej ul. č.13  a Leopolda de Pauliho na Ventúrskej ul. č. 11, 3. Novostavba podzemných skladov, rekonštrukcia nových skladov a  Lisztovho pavilónu a úprava Lisztovej záhrady.
           Z troch čiastkových stavieb dve už slúžia verejnosti, a to zrekonštruované budovy kláštora klarisiek (od r. 2003) a  barokových palácov uhorskej kráľovskej komory a Leopolda de Pauliho (od r. 2005). Tretia stavba, ktorej súčasťou je  novostavba nadzemných a podzemných knižných skladov, rekonštrukcia Lisztovho pavilónu a záhrady, bude dokončená v máji 2006.
Renováciou hlavných budov sa vytvorili predpoklady na fungovanie modernej knižnice a kultúrneho centra. Naďalej však pretrváva problém skladovania a pružného sprístupňovania knižných fondov. Prevažná časť knižného fondu je stále deponovaná v skladoch dislokovaných  mimo areálu knižnice.
       Všetky stavebné práce na tretej stavbe MKKC budú vykonané v rámci schváleného rozpočtu, dodávka skladových technológií je však finančne vykrytá len čiastočne. Disponibilný rozpočet stavby umožňuje síce osadiť koľajnice pod regály  na všetkých osem podlaží skladov, ale len na dve z nich nainštalovať aj kompaktné knižničné regály. Vybavenie ostatných šiestich podlaží kompaktnými regálmi do skončenia tretej stavby MKKC si vyžiada ďalších 25 000 000,- Sk (vrátane DPH). Uvedené kapitálové výdavky sú zabezpečené v rámci rozpočtovej kapitoly rezortu Ministerstva kultúry SR.  
       Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie vlády SR sa predkladá bez rozporov.