Príloha č. 3

Rozpis prác a činností zabezpečovaných do konca roku 2004
A.	EIA  (891 000;-Sk bez DPH - s DPH 1 060 290;-Sk)
1.	Spracovanie rozšíreného zámeru podľa zákona č. 127/1994 Z.z.
2.	» Inžinierska činnosť- právoplatné rozhodnutie MŽP
B.	Geologický prieskum ( 1 360 000;-Sk bez DPH - s DPH 1 618 400;-Sk)
1.	Vytýčenie geologický vrtov
2.	Geologické a Hydrogeologické práce, radónový prieskum, prieskum znečistenia
3.	Spracovanie údajov, vyhodnotenie záverečná správa
C.	Geodetické práce ( 384 000;-Sk bez DPH - s DPH 456 960;-Sk)
1.	Zameranie trás existujúcich inžinierskych sietí
2.	Výškopisné a polohopisné zameranie štátnej cesty 54
3.	Výškopisné a polohopisné zameranie pozemku cca 6,5 ha
4.	Výškopisné zameranie línie budovanej trasy odvodnenia
D.	Rekonštrukcia kanalizačného zberača, posúdenie stokovej siete. ( 16 337 000,-Sk bez DPH
- s DPH 19 441 030;-Sk)
1.	Odborno-technický posudok stokovej siete pre napojenie
2.	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
3.	Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia
4.	Výber dodávateľa
5.	Realizácia
E.	Prekládka tranzitného VTL plynovodu ( 7 012 000;-Sk bez DPH - s DPH 8 344 280;-Sk )
1.	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
2.	Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia
3.	Výber dodávateľa
4.	Realizácia
F.	Prekládka linky 22 kV vedenia ( 3 869 000, Sk bez DPH - s DPH 4 604 110;-Sk)
1.	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
2.	Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia
3.	Výber dodávateľa
4.	Realizácia
G.	Napojenie na infraštruktúru:   prípojka plynu VTL s regulačnou stanicou, prípojka vody,
 prípojka splaškovej kanalizácie, odvedenie dažďových vôd do riečky Kamečnica, prípojka
el. energie 2xlinka 110kV, Transformačná stanica a rozvodná s prístupovou komunikáciou 110kV/22kV,    oprava št. cesty 54 s doplnením odbočovacích a pripojovacích pruhov,  prestavba križovatky št. cesty 54 a 581, telekomunikačná prípojka.
( 8 524 000;-Sk bez DPH - s DPH 10 143 560;-Sk )
1.	Projektová dokumentácia pre územné konanie
2.	Zabezpečenie právoplatné územné rozhodnutie
3.	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
4.	Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia.
H. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre infraštruktúru ( 3 639 806,7-Sk bez DPH - s DPH 4 331 370;-Sk)
1.	Identifikácia vlastníkov.
2.	Zabezpečenie geometrických plánov.
3.	Príprava a uzavretie zmlúv
4.	Zabezpečenie zapísania vecných bremien vedenia prekladaných inžinierskych sietí.