VLÁDA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

N á v r h

UZNESENIE
VLÁDY  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

k 

Návrhu na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Rekonštrukcia objektu LUNA pre Slovenskú poľnohospodársku knižnicu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a jej zaradenie v roku 2002 medzi stavby financované z individuálnych výdavkov

Číslo uznesenia	:

Zo dňa			:

Číslo materiálu	:

Predkladateľ		:   minister školstva

Podnet			:   iniciatívny materiál

Stupeň utajenia	:

VLÁDA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

A.	s c h v a ľ u j e

návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov  stavby Rekonštrukcia objektu LUNA pre Slovenskú poľnohospodársku knižnicu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zo 74,999 mil. Sk na 162,342 mil. Sk, z toho stavebné práce 142,8 mil. Sk a jej zaradenie medzi stavby financované v roku 2002 z individuálnych výdavkov. Obstarávacia cena vo výške 162 342 tis. Sk je maximálna a termín dokončenia stavby je najneskôr v roku 2004.

B.	s ú h l a s í

     B.1. so zaradením stavby Rekonštrukcia objektu LUNA pre Slovenskú poľnohospodársku knižnicu SPU Nitra medzi stavby financované v roku 2002 z individuálnych výdavkov

     B.2. so zvýšením obstarávacej ceny uvedenej stavby na 162 342 tis. Sk s tým, že táto cena je maximálna

     B.3. s ukončením stavby najneskôr v roku 2004

C.	u k l a d á

ministrovi školstva  SR

Zabezpečiť kapitálové výdavky na stavbu Rekonštrukcia objektu LUNA pre Slovenskú poľnohospodársku knižnicu pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre v rokoch 2002 až 2004 v rámci rozpočtu rezortu školstva a zaradiť ju medzi stavby financované v roku 2002 z individuálnych výdavkov

Termín: priebežne v roku 2002 a v ďalších rokoch

Vykoná: minister školstva SR