Návrh
Harmonogram
organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 
v roku 2010
___________________________________________________________________________

Na prípravu a vykonanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky je potrebné  
z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

Úloha 										Termín

Ministerstvo vnútra SR

1. | Vypracovať pokyn pre voľby do Národnej rady SR a vzory volebných tlačív | | do 5. marca 2010

2.

Zabezpečiť tlač a distribúciu volebných tlačív, metodických, informačných materiálov a materiálov na vybavenie volebných miestností obvodným úradom

od 15. marca 2010
       do 4. júna 2010

3. | Vydať metodický postup financovania výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Národnej rady SR | | do 15. marca 2010
4. | Vykonať školenia určených zamestnancov obvodných úradov a zapisovateľov obvodných volebných komisií | | do 16. apríla 2010
5. | Doručiť zoznam kandidátov obciam prostredníctvom obvodných úradov | | do 3. mája 2010
6. | Doručiť hlasovacie lístky a  obálky obciam prostredníctvom obvodných úradov | | do 3. mája 2010
7. | Vydať pokyn na ochranu verejného poriadku a na organizáciu hlasovania v celách policajného zaistenia | | do  10. mája 2010
8. | Zabezpečiť elektronické komunikačné spojenie volebných orgánov všetkých stupňov | | do 4. júna 2010

Štatistický úrad SR

1. | Vypracovať po dohode s Ministerstvom vnútra SR metodiku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady SR | | do 5. marca 2010

2.

Vytvoriť odborné sumarizačné útvary Ústrednej volebnej komisie a obvodných volebných komisií

od 14. marca 2010
do 18. apríla 2010

3. | Vykonať školenie určených zamestnancov štátnej štatistiky | | do 16. apríla 2010
4. | Vydať usmernenie na financovanie výdavkov spojených s prípravou a spracovaním výsledkov volieb | | do 30. apríla 2010

5.

Vypracovať projekt automatizovaného spracovania 
výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady SR 
v roku 2010

do 5. mája  2010

6. | Zabezpečiť  elektronické komunikačné  spojenie  odborných sumarizačných útvarov obvodných volebných komisií a Ústrednej volebnej komisie | | do 1. júna  2010
7. | Spracovať výsledky volieb | | 14. júna 2010

Ministerstvo spravodlivosti SR

1.

Vydať pokyn k činnosti okresných súdov vo veci  
námietkového konania k stálym zoznamom voličov

do 15. marca 2010

2. | Vydať pokyn na  organizáciu  hlasovania v miestach, kde sa vykonáva väzba	 a trest odňatia slobody | | do 9. apríla 2010

Ministerstvo zahraničných vecí SR

1. | Doručiť zastupiteľským úradom Slovenskej republiky informáciu ministerstva vnútra o hlasovaní prostredníctvom pošty | | do 26. marca 2010

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

1. | Prijať opatrenia súvisiace s voľbou poštou | | do 31. marca 2010

Obvodný úrad – prednosta obvodného úradu

1.

Vypracovať harmonogram organizačno-technického 
zabezpečenia volieb na podmienky obvodného úradu

do 12. marca 2010

2. | Určiť zodpovedných zamestnancov obvodného úradu na prevzatie a ďalšiu distribúciu volebných tlačív a na plnenie ďalších úloh spojených s prípravou a zabezpečením volieb | | do 12. marca 2010
3. | Vymenovať zapisovateľa obvodnej volebnej komisie | | do 6. apríla 2010

4.

Zabezpečiť doručenie volebných tlačív obciam

od 6. apríla 2010  
do 4. júna 2010

5. | Zabezpečiť financovanie činnosti obvodnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií | | do 16. apríla 2010
6. | Zabezpečiť prostriedky potrebné na činnosť obvodnej volebnej komisie | | do 18. apríla 2010
7. | Vymenovať chýbajúcich členov obvodnej volebnej komisie | | 19. apríla 2010
8. | Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie | | do 3. mája 2010
9. | Metodicky usmerňovať orgány obcí pri plnení úloh spojených  s prípravou  a vykonaním  volieb | | priebežne
10. | Vykonať školenia  členov obvodných volebných komisií,  zapisovateľov,  predsedov, podpredsedov  okrskových volebných komisií a starostov obcí | | do 28. mája 2010
11. | Doručiť zoznam kandidátov obciam | | do 3. mája 2010
12. | Doručiť hlasovacie lístky a obálky obciam | | do 3. mája 2010
13. | Predložiť požiadavky na elektronické komunikačné spojenie  obvodných a okrskových volebných komisií Slovak Telecomu, a.s. | | do 4. mája 2010
14. | Zabezpečiť ochranu výpočtovej techniky a komunikačných prostriedkov  obvodnej volebnej komisie | | odo dňa inštalácie, do osobitného pokynu na jej likvidáciu
15. | Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od obvodnej volebnej komisie | | bezodkladne po ukončení činnosti obvodnej volebnej komisie

Obec – starosta obce

1. | Vypracovať organizačno-technické zabezpečenie volieb  na podmienky  obce | | do 12. marca 2010

2.

Určiť zamestnancov zodpovedných za organizačné         
a technické zabezpečenie volieb

do 17. marca 2010

3. | Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti | | do 3. apríla 2010
4. | Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie | | do 13. apríla 2010
5. | Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie | | 19. apríla 2010

6.

Zapísať do osobitného zoznamu voličov tých voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadajú o voľbu poštou

od doručenia žiadosti 
do 23. apríla 2010

7.

Viesť evidenciu žiadostí voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadajú o voľbu poštou

od doručenia žiadosti 
do 23. apríla 2010

8. | Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a poučiť zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií o ochrane osobných údajov | | do 3. mája 2010
9. | Riešiť podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania | | do troch dní od podania námietky
10. | Zaslať obálky, hlasovacie lístky a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou | | do 8. mája 2010

11.

Vydávať voličské preukazy a viesť ich evidenciu

od 13. mája 2010
do 10. júna 2010

12. | Zabezpečiť doručenie zoznamu kandidátov voličom | | do 18. mája 2010
13. | Zabezpečiť doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb voličom | | do 18. mája 2010
14. | Vyhradiť miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií | | do 21. mája  2010
15. | Zabezpečiť vybavenie volebných miestností | | do 11. júna 2010
16. | Doručiť hlasovacie lístky a  obálky okrskovej volebnej komisii | | najneskôr 12. júna 2010

17.

Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov 
v dvoch rovnopisoch

12. júna  2010 
najneskôr 2 hodiny
 pred začatím  hlasovania

18.

Odovzdať doručené návratné obálky okrskovej volebnej komisii

12. júna 2010 
najneskôr do skončenia hlasovania

19. | Odovzdať doručené návratné obálky a osobitný zoznam voličov okrskovej volebnej komisii, v ktorej zozname voličov sú zapísaní voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky | | 12. júna 2010
20. | Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od okrskových volebných komisií | | bezodkladne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie