Príloha č. 3

Návrh časového harmonogramu realizácie daru

Vzhľadom na akútnosť riešenia bude zabezpečená projektová príprava a inžiniersku činnosť priamym zadaním. Na základe spracovanej projektovej dokumentácie sa uskutoční výber dodávateľa stavebnomontážnych prác.

Návrh časového harmonogramu:

1.	Prerokovanie materiálu „Návrh na zabezpečenie realizácie daru 
vlády ČĽR vláde SR“ vládou SR					jún – júl 2003	
2.	Formálne prijatie daru výmenou listov				jún – júl 2003
3.	Spracovanie jednostupňového projektu v zmysle zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov			jún – júl 2003
4.	Zabezpečenie vyjadrení a stanovísk					         júl 2003
5.	Zlúčené územné a stavebné konania					         júl 2003
6.	Výber zhotoviteľa v súlade so zákonom č. 263/1999 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov		         júl 2003
7.	Odovzdanie staveniska – začatie stavby				   august 2003
8.	Ukončenie stavby – kolaudácia				          december 2003